개별 투자심사 사업 추진현황

1

사업명

대로1류5호 안전한 보행환경 조성사업

담당자

도시재생과 조기웅(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보도의 연속성 확보로 보행환경 개선에 따른 안전성 확보

○ 차량 중심에서 보행자 및 자전거 중심으로 저탄소 녹색 교통활성화 정책에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 01. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 중앙체육공원 ~ 원팔봉삼거리

○ 규 모 : L=2,100m, B=20⇒35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,295	7,478	1,691	1,197	929
국 비	4,000	3,300	700
시 도 비
시군구비	7,295	4,178	991	1,197	929
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 1구간(중앙체육공원~2공단사거리 L=1,260m) 공사준공 : 2017.5.24

○ 2구간(2공단사거리~원팔봉삼거리 L=840m) 기층포장완료 : 2014. 1. 24

□ 향후계획

○ 2구간 공사준공 : 2017.10.21

2

사업명

서동농촌테마공원조성사업

담당자

농촌활력과 김종수(☎859-7222)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연 친화적인 휴식․체험․교육 공간 마련으로 도․농 교류 촉진 및

지역경제 활성화와 농가소득 증대

○ 기존관광지(서동공원)과 연계 개발로 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2016년

○ 위 치 : 익산시 금마면 신용리 일원

○ 규 모 : A=79,430㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,393백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,393	13,393	313
국 비	5,000	5,000
시 도 비	8,393	8,080	313
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

❍ 농촌테마공원조성사업 신규사업 선정(농식품부)	2009. 02.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 승인(전라북도)	2010. 03.

❍ 공유재산관리 변경 계획 승인	2010. 03.

❍ 지방재정 투∙융자심사 완료(전라북도)	2010. 05.

❍ 농촌테마공원조성사업 일괄위탁 계약(한국농어촌공사)	2010. 09.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(1차) 승인	2011. 04.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(2차) 승인	2011. 10.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(3차) 승인	2013. 01.

❍ 농촌테마공원조성사업 시행계획 승인	2013. 06.

❍ [금마관광지 지정 및 조성계획]변경 승인(전라북도)	2013. 06.

❍ 농촌테마공원조성사업 설계심의 완료	2013. 09.

❍ 농촌테마공원조성사업 계약심사 완료	2013. 10.

❍ 농촌테마공원조성사업 착공	2013. 11.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인	2014. 12.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인(2차)	2015. 12.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인(3차)	2016. 06.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인(4차)	2016. 12.

❍ 교통영향평가 변경 심의	2017. 07.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인(4차)	2017. 07.

□ 향후계획

○ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경                  : 2016. 8.

○ 금마관광지 구역 및 조성계획 변경 승인                : 2017. 8

○ 사업준공                                             : 2017. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경(당초 : 2010 ~ 2017. 6.  변경 : 2010 ~ 2017. 12.)

3

사업명

신재생자원센터 매립장 2단계 조성

담당자

청소자원과 구성준(☎859-5427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생자원센터 매립시설 1단계분 사용연한 임박( ‘17년)에 따른 2단계분 조성

○ 생활폐기물의 안정적이고 위생적인 최종처분시설 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 선화로 823

○ 규 모 : 15,841㎡(143,169㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016연도	2017연도	2018연도 이후
계	5,250	250	1,667	3,047	286
국 비	1,575	-	500	914	161
시 도 비	-	-	-
시군구비	3,675	250	1,167	2,133	125
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역 완료)

○실시설계용역 착수	: 2015.12.16.

○재원협의(환경부) 및 원가심사(전북도)	: 2017. 7.14.

○실시설계 완료	: 2017. 7.25.

□ 향후계획

○ 공사 발주	: 2017. 7월

□ 사업변경 내역(총사업비 변경시 변경 예정)

○ 사업기간 변경 : 2017년 → 2018년

○ 사업비 변경 : 5,250 → 4,758백만원

4

사업명

함열농공단지 조성

담당자

경영개발과 권명오(☎859-4521)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득 증대

○ 중소기업체의 공업입지 제공으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 8 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 익산시 함열읍 와리 323번지 일원

○ 규 모 : 329,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	비고
		기투자	‘16년도	‘17년도
계	35,000	14,426	10,297	10,277
국 비	3,000	2,280	720
시 도 비	500	500
시군구비	200	200
민간자본	31,300	11,446	9,577	10,277

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74.2%)

○ 신규농공단지 지정승인(농식품부)    : 2011. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주         : 2011. 12.

○ 문화재 지표조사 완료               : 2012.  5.

○ 농공단지 지정고시                 : 2014.  7.

○ 농공단지 지정(변경)고시            : 2015.  7.

○ 사업착공                          : 2015. 11.

○ 문화재시굴조사 완료               : 2016.  1.

○ 토지보상 완료                     : 2016.  5.

○ 문화재 발굴조사 완료              : 2016.  6.

○ 농공단지 관리기본계획 고시        : 2016.  7.

○ 농공단지 분양공고                 : 2016. 10.

□ 향후계획

○ 사업완료                           : 2017. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 30,000백만원(당초) ⇒ 35,000백만원(변경)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(당초) ⇒ 2011 ~ 2017(변경)

○ 변경사유 : 함열농공단지 조성을 위한 SPC설립으로 사업시행자 변경에 따른

재원변경 등

5

사업명

한센인 간이양로시설 기능보강사업

담당자

녹색환경과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한센인의 노후생활의 안정적인 도모 및 삶의 질 향상

○ 열악한 주거시설의 환경개선을 통한 건강증진 및 복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 신축 173세대, 개보수 33세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,492백만원(국비 6,019, 도 2,608, 시 6,365, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,492	9,892	3,920	1,680
국 비	6,020	3,577	1,766	677
시 도 비	2,607	1,463	778	366
시군구비	6,365	4,372	1,356	637
기타(특교세)	500	480	20

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○'11년도 사업 준공(2013. 7. 17.) : 신축 43세대, 개보수 18세대(익산농장)

○'12년도 사업 준공(2014. 2. 28.) : 신축 43세대, 개보수 15세대(금오․신촌농장)

○'13년도 사업 준공(2015.10. 26.) : 신축 22세대(익산농장)

○'14년도 사업 준공(2016. 2.  1.) : 신축 24세대(금오농장)

○'15년도 사업   준공(2017.  6.   2..) : 신축 41세대(익산농장)

□ 향후계획

○ 주민 입주                                       : 2017. 7.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 변경 : 당초 10,500백만원 → 변경 15,492백만원

▸당초 지원단가 1,094천원/㎡→ '13년~'15년 사업에 대해 1,630천원/㎡로 변경

6

사업명

익산천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과 정웅(☎859-5442)

□ 사업목적 및 필요성

○『왕궁 정착농원 환경개선 종합대책(2010. 7월)』에 따른 왕궁 정착농원 생태환경 복원으로 새만금호 수질 확보

○ 새만금 수질개선을 위한 주교제 내 오니토 처리로 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년~2017년

○ 위 치 : 익산천, 3개 소류지(주교제, 용호제, 학평제)

○ 규 모 : 생태하천 복원 및 생태습지와 수변녹지 조성(익산천2.83km, 소류지106,676㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,000백만원(국비 9,100, 시비 3,900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,000	5,890	6,026	1,084
국 비	9,100	4,425	4,211	464
시 도 비
시군구비	3,900	1465	1,815	620
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 왕궁 환경개선종합대책 발표                    : 2010. 7.10.

○ 공유재산 취득승인                             : 2013. 7.

○ 공사 착공                                     : 2015. 7.

○ 공사 준공                                     : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 주교제 생태습지 유지관리                      : 2017. 5.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비변경 : 당초  27,741백만원 → 변경  13,000백만원

▸주교제 공사 부지면적 축소

7

사업명

소라산공원 조성사업

담당자

도로공원과 박정렬(☎859-5893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심내 쾌적한 휴식공간 및 가족단위 여가활용 공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2020년

○ 위    치 : 익산시 영등동 268-1번지 일원

○ 사업규모 : 81,331㎡(영등지구 55,000㎡, 남중지구 26,331㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,000	11,109	820	200	2,871
국 비	3,000	3,000
시 도 비
시군구비	12,000	8,109	820	200	2,871
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  67%)

○ 실시계획 인가(영등지구)  -----------------------------  2010. 12. 23

○ 편입토지 및 지장물 손실보상(영등지구)  --------  2009. 6월 ~ 현재

○소라산 자연마당 조성사업 추진 ---------------------------- 2014.11. ~ 2015.12.

□ 향후계획

○소라산 공원(영등지구) 화장실 조성 설계용역 ---------- 2016.04. ~ 2016.08.

○소라산 공원(영등지구) 화장실 조성사업 추진 ---------- 2016.08. ~ 2017.06.

○소라근린공원(남중지구) 조성계획변경 및 설계용역 -------- 2016.08. ~ 2017.12.

○소라근린공원(남중지구) 추진 -------------------------------------------- 2018. ~ 2020

8

사업명

마한로미개설구간 도로개설공사

담당자

도시재생과 전종민(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영등택지개발지역 일원을 지나는 산업도로등의 교통량 분산을 통하여

교통체증 해소 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 07. ～ 2020. 12.

○ 위 치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

○ 규 모 : L=590m, B=25m(대로3류14호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,000	900		500	6,600
국 비
시 도 비
시군구비	8,000	900		500	6,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지매입 19%)

○ 31필지 13,000㎡ 중 6필지 2,518㎡ 보상(19%) 완료

□ 향후계획

○ 2017년 토지매입 추진(500백만원)

9

사업명

이리남부지구 중로2류43호선 도로개설공사

담당자

도시재생과 전종민(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동익산역 진입로 집단민원 해소와 장래 남부지역 개발촉진 도모로 시민편익

증진과 주거환경개선에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 06. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 익산시 인화동2가 105-17번지 일원

○ 규 모 : L=284m, B=17m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800	2,700	200	0	900
국 비
시 도 비
시군구비	3,800	2,700	200	0	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지매입 54%, 지장물 철거 완료)

○ 18필지 2,598㎡ 중 13필지 1,402㎡

□ 향후계획

○ 토지매입 및 공사 추진

10

사업명

팔봉근린공원(부송지역) 조성공사

담당자

도로공원과 박정렬(☎859-5893)

□ 사업목적 및 필요성

부송도서관과 연계한 도심내 쾌적한 휴식공간 및 여가활용 공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006년 ~ 2019년

○ 위    치 : 익산시 부송동 284-24번지 일원

○ 사업규모 : 29,503㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,000	2,790			4,210
국 비
시 도 비
시군구비	7,000	2,790			4,210
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 실시계획인가  ---------------------------------------------------  2010. 12. 23

○ 편입토지 및 지장물 손실보상  ----------------------------  2008. 1월 ~ 현재

□ 향후계획

○ 잔여토지 손실보상

○ 시설공사 추진

11

사업명

귀금속보석산업 클러스터 구축 2단계

(귀금속보석산업 고도화육성사업)

담당자

한류패션과 김관옥(☎859-4383)

□ 사업목적 및 필요성

○ 귀금속 디자인 기술지원센터 및 아파트형 표준공장을 건립하여 영세한 주얼리        기반을 지원하고, 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2018.

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 동용리 768 보석가공단지 내

○ 규 모 : 부지 12,734㎡, 연면적 8,600㎡

○ 사업내용

‣ 귀금속보석 디자인․기술지원센터 및 임대형공장(26개실) 건립

‣ 디자인․기술지원센터 장비구입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	19,300	1,828	2,099	2,600	2,869
국 비	13,700	1,826	2,077	2,000	2,869
시군구비	5,600	2	22	600	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 중기지방재정계획 반영	: ’11. 11.

○ 지방재정 투융자심사(중앙심사)	: ’12.  3.

○ 익산시의회 공유재산 취득승인	: ’12.  9.

○ 기본 및 실시설계 용역	: ’14.  7.

○ 공사 착공	: ’14. 12.

○ 공사 및 용역 일시중지                            : ’15.  2.

○ 공사 재개                                        : ’16.  7.

□ 향후계획

○ 골조공사 완료                                    : ’17.  7.

○ 공사 준공                                         : ‘17. 12.

○ 시설 입주                                         : ‘18.  2.

12

사업명

문화예술의 거리 조성사업

담당자

문화관광과 유영일(☎859-5826)

문화관광과 임종인(☎859-5877)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙동 문화예술의 거리 내 랜드마크로서 거점공간 조성

○ 문화예술 활동 구심점 마련과 역세권 연계를 통한 구도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2018

○ 위 치 : 익산시 중앙동 문화예술의거리

○ 규 모 : 거점공간 조성 및 문화예술 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,031백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,580	3,130	836	265	800
국 비
시 도 비	2,290	1,390	135
시군구비	2,290	1,740	701	265	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 문화예술의거리 정착을 위한 문화예술인 지원 및 프로그램 지속 운영

구분	위치	사업비	시설규모	사업계획	비고
거점-1	중앙동2가 45	8억 (시8)	2층 396.56㎡	아트몰 + 창작스튜디오	공사중 (2017. 01. ~ 08.)
거점-2	중앙동2가 40-2	20억 (국10,도5,시5)	2층 310.34㎡	등록문화재 ‘구 삼산의원’이전	근대문화관 활용 (2017. 05. ~ 2018.)
거점-3	중앙동2가 36-2	8억 (특6,시2)	2층 400㎡예정	청년창업+문화소통	2017. 07. ~ 2018.

□ 향후계획

○ 문화예술의거리 정착을 위한 문화예술인 지원 및 프로그램 지속 운영

○ 거점공간 조성 추진

13

사업명

익산 중요무형문화재 통합전수관 건립

담당자

역사문화재과 송대성(☎859-5792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중요 무형문화유산의 열악한 전수환경을 개선하고 전통문화유산과의       공간적 집적화 및 효율성 극대화를 통해 문화예술의 상생발전과 함께 보존       전승의 맥을 잇는 기반을 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 익산시 익산대로 21길 1-9

○ 규 모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

- 국가무형문화재(이리농악, 이리향제줄풍류) 및 시립국악원(시립풍물단 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,600	2,350	1,370	2,880
국 비	3,300	1,650	500	1,150
시 도 비	1,650	350	435	865
시군구비	1,650	350	435	865
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사착공 : 2014. 10. 8.

○ 공사준공 : 2016. 8. 10.

○ 개    관 : 2016 . 9. 22

□ 사업변경 내역 : 문화재청 협의과정에서 총사업비 조정변경

(단위 : 백만원)

구 분	계	변경전	변경후
계	6,000	7,154	6,600
국 비	3,000	3,577	3,300
시 도 비	1,500	1,788	1,650
시군구비	1,500	1,789	1,650

14

사업명

마동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 조승재(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 부족 및 노후화로 유지관리비 증가

○ 지역주민의 행정서비스 개선 및 문화활동 공간 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2018년

○ 위 치 : 익산시 중앙동 25길 5-4(마동)

○ 규 모 : 지하1층 / 지상4층(부지 1,876㎡ / 건축 1,968.60㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	5,690	1,066	1,256	3,368
국 비
시 도 비
시군구비	4,690	1,066	1,256	2,368	-
기 타	1,000			1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2012년

○ 설계용역 완료	2014년

○ 공사착공	2017년

□ 향후계획

○ 준공	2016년 ~ 2018. 6월

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 1,876㎡, 연면적 1,820㎡	2013 ~ 2016	4,715백만원
변 경	토지면적 1,876㎡, 연면적 2,000㎡	2013 ~ 2018	5,690백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정		건축비 조정 및 물가상승 반영

15

사업명

모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 조승재(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2019년

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 180번지 일원

○ 규 모 : 지상1층 / 지상4층(부지 4,486㎡ / 건축 2,634㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,668백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	5,668			308	5,360
국 비
시 도 비
시군구비	5,668			308	5,360
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2012년

○ 주민센터 신축 협의(국민안전처) 완료	2016년

○ 설계용역 착수	2017년

□ 향후계획

○ 공사착공	2018년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 3,304.8㎡, 연면적 1,820㎡	2013 ~ 2014	5,668백만원
변 경	토지면적 4,854.0㎡, 연면적 2,634㎡	2013 ~ 2019	5,668백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정	예산확보에 따른 사업기간 연장

16

사업명

익산종합비즈니스센터

담당자

투자유치과 유정옥(☎859-5766)

□ 사업목적 및 필요성

○익산 국가산업단지는 조성된지 40년이상 경과되어 산업구조 및 경제여건

변화로 향토기업들이 경력을 잃어가고 있는 상황으로 이지역을 구조고도

화를 통한 융복합 지역으로 개발하여 산업, 교육, 문화, 관광이 함께하는

우리시의 대표적인 랜드마크로 개발하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년~2017년(5년)

○ 위 치 : 익산시 약촌로 10길 30일원(국가산단 내 귀금속 2단지)

○ 규 모 : 연면적 8,548㎡(지하1층,지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	17,500	8,400	2,000	7,100
국 비	4,000	1,800	500	1,700
시 도 비	1,200	1,200	0
시군구비	2,800	2,800	0
지 방 채
민간자본
기 타	9,500	2,600	1,500	5,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59.5%)

○공사 착공 : 2015. 12. 29.

○기존 건축물 철거 및 폐기물처리

○기초공사추진

○건축공사추진(골조공사, 공정율 59.5%)

□ 향후계획

○공사 준공 : 2017. 5. 28.

○입주기관 입주(조명연구원, 3D프린팅 호남거점센터 등)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 건물층수 변경(지하2층, 지상6층 ⇒ 지하1층, 지상6층)

○ 건물면적 변경( 9,256㎡ ⇒ 8,548㎡)

17

사업명

유턴기업(주얼리)집적산업센터건립

담당자

한류패션과 김지윤(☎859-4382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 투자여력이 약한 주얼리기업의 협력업체와 원부자재상가에 저렴한 아파트형공장        지원을 통한 패션주얼리 산업생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : ’14. 2. ～ ’16. 6.

○ 위 치 : 익산제3일반산업단지 주얼리단지(익산시 낭산면 구평리 1519)

○ 규 모 : 부지면적 7,340㎡, 연면적 7,074㎡

○ 사업내용 : 공장(37실) 및 상가(8실) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   12,129백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,074	5,768	5,306	0	0
국 비	4,712	2,264	2,448	0	0
시 도 비	2,775	1,298	1,477	0	0
시군구비	3,587	2,206	1,381	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 관계부처 통한 예산확보 확정	: ‘13.7. ~’13.8.

○ 중기지방재정계획 반영	: ‘13.11.

○ 기본 및 실시설계 용역	: ‘14. 5. ~ ’14.12.

○ 공사 착공	: ‘15.4.27.

○ 준공	: ‘16. 6.

○ 공장 및 상가 입주추진	: ‘16. 10.

□ 향후계획

○ 주얼리 집적산업센터 기업 유치 추진

‣국내․외 주얼리 기업, 협력업체 및 원․부자재상가 등

18

사업명

천서․왕궁지구 하수관거정비공사

담당자

하수도과 송석민(☎859-4467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 만경강 수계지역으로 환경기초시설 미비로 하천의 수질오염이 심화되어 새만금 담수호 수질에 영향을 주는 생활하수를 적정 처리하여 수질오염을 방지하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리 17-55번지 일원(익산, 금오, 신촌농장),

익산시 춘포면 천서리, 오산리, 창평리, 쌍정리 일원

○ 규 모 : 오수관로 45.2km, 배수설비 857개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,486백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	25,486	17,215	6,816	1,455
국 비	17,840	12,973	4,867
시 도 비	765	556	209
시군구비	6,881	3,686	1,740	1,455
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  97%)

○ 익산시 하수도 기본계획 반영                     : 2009. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역                           : 2013. 12.

○ 새만금지방환경청 재원협의                       : 2014.  8.

○ 조달청 공사발주                                 : 2014. 12.

○ 공사 1~2차분 완료 및 3~4차분 추진 중 (총공정 97%)

- 관거신설(오수관) L=43.9km, 배수설비 690가구, 맨홀펌프장 33개소

□ 향후계획

○ 공사 계속추진[관거신설(오수관) L=1.4km, 배수설비 167가구]

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 21,064백만원 → 25,486백만원(2015. 3)

19

사업명

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 고남수(☎859-5937)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및 구도심 주거환경개선을 통한 시민 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,700㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 887세대(임대 200/ 분양 687)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=779m, B=10~25m - 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2020년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,575백만원(국 4,805 시 9,990, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,575	10,670	1,500	-	2,405
국 비	4,085	4,085	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,900	6,085	1,500	-	2,405
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

◦ 전라북도 투융자 심사(적정)	: 2005.  5.  3

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007.  7.  6

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⟺ LH공사)      : 2008. 11. 11

◦ 사업시행인가 고시                                       : 2014.  4. 18

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016.  6. ~

◦ 지장물 철거                                        : 2017.  5. ~

□ 향후계획

◦ 공사 착공                                          : 2018.  2. ~

◦ 공사 준공                                          : 2020.  2. ~

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2005 ~ 2017년 ⇒ 변경 2005 ~ 2020년

20

사업명

동산동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 조용섭(☎859-5678)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2018년

○ 위 치 : 익산시 동산동 1000-1,2,3,4,7

○ 규 모 : 지상1층 / 지상5층(부지 6,600㎡ / 건축 2,670㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	6,154	238	1,210	4,706
국 비
시 도 비
시군구비	6,154	238	1,210	4,706
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2013년

○ 설계용역 완료	2014년

○ 공사착공	2016년

□ 향후계획

○ 준공	2016년 ~ 2018. 6월

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 6,001㎡, 연면적 1,820㎡	2014 ~ 2016	4,943백만원
변 경	토지면적 6,600㎡, 연면적 2,670㎡	2014 ~ 2018	6,154백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정	준공시기 미도래에 따른 연장	건축비 조정 및 물가상승 반영

21

사업명

미륵산 산림복원사업

담당자

산림과 임성훈(☎859-5853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 훼손이 심각한 미륵산을 생태적으로 건전하고 경관성이 우수한 산림으로       복원 하여 시민들에게 건강한 산림생태환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 2 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 익산시 금마․삼기․낭산면 미륵산

○ 내 용 : 훼손지 식생복구(샛길 폐쇄), 녹색숲길 조성, 정상부 복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,131백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,131	1,000	630	501
국 비	1,492	700	441	351
시 도 비
시군구비	639	300	189	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 미륵산 산림복원사업 장기 총괄계속계약(2014~2016)

○ 미륵산 산림복원사업 감리 용역 발주

○ 미륵산산림복원사업 1차분 준공                    : 2015. 12

▸ 훼손이 심각한 4개 노선(기양제,미륵사지,사자암,과학고) 식재 및 복원공사

○ 미륵산산림복원사업 2차분 준공                    : 2015. 12

▸ 훼손지 식재공, 복원공(과학고 등),샛길폐쇄, 타이어매트 시공 등

○ 미륵산 산림복원사업 3차분 준공                    : 2016. 12.

▸ 정상부 복구(사양토 성토, 관목식재, 데크설치 등)

□ 향후계획

○ 생태적으로 건강하 산림으로 지속적 관리 및 모니터링 실시

22

사업명

함열용왕교차로～삼기일반산단

도로확․포장공사

담당자

건설과 박춘수(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열 ~ 삼기간 교통수요 증가에 대비하고 물류수송 비용 절감으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 6 ~ 2019. 12

○ 위    치 : 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기 일반산업단지경계(군도 23호선)

○ 사업규모 : 도로 확포장 L=3.4km, B=16.5~20.5m, 설계속도 V=60㎞/h

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,500	320	1,100	1,200	9,880
국 비
시 도 비
시군구비	12,500	320	1,100	1,200	9,880
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  17% )

○ 지방재정 투융자 심사           : 2013. 6.

○ 실시설계 용역 추진             : 2013. 7 ~ 2015. 1

○ 편입토지 및 지장물 손실보상    : 2016. 5 ~ 현재

○ 지방재정 투자(재)심사           : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 편입토지 및 지장물 손실보상     : 2017. 7 ~ 2018. 6

○ 도로확포장공사 착공 및 공사추진 : 2018. 3 ~ 2019. 12

□ 사업변경 내역

○ 당   초 : 사업비(7,820백만원)  / 2013. 6 ~ 2017. 12

○ 변   경 : 사업비(12,500백만원) / 2013. 6 ~ 2019. 12

23

사업명

화정지구 소규모 공공하수도설치사업

담당자

하수도과 신성철(☎859-4467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 금강 수계지역으로 환경기초시설 미비로 하천의 수질오염이 심화되어 생활하수를 적정 처리하여 수질오염을 방지하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 망성면 내촌리 화정마을 일원

○ 규 모 : 오수관로 10.4km, 마을하수처리장1개소 120㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	5,464	4,864	600
국 비	3,825	3,825
시 도 비
시군구비	1,639	1,039	600
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 익산시 하수도 기본계획 반영                  : 2009. 12

○ 지방재정 투․융자 심사                       : 2013. 11

○ 새만금지방환경청 재원협의완료                : 2014. 10

○ 전라북도 원가심사완료                        : 2014. 12

○ 공사 1차분 완료 및 2차분 추진 중 (총공정 91.5%)

- 관거신설(오수관) L=10.0km, 배수설비 218가구

□ 향후계획

○ 공사 계속추진[관거신설(오수관)

[L=0.1km, 배수설비 38가구, 마을하수 처리장 1개소]

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 4,132백만원 → 5,464백만원(2015. 3.)

24

사업명

KTX 서부역사진입로 확장공사

담당자

도시재생과 조기웅(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 외부광역교통망과 KTX 익산역간 연계교통망 확충으로 철도이용 편익 도모         및 이용객 수요증가에 따른 능동적 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2016. 12

○ 위 치 : 송학동 235-73번지 (중앙지하차도) 일원

○ 규 모 : L=500m, B=25m⇒50m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	46,500	25,981	9,579	10,940
국 비	21,490	10,304	696	10,940
시 도 비
시군구비	24,560	15,677	8,883	1
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○  기획재정부 총사업비 219,4억원 증액승인        : 2014. 3. 7.

○  실시설계용역 완료(익산시 구간 – 500m)       : 2014. 7. 9.

○ 한국철도시설공단과 익산시간 위․수탁 협약체결 : 2014.09.24

○ 공사 착공                                     : 2014. 11. 19

○ 공사(1차분) 준공                               : 2015. 5. 31

○ 공사(2차분) 준공                               : 2016. 11. 30.

○  시공평가 및 건설사업관리용역 평가            :  2017. 2. 21

○  지목변경 및 토지합병 완료	:  2017. 3. 09

○  사업비정산(110억/100%)                       :  2017.  02. 03.~5.23

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

25

사업명

2018년 제99회 전국체전 관련 경기장 개보수 사업

담당자

전국체전담당관 임방엽

(☎859-7662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년 제99회 전국체전 주 개최지인 익산시의 노후화된 경기장 시설을       리모델링하여 전국체전 성공개최에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 전북 익산시 무왕로 1397 익산종합운동장 외 종목별 경기장

○ 규 모 : 전국체전 주경기장(익산종합운동장) 외 19개소 경기장 개보수 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,138백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	37,138	900	9,254	24,240	2,744
국 비	11,141	-	3,046	7,844	251
시 도 비	9,151	-	3,554	5,494	103
시군구비	16,846	900	2,654	10,902	2,390

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 전국체전 대비 경기장 개보수 설계용역 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○ 종목별 경기장 조사 : 2016. 1. ~ 2017. 6.

□ 향후계획

○ 익산종합운동장 개선공사 착공 : 2017. 3. 20.

○ 종합운동장 외 종목별 경기장 개보수 공사

○ 전국체전 경기장 개선공사 준공 : 2018. 6월

○ 2018년 제99회 전국체육대회 개최 : 2018. 10월

26

사업명

가람문학관(시조) 건립

담당자

문화관광과 임종인(☎859-5877)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가람 이병기 선생의 업적과 정신을 기리고 문학정신 콘텐츠 개발

○ 전시공간에서 벗어나 교육과 힐링을 제공하는 문화관광자원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2017

○ 위 치 : 익산시 여산면 원수리 575-2번지 일원(생가 주변)

○ 규 모 : 연면적 996㎡ 규모 문학관 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,801백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계		430	1,915	1,456
국 비	1,266		766	500
시 도 비
시군구비	2,535	430	1,149	956
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 건립부지 토지매입 완료

○ 설계용역 완료

○ 건립공사 진행중

□ 향후계획

○ 건립공사 완료 및 개관 : 2017. 10월

○ 가람선생 유물 등 전시자료 지속 확보

27

사업명

도시 취약지역 생활여건 개조

담당자

도시개발과 소범섭(☎859-4206)

□ 사업목적 및 필요성

○ KTX 익산역 주변 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2018년(4년)

○ 위 치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

○ 규 모 : 약 35,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,624백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
계	6,624	30	1,883	1,700	3,011
국 비	4,368	3	1,758	1,070	1,537
시 도 비	616	1	24	154	437
시군구비	1,640	26	101	476	1,037
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○새뜰마을사업 스터플랜 승인(국토교통부)	: 2016. 08. 05

○도로개설공사 착공	: 2016. 10. 10

○주민공동이용시설 신축공사 착공	: 2017. 04. 28

□ 향후계획

○도로개설공사 추진	: 2017. 07. ~ 2018. 06

○주민공동이용시설 신축공사 추진	: 2017. 07. ~ 2017. 10

○완충녹지 조성사업 추진	: 2017. 09. ~ 2018. 09

28

사업명

서동생태관광지 조성

담당자

녹색환경과 한민철(☎859-5438)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 생태관광지 육성사업 조성 계획에 따른 금마관광지 내 생태학습        및 체험 기능 강화

○ 주민 참여로 소득 창출 기회를 부여함으로써 지역 경제력을 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2024

○ 위 치 : 금마저수지 및 금마관광지 일원

○ 규 모 : 서동공원 및 농촌테마공원 생태기능강화, 생태탐방로 설치

차폐식수 식재, 생테체험장 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	7,300	100	2	800	6,400
국 비	3,600		1	400	3,200
시 도 비	1,900	100	0.5	200	1,600
시군구비	1,800		0.5	200	1,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1.4 %)

○ 금마 서동생태관광지 마스터플랜용역 완료       : 2015. 08. 07. ~ 12. 06.

○ 수변데크 실시설계용역 발주 및 관련부서 협의          : 2016. 06. 09 ~

○ 전북도 컨설팅 결과에 따른 조정보완 통보 및 사업재조정  : 2017. 4 ~

□ 향후계획

○ 용역재착수 및 공사발주, 사업추진               : 2017. 09. ~

29

사업명

신재생자원센터 매립장 2단계 조성

담당자

청소자원과 구성준(☎859-5427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생자원센터 매립시설 1단계분 사용연한 임박( ‘17년)에 따른 2단계분 조성

○ 생활폐기물의 안정적이고 위생적인 최종처분시설 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 선화로 823

○ 규 모 : 15,841㎡(143,169㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016연도	2017연도	2018연도 이후
계	5,250	250	1,667	3,047	286
국 비	1,575	-	500	914	161
시 도 비	-	-	-
시군구비	3,675	250	1,167	2,133	125
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역 완료)

○실시설계용역 착수	: 2015.12.16.

○재원협의(환경부) 및 원가심사(전북도)	: 2017. 7.14.

○실시설계 완료	: 2017. 7.25.

□ 향후계획

○ 공사 발주	: 2017. 7월

□ 사업변경 내역(총사업비 변경시 변경 예정)

○ 사업기간 변경 : 2017년 → 2018년

○ 사업비 변경 : 5,250 → 4,758백만원

30

사업명

왕궁보석테마 대표관광지 육성

담당자

문화관광과  남승복(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 공약사업인 토탈관광의 일환인 왕궁보석테마 대표관광지 육성을 통한 지속적인 관광객 유입과 이에 따른 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

○ 규 모 : 160,460㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,500	1,000	1,000	1,650	5,850
국 비	3,300			500	2,800
시 도 비	5,000	1,000	1,000	750	2,250
시군구비	1,200			400	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 보석테마관광지(보석광장) 정비완료

○ 보석테마관광지(칠선녀광장) 정비완료

□ 향후계획

○ 보석테마관광지(보석숲 및 공룡테마공원) 정비추진 : 2017. 8 ~ 2017. 12

○ 연차별 사업추진 : 2018. 1 ~ 2019. 12

31

사업명

세계유산 홍보 시설물 설치

담당자

역사문화재과

조봉관(☎859-4496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사유적지구 세계유산 도시 익산 홍보, 브랜드가치 향상 및 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018년

○ 위 치 : 익산IC ~ 금마사거리

○ 규 모 : L=40m, B=5m, 지상2층 400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자(미준공)	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,890	150			3,740
국 비	-
시 도 비	-
시군구비	3,890	150			3,740
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.8%)

○ 설계용역 계약 : 2016. 8. 22. ~

□ 향후계획

○ 공공시설물 공공디자인(경관) 심사                     : 2017년

○ 익산시 공유재산관리계획 심의 등 절차이행             : 2017년

○ 기본 및 실시설계 용역, 공사시행                       : 2018년

32

사업명

모현동 배산∼장신택지간 (기쁨의교회옆) 도로개설

담당자

도시개발과 전종민(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가로망 구축으로 주거환경 개선 및 주민생활 편익도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 07. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 모현동 1가 643-66번지 일원

○ 규 모 : L= 145m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	100	1,200	1,700
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	100	1,200	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  토지매입 82%, 공사발주 완료)

○ 15필지 2,591㎡ 중 12필지 2,124㎡ 보상(82%) 완료

□ 향후계획

○ 미매입 토지 수용 추진

○ 공사추진

33

사업명

전북형농촌관광거점마을육성사업

담당자

농촌활력과 조도윤(☎859-7214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌체험마을 연계 및 광역화를 통한 관광자원 네트워크 구축 및 농촌관광    활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015년~2018년

○ 위 치 : 익산시 웅포면 강변로 284

○ 규 모 : 농촌관광 인프라 구축 및 개선, 농촌관광전문인력양성,

통합마케팅, 프로그램개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비	1,500	4.5	50	1,429.5	16
시 도 비
시군구비	1,500	4.5	50	1,429.5	16
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   4%)

○ 체험지도사양성과정 2회 실시          : ‘15. 9. ~ ’15. 11.

○ 기본계획수립 용역                    : ‘16. 4. ~ ’16. 8.

○ 향토음식개발 및 교육                 : ‘16. 4. ~ ’16. 6.

○ 체험프로그램 개발                    : ‘16. 4. ~ ’16. 6.

○ 경계측량비                           : ‘16. 10. ~ ’16. 11.

□ 향후계획

○ 실시설계용역                         : ‘16. 9. ~ ’17. 7.

○ 체험시설조성공사 및 감리용역         : ‘17. 7. ~

○ 체험조리사 자격증 취득               : ‘17. 8. ~

○ 체험기자재 구입                      : ‘17. 9. ~

○ 홍보마케팅 실시                      : ‘17. 10. ~

34

사업명

동산동 월담지구 새뜰마을사업

담당자

도시개발과 소범섭

(☎859-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2019년(4년)

○ 위 치 : 익산시 동산동 353-3번지 일원

○ 규 모 : 약 61,657㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,849백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,849	0	77	837	2,935
국 비	2,694	0	54	586	2,054
시 도 비	347	0	7	75	265
시군구비	808	0	16	176	616
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 착수              :  2016. 09. 19.

○우선사업(진입로 축대 개선공사) 실시설계용역 착수    :  2017. 07. 10.

□ 향후계획

○새뜰마을사업 마스터플랜 승인(지역발전위원회)        :  2017. 08.

○세부사업별 사업추진                                 :  2017. 09. ~

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당초 : 5,500백만원(국비 3,800, 도비 500, 시비 1,200)

- 현재 : 3,849백만원(국비 2,694, 도비 347, 시비   808)

35

사업명

북부지역 농업행정수도 건설

담당자

회계과 이하나(☎859-5667)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정조직 집적화를 통한 주민편익 증진 및 미래시설 투자비 절감 등

균형발전 전기 마련으로 북부권 농업행정수도 건설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2018. 8. (2년)

○ 위 치 : 함열읍 와리 220-6번지 외 7

○ 규 모 : 부지면적 16,203㎡ / 건물 연면적 7,662㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,100	0	2,000	5,000	6,100
국 비
시 도 비
시군구비	13,100	0	2,000	5,000	6,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53.4%)

○ 총사업비 13,100백 만 원 중 매입비 7,000백 만 원 지급한 상태로 현재

53.4% 추진함

○ 2018년 잔금 지급 및 소유권 이전등기 완료 후 즉시 리모델링 및 이전        완료 예정

□ 향후계획

○ 잔금(3,745백만원) 지급 및 소유권 이전등기         : 2018. 2.

○ 본관 동 리모델링 및 이전 완료                    : 2018. 2 ~ 8. 30

36

사업명

익산 역사문화도시 조성

담당자

역사문화재과

선일권(☎859-5798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사유적지구(왕궁리유적, 미륵사지)의 유네스코 세계유산 등재를  계기로 역사와 문화를 바탕으로 한 도시의 지속성장 동력 마련 필요

○ 역사를 바탕으로 시민이 만들어가는 왕도(王都) 익산을 통해 풍요로운 삶이 더해지는 역사문화도시 익산 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017 ~ 2021

○ 위  치 : 익산시 전역

○ 사업량 : 3개분야 13개프로그램

[콘텐츠 및 프로그램 운영(소프트웨어), 공간 및 장소 구축(하드웨어) 등]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,750			725	3,025
국 비	1,500			290	1,210
시 도 비	675			130	545
시군구비	1,575			305	1,270
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 문화특화지역(문화도시형) 조성사업 가내시     : 2016. 11.

○ 중기지방재정계획 및 2017년도 예산 반영      : 2016. 12.

□ 향후계획

○ 문화특화지역(문화도시형) 조성사업 추진       : 2017. ~ 2021.

37

사업명

공공체육시설 장애인 편의시설 설치

담당자

전국체전담당관 임방엽

(☎859-7662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 편의시설 설치로 경기장을 찾는 장애인 및 신체약자등도 편안한 관람공간 마련과 체육시설 활용기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 전북 익산시 무왕로 1397 익산종합운동장

○ 규 모 : 익산종합운동장 및 실내체육관

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,140백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,140	0	0	2,140
국 비	1,500	0	0	1,500
시 도 비	-	-	-
시군구비	640	0	0	640

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   20%)

○ 공사착공 : 2017. 3월

○ 장애인 편의시설 설치 공사중 : 2017. 6월

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2018. 6월

38

사업명

전라선 폐선부지 공원화사업

담당자

도로공원과 박정렬(☎859-5893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐선부지를 활용한 공원조성으로 휴식 및 여가활용 공간 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위    치 : 구)동익산역 ~ 춘포역

○ 사업규모 : L=4.8㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	200	435	1,256	1,109
국 비	928		300	628
시 도 비
시군구비	2,072	200	135	628	1,109
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  67%)

○ 남부권 나눔숲 조성사업 시행  ----------------------------------  2016 ~ 2017

○ 다기능 힐링공원 조성사업 실시설계용역 추진 -------- 2017. 3 ~ 2017. 10

○ 명품 가로숲길 조성사업 실시설계용역 추진 ------------ 2014.11. ~ 2015.10.

□ 향후계획

○ 다기능 힐링공원 조성사업 추진 ------------------------ 2017. 10 ~ 2018. 12

○ 명품 가로숲길 조성사업 추진 --------------------------- 2017. 10 ~ 2018. 12

39

사업명

소스산업화센터 건립

담당자

국가식품클러스터담당관 정재형(☎859-3966)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발효 원료 기반 소스산업 지원을 통한 미래 동반 신성장 산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018년

○ 위 치 : 국가식품클러스터 산업단지 내(S2)

○ 규 모 : 부지 6,611㎡(2,000평), 건축 724㎡(219평), 연면적 992㎡(300평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,223백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,223	0	34	3,067	5,122
국 비	6,900	0	34	1,744	5,122
시 도 비
시군구비	1,323	0	0	1,323
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 개념설계용역 준공, 1%)

○ 농식품부 사업추진 결정 및 입지 확정	: 2016.  6.  2

○ 소스산업화센터 기본계획 시달	: 2016.  6. 28

○ 2016년 설계용역비 예산(2억) 확정	: 2016.  8. 29

○ 2016년 제4차 지방재정 투자사업 도심사(조건부 추진)	: 2016. 10. 28

○ 2017년 공유재산관리계획(안) 심의(의회, 원안가결)	: 2016. 11.  7

○ 소스산업화센터 설계용역 사업계획 승인(농식품부)	: 2016. 11. 14

○ 2017년 국가예산 확정 내시(67억)	: 2016. 12.  6

○ 2017년 소스산업화센터 건립지원 사업계획 승인	: 2017.  4. 10

○ 소스산업화센터 개념설계용역 시행	: 2017.  2. ~ 6.

□ 향후계획

○ 소스산업화센터 S/W사업 착수	: 2017.  7.

○ 소스산업화센터 기본 및 실시설계용역 착수	: 2017.  8.

○ 소스산업화센터 건립공사 착공	: 2017. 12.

○ 소스산업화센터 장비 구축	: 2018.  1.

○ 소스산업화센터 운영	: 2019.  1.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비

- (당초) 8,000백만원(국비 7,000, 시비 1,000)

구 분	합 계	공사비	토 지 매입비	장비비	기 타
합 계	8,000	2,600	1,000	3,800	600
국 비	7,000	2,600		3,800	600
시 비	1,000		1,000

- (변경) 8,223백만원(국비 6,900, 시비 1,323)

구 분	합 계	건축비	기계장비 구 입 비	토 지 매입비	설 계 용역비	인건비 및 관리비
합 계	8,223	2,600	3,800	1,023	200	600
국 비	6,900	2,600	3,800		200	300
시 비	1,323			1,023		300

40

사업명

고품질 쌀 브랜드 육성사업

- 가공시설 현대화 (익산농협)

담당자

농식품유통과 문상훈(☎859-5784)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고품질쌀 브랜드(가공시설 현대화) 육성을 통한 생산기반을 구축하여

익산 쌀 산업의 경쟁력 향상 도모 및 농가소득 중대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 익산시 금강동 1113-20 외 1

○ 대 상 : 익산농협 RPC (조합장 김병옥)

○ 규 모 : 백미 7.5톤, 현미 9톤, 포장부 15톤 가공시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,469백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,469			7,469
국 비	1,515			1,515
시 도 비	454			454
시군구비	2,512			2,512
기 타	2,988			2,988

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건축 86%, 기계 50%)

○ 설계완료 : 2016.07.18.

○ 건축허가완료 : 2016.07.26.

○ 착공일 : 2016.09.26.

□ 향후계획

○ 준공전 성능검사 및 시운전 : 2017. 8월초

○ 준공   : 2017. 8월 중순

□ 사업변경 내역

○ 사업대상부지 변경(부지 확장 및 공장소음 민원 해결)

▸ 당초 : 익산시 금강동 1114-17외 1 ⇒ 변경 : 금강동 1113-20외 1

○ 사업비 변경 (5,049백만원 ⇒ 7,469백만원)