개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

새만금바이오순환림 조성사업(휴․폐업축사매입)

담당자

녹색환경과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『왕궁 정착농원 환경개선 종합대책(2010. 7월)』에 따라 정착농원 내 가축

분뇨 오염원의 근원적 제거로 정착농원 환경개선 및 새만금상류 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 휴․폐업축사매입 217,673㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,305백만원(도비 4,100, 시비 17,205)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,305	18,750	2,435	120
국 비
시 도 비	4,100	3,200	900
시군구비	17,205	15,550	1,535	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 101%)

○ “왕궁환경개선 종합대책” 발표(폐업 217천㎡ 매입)	: 2010.  7.

○ 특별관리지역 지정 연장 고시(폐업 50천㎡매입)	: 2016.  1.  25.

○ 연도별 매입 실적

계	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018
221,008	79,507	38,701	19,115	30,438	9,906	22,561	20,780

□ 향후계획

○ 축사 매도자 이주 완료                              : 2019.  5.

○ 사업 정산 및 마무리                                : 2019.  7. ~

□ 사업변경 내역

○ 매입면적 변경 : 당초 217,673㎡ → 221,008㎡(휴․폐업축사 3,335㎡추가매입)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

자연환경보전·이용시설 조성(바이오순환림 조성사업)

담당자

녹색환경과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕궁정착농원 매입 휴․폐업축사의 철거 및 바이오순환림 조성으로 훼손된

생태계 복원 및 새만금상류 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 바이오순환림 조성 332,903㎡(기 매입축사 115,230㎡ 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,750백만원(지특 13,500, 시비 3,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,750	12,845	1,666	2,239
국 비	13,500	11,545	955	1,000
시 도 비
시군구비	3,250	1,300	711	1,239
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

○ 바이오조성사업 추진(조성면적 : 259,142㎡)       : 2010.  1. ~ 2014. 5.

○ 사업 재추진('17년~'18년, 계획 미달성량 73,761㎡) : 2017.  1. ~

○ 2017년도 바이오순환림 조성(38,414㎡) 착공       : 2018.  2. ~

○ 연도별 조성 실적

계	2010	2011	2012	2017
297,556	102,341	77,530	79,271	38,414

□ 향후계획

○ 2017년도 바이오순환림 조성사업 준공            : 2019.  4.

○ 2018년도 바이오순환림 조성사업 착공            : 2019.  8. ~

○ 2018년도 바이오순환림 조성사업 준공            : 2019. 12.

□ 사업변경 내역

○ 조성면적 변경 : 당초 332,903㎡ → 336,238㎡(휴․폐업축사 3,335㎡추가 매입)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

마한로 미개설구간 도로개설공사

담당자

도시개발과 김용환(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01. ～ 2022. 12.

○ 위 치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

○ 규 모 : L=520m, B=25m(대로3류14호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,520백만원(공사비 3,842 보상비 4,678)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,520	723	1,374	6,423
국 비	900	400		500
시 도 비
시군구비	7,620	323	1,374	5,923
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 편입토지 등 보상(76%)                   : 2012.05 ~

○ 공사발주(총액발주)                       : 2018.11.22.

○ 1차분 공사착공                          : 2018.12.31.

□ 향후계획

○ 편입토지 등 보상(76%)                   : 2019.08 ~

○ 2차분 공사착공                          : 2019.08.

○ 1차분 공사준공                          : 2019.11.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이리남부지구 중로2류43호선 도로개설공사

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 06. ～ 2019. 12.

○ 위 치 : 익산시 인화동2가 105-17번지 일원

○ 규 모 : L=305m, B=17m(중로2류43호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,839백만원(공사비 1,589․보상비 2,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,839	2,751	40	1,048
국 비
시 도 비
시군구비	3,839	2,751	40	1,048
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 편입토지등 보상(100%)                    : 2011.09 ~ 2019.05.

○ 남부지구 중로2류43호 지장물 철거공사     : 2015.8.17.~2017.4.30

□ 향후계획

○ 공사착공 및 준공                         : 2019.08. ~ 2019.12

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

함열농공단지 조성공사

담당자

도시개발과 박찬민

(☎859-4523)

□ 사업목적 및 필요성

○ LED산업 집적화를 위한 생산기반 구축으로 지역경제 활성화

○ 북부지역 공단조성으로 지역균형 발전도모 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 함열읍 와리 및 용안면 동지산리 일원

○ 규 모 : 328,481.6㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	35,000	33,329	1,671		-
국 비	3,000	3,000
시 도 비	500	500
시군구비	200	200
지 방 채
민간자본	31,300	29,629	1,671
기 타

□ 추진상황(공정율 : 100 %)

○ 함열농공단지 조성 착공                            : 2015. 11. 27

○ 함열농공단지 조성 준공                            : 2018. 12.

○ 함열농공단지 조성 준공 인가                       : 2019. 02. 01.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

귀금속보석클러스터 조성사업

담당자

한류패션과 변민우(☎859-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 디자인센터와 지식산업센터 구축으로 기획·디자인·생산·판매·전시기능과 함께 관광기능까지 연결된 클러스터 구축으로 보석산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2018.

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 동용리 768번지

○ 규 모 : 대지면적 12,734㎡ / 건축규모 : 2동 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,612백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,612	12,038	5,282	1,292	0
국 비	13,012	9,809	1,915	1,288	0
도 비	0	0	0	0	0
시 비	5,600	2,229	3,367	4	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 지방재정 투·융자사업(중앙) 심사	: 2012년

○ 설계용역 완료	: 2014.  7.

○ 건축공사 착공                             : 2016.  7.

○ 건축공사 준공                             : 2017. 12.

○ 부대공사(CCTV설치 및 연결다리 차양 설치) : 2018.  1. ~ 4.

○ 전북디자인센터 입주 및 개소식              : 2018.  4.

○ 사무 및 교육용 기자재 구입                  : 2018.  5.

○ 귀금속 공용장비 구축 및 부대시설 설치      : 2018.  6. ~ 2019.  8.

□ 향후계획

○ 귀금속 공용장비 운영                      : 2019.  9. ~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

문화예술의 거리 조성사업

담당자

문화관광과  박정혁(☎859-5873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일상생활 속에서 자연스럽게 문화를 체험할 중앙동 구도심 내 역세권과 연계하는 특화 문화예술의거리를 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018

○ 위 치 : 전북 익산시 중앙동2가 45번지 앞 문화예술의거리(L=310m)

○ 규 모

구분	위치	시설규모	사업계획	비고
거점-1	중앙동2가 45	2층 396.56㎡	아트몰 + 창작스튜디오	공사완료 (2017. 1. ~ 9.)
거점-2	중앙동2가 40-2	2층 310.34㎡	익산 근대박물관 (‘구 삼산의원’이전)	공사완료 (2017. 5.~2019. 3.)
거점-3	중앙동2가 36-2	2층 300㎡	청년창업+문화소통	공사완료 (2018. 10.~2019. 4.)

- 거리 컨텐츠 운영 : 토요상설 문화행사 및 기획공연 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,359백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,.359	4,393	1,001	965	-
국 비	39		39
시 도 비	1,945	1,665	140	140
시군구비	4,375	2,728	822	825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○공유재산 관리계획 심의의력 : 2017. 05. 19.

○거점-1 준공                : 2017. 10.

○거점-2 준공                : 2019. 3.

○거점-3 준공                : 2019. 4.

□ 향후계획

○토요상설 문화행사 및 기획공연 운영 : 연중

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 전진수(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2020년

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 180번지 일원

○ 규 모 : 지상1층 / 지상4층(부지 4,486㎡ / 건축 2,763㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,500	182	64	4,200	1,054
국 비				1,000
시 도 비
시군구비	5,500	182	64	3,200	1,054
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2012년

○ 주민센터 신축 협의(국민안전처) 완료	2016년

○ 설계용역 착수	2017년

○ 공사착공	2018년

□ 향후계획

○ 공사준공	2020년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 3,304.8㎡, 연면적 1,820㎡	2013 ~ 2014	5,308백만원
변 경	토지면적 4,854.0㎡, 연면적 2,763㎡	2013 ~ 2020	5,500백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정	예산확보에 따른 사업기간 연장

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도23호선 도로확.포장공사

담당자

건설과 박춘수(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열 ~ 삼기간 교통수요 증가에 대비하고

물류수송 비용 절감으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 6 ~ 2020. 12

○ 위 치 : 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기 일반산업단지경계(군도 23호선)

○ 규 모 : 도로 확포장 L=3.4km, B=16.5~20.5m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,500	6,220	2,300	2,980	1,000
국 비
시 도 비
시군구비	12,500	6,220	2,300	2,980	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 지방재정 투융자 심사                 : 2013. 6.

○ 도시계획 시설결정 및 실시설계 용역   : 2013. 7 ~ 2015.  1

○ 편입토지 및 지장물 손실보상          : 2016. 5 ~ 2019.  7

○ 공사 추진                            : 2018. 5 ~ 2019.  7

□ 향후계획

○ 잔여 편입토지 및 지장물 손실보상     : 2017. 7 ~ 2019. 12

○ 도로확포장공사 추진                  : 2019. 8 ~ 2020. 12

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당   초 : 사업비( 7,820백만원) / 2013. 6 ~ 2017. 12

○ 변   경 : 사업비(12,500백만원) / 2013. 6 ~ 2020. 12

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 김혁주(☎859-5937)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및 구도심 주거환경개선을 통한 시민 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,599㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 1,027세대(임대 208/ 분양 819)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=1,084m, B=10~25m – LH공사 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2022년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,570백만원(국 4,805 시 9,985, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,570	12,170	-	-	2,400
국 비	4,085	4,085	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,985	7,585	-	-	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	500	-	-	-

□ 추진상황

◦ 전라북도 투융자 심사(적정)	: 2005.  5.  3

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007.  7.  6

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⟺ LH공사)      : 2008. 11. 11

◦ 사업시행인가 고시                                       : 2014.  4. 18

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016.  6. ~

◦ 지장물 철거(철거율 98%)                            : 2017.  5. ~

□ 향후계획

◦ 공사 착공                                          : 2019.  8. 8

◦ 공사 준공                                          : 2022.  5.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2005 ~ 2021년 ⇒ 변경 2005 ~ 2022년

○ 공동주택건설 : 당초 887세대 ⇒ 1,027세대

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동산동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 전진수(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2018년

○ 위 치 : 익산시 동산동 1000-1,2,3,4,7

○ 규 모 : 지상1층 / 지상5층(부지 6,600㎡ / 건축 2,359㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,154	1,738	4,416
국 비
시 도 비
시군구비	6,154	1,738	4,416
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2013년

○ 설계용역 완료	2014년

○ 공사착공	2016년

○ 공사준공	2018년

○ 진입교량 준공	2019년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 6,001㎡, 연면적 1,820㎡	2014 ~ 2016	4,943백만원
변 경	토지면적 6,600㎡, 연면적 2,359㎡	2014 ~ 2018	6,154백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정	준공시기 미도래에 따른 연장	건축비 조정 및 물가상승 반영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가람문학관 건립사업

담당자

문화관광과  박정혁(☎859-5873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가람 이병기 성샌의 업적과 정신을 문화관광 콘텐츠로 개발하고, 지역문학 부흥과 힐링의 공간조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 전북 익산시 여산면 원수리 575-2번지 일원

○ 규 모 : 대지 3,186㎡, 연면적 995㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,425백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,473	3,434	39	40
국 비	1,210	1,202	8	0
시 도 비
시군구비	2,263	2,232	31	40
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○전북 지방재정 투융자 심사(적정) : 2014. 10. 27.

○공유재산 관리계획 심의의력 : 2015. 04. 21.

○설계용역 시행 : 2015. 09. 21. ~2016. 08. 01.

○문학관 건립공사 : 2016. 09. 23. ~ 2017. 11. 03.

○BF인증 심사결과 통지(LH공사⇒익산시) : 2018. 03. 30.

○BF인증 보완완료 제출(익산시⇒LH공사) : 2018. 07. 20.

○BF인증 완료 : 2018. 9. 3.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

금마 서동 생태관광지 조성사업

담당자

녹색환경과 이은우(☎859-5438)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 생태관광지 육성사업 조성계획에 따라 도시형 생태관광지를 조성

하여 관광객 유치 및 지역 주민 수익창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2024년(10년간)

○ 위 치 : 익산시 금마면 동고도리 497-5(금마저수지 일원)

○ 규 모 : 금마저수지 수변 생태습지 복원, 생태습지 조성, 생태 관찰로 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,300	49	374	1,159	5,718
국 비	3,600	25	374	465	2,736
시 도 비	1,900	12	0	347	1,541
시군구비	1,800	12	0	347	1,441
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21.7%)

○ 금마 서동생태관광지(수변데크) 조성

□ 향후계획

○ 생태 습지복원 및 수변림 조성(2019)

○ 식물 학습원 조성(2020~2021)

○ 2차 데크(수변 탐방로) 조성(2021~2024)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시 취약지역 생활여건 개조

담당자

도시재생과 최종욱(☎859-5584)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시취약지역의 지속가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 창인동2가 1-160번지 일원

○ 규 모 : 약 35,089㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,924	4,934	1,990
국 비	4,368	3,160	1,208
시 도 비	578	423	155
시군구비	1,978	1,351	627
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 도시가스공급사업 및 주민공동이용시설 신축 공사 완료	: 2017. 11.

○ 주택정비사업 완료	: 2016 ~ 2018

○ 좁은골목길 확장공사, 휴먼케어 및 주민역량강화, 완충녹지조성사업 착수 및 추진	: 2018. ~

□ 향후계획

○ 가로환경정비사업, 휴먼케어 및 주민역량강화 사업 추진	: 2019. ~

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

모현동 배산~장신택지간 (기쁨의교회 옆) 도로개설

담당자

도시개발과 김용환(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 07. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 모현동 1가 643-66(종) ~ 636(대)

○ 규 모 : L=145m, B=20m(중로1류 6호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,675백만원(공사비 825 보상비 2,850)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,675	1,358	2,317
국 비
시 도 비
시군구비	3,675	1,358	2,317
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 편입토지 보상(완료)                        : 2016. 4. ~ 2018. 7.

○ 공사착공                                  : 2017.  8. 21

○ 공사준공                                  : 2018. 11. 17.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

세계유산홍보시설물 설치

담당자

역사문화재과 전도화(☎859-5793)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사유적지구 세계유산 등재에 따라 익산 관문에 홍보 시설물을      설치함으로써 유네스코 세계유산의 도시 익산 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ～ 2020년 12월

○ 위 치 : 금마면 일원

○ 규 모 : 홍보시설물 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   446백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	446	47			399
국 비
시 도 비
시군구비	446	47			399
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

❍ 세계유산 홍보시설물 설치계획 수립	: 2015. 10. 15.

❍ 설계용역업체 선정(길건축사무소)	: 2016. 8. 11.

❍ 세계유산 홍보시설물 설치계획 변경 보고        : 2017.9.11./2017.11.30.

❍ 설계용역 완료	: 2018. 4. 6.

□ 향후계획

○ 홍보시설물 설치 : 2020. ~ 2021.

(고도 탐방거점 조성 사업과 연계 추진)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 3,890 → 446 백만원

(홍보시설물 설치계획 변경으로 사업축소)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산 문화특화지역조성사업

담당자

역사문화재과

박수진(☎859-5798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사와 문화가 공존하여 지속적인 성장을 이끌어내는 역사문화도시 지정을 위한 예비      사업으로 문화특화지역(문화도시) 조성사업 추진

○ 역사를 바탕으로 시민과 함께하는 역사문화도시 조성 및 역사 정체성 확립

□ 사업개요

○ 사업대상 : 익산시 전역

○ 사업기간 : 2017 ~ 2021 (5년)

○ 총사업비 : 3,750백만원[국비(균특) 1,500  도비 675  시비 1,575]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,750	725	705	815	1,505
국 비	1,500	290	282	326	602
시 도 비	675	130	127	147	271
시군구비	1,575	305	296	342	632
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 문화특화지역조성 사업도입[1차년도 / 2017년]

▸역사문화도시 정책포럼 및 역사도시추진단 구성           : 2017. 5. ~ 7.

▸익산문화재단-원광대학교 도시문화연구소 업무협약 체결   : 2017. 11.

▸지역문화 네트워크 구축을 위한 시민단체 간담회(12개단체) : 2017. 12.20

○ 문화특화지역조성 사업 전개[2~3차년도 / 2018년~2019년]

▸역사예술 감성교육(동아리, 예술소풍, 실기대회 등)

▸라이브 고도 미디어 월 설치(익산역) 및 운영

▸왕도정원 가꾸기(남부시장 광장. 금마 이주단지, 모현동 옥창마을)

▸역사놀이터 한마당 운영(남부시장)

▸청년역사꾼 고도 LAB(창업지원 4팀) 및 익산 아카이브 왕도인

□ 향후계획

◦ 문화특화지역(문화도시) 조성사업(3차~5차년도)       : 2019. ~ 2021.

◦ 문화도시 조성계획 승인                           : 2019. 11.

◦ 문화도시 예비사업                                : 2019. 11. ~ 2020. 11.

◦ 문화도시 지정                                    : 2020. 11.

◦ 문화도시 조성사업 추진(5년간)                     : 2021. ~ 2025.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전북형농촌관광거점마을육성사업

담당자

농촌활력과 김동주(☎859-7223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌체험마을 연계 및 광역화를 통한 관광자원 네트워크 구축 및 농촌관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 웅포면 강변로 284 일원

○ 규 모 : 체험관시설 조성, 다목적구장 조성, 체험프로그램 개발, 음식개발 및 운영실습 교육, 체험지도사 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,100	613	2,370	117
국 비	1,550	306.5	1,185	58.5
시 도 비
시군구비	1,550	306.5	1,185	58.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 96%)

○ 체험지도사 양성과정 실시	: 2015.  9월 ~ 2015. 11월

○ 향토음식 및 체험프로그램 개발	: 2016.  4월 ~ 2016.  6월

○ 기본계획수립 용역	: 2016.  4월 ~ 2016. 10월

○ 실시설계 용역	: 2016. 10월 ~ 2017.  7월

○ 체험관시설 조성	: 2018.  9월

○ 홈페이지 제작	: 2019.  2월

○ 다목적구장 조성	: 2019.  6월

□ 향후계획

○ 사업 정산 및 행정절차 완료	: 2019. 12월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

왕궁보석테마 대표관광지 육성

담당자

문화관광과  정 웅(☎859-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 공약사업인 토탈관광의 일환인 왕궁보석테마 대표관광지 육성을 통한 지속적인 관광객 유입과 이에 따른 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

○ 규 모 : 160,460㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,150	3.650	2,300	1,200
국 비	1,000	500	500
시 도 비	4,550	2,750	1,000	800
시군구비	1,600	400	800	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 보석테마관광지(보석광장, 칠선녀광장) 정비완료

○ 보석테마관광지(보석숲, 공룡테마공원) 정비 완료

○ 생태습지공원(주차장, 연결교량)공사중

○ 공룡테마공원, 이벤트광장 실시설계 용역중

□ 향후계획

○ 생태습지공원(주차장, 연결교량)공사 준공 : 2019.10까지

○ 공룡테마공원, 이벤트광장 공사추진 : 2019. 9 ~ 2019. 12

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신재생자원센터 매립장 2단계 조성

담당자

청소자원과 배석진(☎859-5427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1단계 매립시설 사용년한 도래로 인한 2단계 매립시설 조성을 통한

건강한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 익산시 선화로 823(신재생자원센터 내)

○ 규 모 : 매립장조성 A=15,228㎡, 에어돔설치(112×135m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,714 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,714	1,091	2,774	849
국 비	1,414	270	832	312	-
시 도 비
시군구비	3,300	821	1942	537	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75 %)

○ 매립장 터파기 등 토공 완료

○ 침출수 차수시설 및 지하수 배제시설 설치 완료

○ 우수배제 시설 설치 완료

□ 향후계획

○ 매립장 지붕 설치 완료  : 2019. 2 ~ 5.

○ 공사 준공              : 2019. 5.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모: 당초 15,841㎡,      변경 15,228㎡

○ 총사업비: 당초 4,975백만원,   변경 4,714백만원

○ 사업기간: 당초 2016 ~ 2018,  변경 2016 ~ 2019

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동산동 월담지구 새뜰마을 사업

담당자

도시재생과 최종욱(☎859-5584)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시취약지역의 지속가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 동산동 356번지 일원

○ 규 모 : 약 43,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,850	914	972	1,964
국 비	2,694	640	680	1,374
시 도 비	346	82	87	177
시군구비	810	192	205	413
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 산사태 위험지구 개선사업 및 주택정비사업 완료	: 2018. 12.

○ 사면보강사업 착수 및 추진	: 2019. 3. ~

○ 마을안길정비사업 토지보상 추진	: 2019. 7. ~

□ 향후계획

○ 안전사업(사면보강사업 및 축개개선사업) 추진	: 2019. 8. ~

○ 마을안길정비(소방도로 개설) 및 도시가스 공급	: 2019. 8. ~

○ 주민공동이용시설 신축 및 주민역량강화 사업 추진	: 2019. 8. ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 감 50,456㎡ → 43,300㎡

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

소스산업화센터 건립

담당자

국가식품클러스터담당관 윤훈식(☎859-3966)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발효 원료 기반 소스산업 지원을 통한 미래 동반 신성장 산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426

○ 규 모 : 부지 6,537.6㎡, 건축 1,036.74㎡, 연면적 1,480.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,223백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,223	8,223	500	500	1,000
국 비	7,900	6,900	250	250	500
시 도 비	300	-	75	75	150
시군구비	2,023	1,323	175	175	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률, 97%)

○ 소스산업화센터 개념설계용역 시행	: 2017.  2. ~ 6.

○ 소스산업화센터 기본 및 실시설계용역	: 2017. 10. ~ 18. 5.

○ 소스산업화센터 홈페이지·정보구축용역	: 2018. 4. ~ 12.

○ 소스산업화센터 부지 소유권 이전(LH⟹익산시)       : 2018. 7.

○ 소스산업화센터 건립공사 착공	: 2018. 8. 27. ~

○ 소스산업화센터 홍보영상 제작 용역	: 2019. 3. ~ 7.

○ 소스산업화센터 국제 심포지엄 개최	: 2019. 6. 26.

□ 향후계획

○ 소스산업화센터 건립공사 준공 및 기계장비 구축	: 2019.  8.

○ 소스산업화센터 국제기준인증(HACCP)취득 용역	: 2019.  8. ~ 12.

○ 소스산업화센터 준공식	: 2019. 11.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전라선 폐선부지 공원화사업

담당자

늘푸른공원과

양유영(☎859-5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원조성으로 시민들에게 휴식공간 제공 및 녹지공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 전라선 폐선부지(인화동 ~ 춘포면)

○ 규 모 : A=137,816㎡, L=4.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,070	2,070	1,000	1,000
국 비	1,628	628	500	500
시 도 비	90	90
시군구비	2,052	1,052	500	500
지 방 채
민간자본
기 타	300	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 남부권 나눔숲 조성사업 준공                    : 2018. 06.

○ 다기능 힐링공원 조성사업, 명품 가로숲길 조성사업,

공공시설 여성화장실 확충사업 공사 시행중       : 2017. ~ 2019.

○ 대규모 도시숲 조성사업(1차) 공사 시행 중        : 2018. ~ 2019.

○ 대규모 도시숲 조성사업(2차) 발주 의뢰           : 2019. 07.

□ 향후계획

○ 다기능 힐링공원 조성사업, 명품 가로숲길 조성사업, 공공시설 여성화장실

확충사업, 대규모 도시숲 조성사업(1차) 준공      : 2019. 11.

○ 대규모 도시숲 조성사업(2차) 공사 착공           : 2019. 08.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서동역사문화공원조성사업

담당자

역사문화재과 박주영(☎859-5779)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고도 지정의 근간이 되는 백제 무왕(서동)의 탄생설화에 따른 마룡지와       서동생가터의 주변에 대한 정비를 통해 백제왕도 익산의 정체성을 회복       하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ~ 2022년 12월

○ 위 치 : 익산시 금마면 서고도리 374 일원

○ 규 모 : 서동생가 재현, 수변데크 및 전망데크 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,430	770	88	1,917	16,655
국 비	13,600				13,600
시 도 비	2,915				2,915
시군구비	2,915	770	88	1,917	140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 진입부 쉼터정비 및 정비공사	: 2017. 7. ~ 12.

○ 도시관리계획 결정 및 공원조성계획수립	: 2018. 4. ~ 2019. 12.

○ 문화재 지표조사	: 2018. 10.

□ 향후계획

○ 토지보상 추진	: 2019. ~ 2020.

○ 생가재현 및 체험단지 조성 등	: 2020. ~ 2022.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산시 보훈회관 건립

담당자

복지정책과 황강원(☎859-5348)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관이 건립된 지 38년이 경과하여 노후하고 협소한 관계로

관내 9개 보훈단체를 전부 수용할 수 없음

○ 보훈회관 신축을 통해 보훈단체 회원 간 화합과 친목을 다지고 복지증진을

도모하여 국가유공자를 예우하고 자긍심을 고취하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 익산시 익산대로64길 38

○ 규 모 : 부지 654.9㎡, 연면적 932㎡(282평)/ 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,630	0	0	0	3,630
국 비	500	0	0	0	500
시 도 비	500	0	0	0	500
시군구비	2,630	0	0	0	2,630
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 지방재정투자심사, 중기지방재정심사, 공유재산관리계획 심의 : 2017 ~ 2018

○ 설계용역 수행 : 2019. 4. ~ 9.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2019. 9.

○ 착공 / 준공 : 2019. 11 ~ 2020. 12

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 비 : 당초 3,000백만원 ➝ 변경 3,630백만원

○ 사업규모 : 당초 1,320㎡ ➝ 변경 932㎡

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농산물종합가공센터설치

담당자

농촌지원과 최유진 (☎859 - 4952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 종합가공센터 설치 운영으로 농업인의 가공창업 활성화 소득증대

○ 농업인들의 가공창업에 대한 사업 초기 투자 부담과 운영에 대한 시행착오를 줄임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12.  ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 익산시 함열읍 익산대로 136620 (농업기술센터 내)

○ 규 모 : 995.16㎡

▸ 1층(584.18㎡) : 농산물 종합가공센터 / 사무실

▸ 2층(410.98㎡) : 농산물 가공실습교육장 / 농기계창고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,580백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,580		390	2,190
국 비	500		194	306
시 도 비
시군구비	2,080		196	1,884

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%).

○ 농산물 종합가공센터 신축공사 추진          : 2018. 11. 9 ～ 2019. 8월

○ 농산물 가공장비 구매 입찰 및 계약 체결               : 2019. 2 ～ 5월

○ 농산물 종합가공센터 신축공사(전기, 소방, 통신) 준공      : 2019. 7. 23.

○ 농산물 종합가공센터 신축공사(전기, 소방) 감리용역 완료   : 2019. 8. 7.

□ 향후계획

○ 농산물 종합가공센터 가공장비 설치 완료 및 시운전  : 2019.  8월

○ 농산물 종합가공센터 준공식 개최 : 2019. 9월

○ 농산물 종합가공센터 시제품생산 착수 및 가공 매뉴얼 정립   : 2019. 9 ～ 12월

○ 식품제조가공 영업등록 등 제품생산 법적사항 등록․신고사항 완료 : 2019. 10 ～ 12월

□ 사업변경 내역

구분	당초	현재
총사업비	2,400백만원(균특500, 시비1,900백만원)	2,580백만원(균특500, 시비2,080백만원)
사업기간	2017. 12 ~ 2019. 1월	2017. 12 ~ 2019. 12월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국내복귀 촉진을 위한 임대형공장 조성

담당자

한류패션과 김관옥(☎859-4382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특성화산업(귀금속보석) 육성을 위한 임대공간 조성 등 지속적 지역산업 발전기반 마련을 통한 주얼리기업 생태계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 낭산면 구평리 1538, 1538-1

○ 규 모 : 신축, 2동, 1층, 철골조, 연면적 합계 2,392㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,794백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,794		3,794
국 비
시 도 비
시군구비	3,794		3,794
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 승인   : 2017. 11. ~ 12.

○ 설계용역 착수 및 납품                      : 2018. 2. ~ 5.

○ 계약심사, 공용건축물 협의, 공사 발주        : 2018. 6.

○ 공사계약 및 착공                           : 2019. 7.

○ 공사준공 및 준공검사, 임대공장 입주        : 2018.10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

테니스공원 조성사업

담당자

체육진흥과 김주용(☎859-5375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 통한 지역 주민 건강증진 도모 및 테니스 대회 개최로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 마동 64-8번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 36,008㎡

- 테니스 구장 14면(실외 12면, 실내 2면), 다목적 구장 1면

- 사무실, 화장실 2개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000			3,000	5,000
국 비	1,500				1,500
시 도 비
시군구비	6,500			3,000	3,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  %)

○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 이행          : 2017. 9월

○ 중기지방재정계획 수립                            : 2017. 10월

○ 토지 및 지장물 감정평가 실시                     : 2017. 12월

○ 토지 및 지장물 보상                              : 2018. 2. ~ 2019. 8.

○ 실시설계용역 착수                                : 2019. 8월

□ 향후계획

○ 미매입토지 수용재결신청                          : 2019. 8월

○ 테니스공원 조성 공사                             : 2019. 11. ~ 2020년

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서부권역 다목적 체육관 건립

담당자

체육진흥과 정용복(☎859-5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발에 따라 유입된 서부권역 시민들의 건강 증진 및 생활 체육 활성화를 통한 지역 주민들의 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 모현동2가 267-1번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 512,640㎡, 연면적 4,719㎡(지하1층, 지상3층)

- 지하1층 : 기계실, 전기실 등

- 지상1층 : 수영장(어린이풀장 포함), 다목적 체육관 등

- 지상2층 : 사무실, 교육실, 체력단련실 등

- 지상3층 : 노인운동시설(물리·재활치료실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,650			1,000	8,650
국 비	2,895				2,895
시 도 비	3,000				3,000
시군구비	3,755			1,000	2,755
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  %)

○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 이행	: 2017. 09월

○ 중기지방재정계획 수립	: 2017. 10월

○ 설계공모 및 작품 선정	: 2018. 01 ~ 04월

○ 설계용역 및 공원조성계획 변경	: 2018. 05 ~ 10월

○ 계약심의위원회 심의	: 2019. 02월

○ 공사 착공	: 2019. 05월

□ 향후계획

○ 공사 착공	: 2020. 11월

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동부권 건강생활지원센터 신축공사

담당자

보건지원과 김  도(☎859-4807)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보건지소에서 건강생활지원센터로 기능전환됨에 따라 지역주민에게 맞는 건강생활실천사업을 추진하여 건강수명 연장 및 삶의 질 향상에 기여

○ 지역자원을 활용한 주민 참여형 건강생활지원센터를 신축함으로서 수요자 중심의 보건복지 통합서비스 문제를 해결해 나가는 계기를 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 익산시 금마면 서고도리 226-1외 10필지

○ 규 모 :  지상 2층, 연면적 804.15㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,764백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,764		893	1,292
국 비	1,028		751	277
시 도 비	257		0	257
시군구비	1,479		142	758
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○기능전환 방침결정 : 2017. 6. 23

○공유재산심의회 심의 : 2017. 11. 13

○기본 및 실시설계 : 2017. 11. ~ 2018. 8.

○공사 착공 : 2018. 11. 1

□ 향후계획

○공사 준공 : 2018. 8. 30.

○동부건강생활지원센터 개소 : 2019. 10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

황등공원 조성사업

담당자

늘푸른공원과

양유영(☎859-5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원조성으로 시민들에게 휴식공간 제공 및 녹지공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022

○ 위 치 : 황등면 동연리 230-4번지 일원

○ 규 모 : A=36,570㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,800	-	1,000	-	5,800
국 비
시 도 비
시군구비	6,800	-	1,000	-	5,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 조성계획 변경 및 실시설계 용역               : 2018. 06.

○ 토지매입 중(70% 보상 완료)                   : 2018. ~ 2019.

□ 향후계획

○ 사업추진계획에 맞추어 사업 추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이편한아파트 방음벽 설치사업

담당자

녹색환경과 안청하(☎859-5491)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산역 근처 모현동 이편한세상아파트 주민의 건강한 삶을 위한 철도 소음

으로 부터의 방음벽 설치로 지역주민의 평온한 삶 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2019

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 955번지 일원

○ 규 모 : 높이 10m, 길이 500m의 흡음형 방음벽

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,300		1,700	1,600
국 비	1,650		1,650
시 도 비
시군구비	1,650		50	1.600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 방음벽 기초공사 진행 중

□ 향후계획

○ 공사 준공 예정                                   : 2019. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업개요 : 전(높이10m, 길이400m의 흡음형 방음벽)

⟶ 후(높이10m, 길이500m의 흡음형 방음벽)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동산지구 보행환경 개선사업

담당자

도로과 남승복(☎859-5533)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새뜰마을~유천생태습지(동산동주민센터)로 이어지는 도로변에 인도가 없어 지역주민 및 관광객의 통행이 불편하고 사고위험이 높아

○ 보행통로를 설치하여 통행불편 해소 및 사고 예방으로 시민의 생명과 재산을 보호하고 쾌적한 도로환경 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 익산시 동산동 306-2번지 일원

○ 규 모 : 보행데크 L=770m, B=2.4m, 인도설치 L=350m, B=2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	-	-	56	1,944
국 비	1,000	-	-		1,000
시 도 비	500	-	-	56	444
시군구비	500	-	-		500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 보행데크 설치 완료 및 인도설치공사, 전기공사 추진 중

□ 향후계획

○ 공사추진 및 완료 ------------------------------------------------------- 2019. 10

□보행데크(L=770m, B=2.4m)설치 완료 ------------------------- 2019.  8

□전기공사(보안등) 완료 --------------------------------------------- 2019.  8

□인도공사(L=350m, B=2m) 완료 --------------------------------- 2019. 10

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산야구장 보수·보강 공사

담당자

체육진흥과 윤보훈(5969)

□ 사업목적 및 필요성

○ 야구장 외야 전반에 침하 현상이 발생하여 선수들 부상위험이 있으며,

인조잔디 불량에 따른 경기 운영에 어려움이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 부송동 180번지 일원(공설운동장 내)

○ 규 모 : 주경기장, 보조경기장 침하 보수 및 인조잔디 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000		1,000	1,000
국 비
시 도 비	1,000		1,000
시군구비	1,000			1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 지방재정투자심사 이행	: 2018. 10. 31.

○ 특별조정교부금 배정 통지	: 2018. 11. 16.

□ 향후계획

○ 익산야구장 보수·보강 설계용역 발주	: 2019. 1월

○ 공사 착공 및 준공	: 2019. 2. ~ 4월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국내복귀 촉진을 위한 임대형공장 조성

담당자

한류패션과 김관옥(☎859-4382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특성화산업(귀금속보석) 육성을 위한 임대공간 조성 등 지속적 지역산업 발전기반 마련을 통한 주얼리기업 생태계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 낭산면 구평리 1538, 1538-1

○ 규 모 : 신축, 2동, 1층, 철골조, 연면적 합계 2,392㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,794백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,794		3,794
국 비
시 도 비
시군구비	3,794		3,794
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 승인   : 2017. 11. ~ 12.

○ 설계용역 착수 및 납품                      : 2018. 2. ~ 5.

○ 계약심사, 공용건축물 협의, 공사 발주        : 2018. 6.

○ 공사계약 및 착공                           : 2019. 7.

○ 공사준공 및 준공검사, 임대공장 입주        : 2018.10.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

송학동 티스테이션 ~ 평동로간

(대로3류21호) 도로개설

담당자

도시개발과 김용환(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호) 도로개설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 송학동 127-4번지 ~ 송학동 224-138번지

○ 규 모 : L=300m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000	-	-	-	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	-	-	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계용역          : 2019. 1. ~

○ 감정평가의뢰          : 2019. 7.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 준공     : 2019. 8.

○ 편입토지등 보상       : 2019. 9.

□ 사업변경 내역 → 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

예술문화대제전

담당자

문화관광산업과 정근주(☎859-5275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 규모의 통합예술 경연으로 예술인들의 신규 일자리를 창출 및
청년신인예술가 발굴과 육성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018. 10. 15~ 10. 17

○ 위 치 : 익산 솜리예술회관 및 익산 일원

○ 규 모 : 광역시도 대표(17개)팀 본선 경연 및 부대행사

시상 및 시상팀 공연 / 한국예총-민예총 대표자대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   570 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	570		570
국 비	300		300
시 도 비	120		120
시군구비	150		150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 2018년 10월 완료사업

□ 향후계획

○ 해당 없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

미륵사지 관광지 조성사업

담당자

문화관광산업과  정웅(☎859-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○2015년 7월 유네스코 세계유산으로 등재(미륵사지, 왕궁리유적) 대한민국

유일의 역사적 특수성을 가진 지역인 미륵사지 관광지 활성화가 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007 ~ 2021(14년)

○ 위 치 : 전라북도 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

○ 규 모 : 108,743㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  32,554백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	32,554	11,200	1,000	2,600	17,754
국 비	5,127	1,000	500	1,300	2,327
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	25,427	10,200	500	1,300	13,427
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	-	-	2,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공사추진 (부지조성(108,743㎡)및 전통문화 체험관 1동 건립 중)

□ 향후계획

○문화재 발굴조사 진행 (2,3,4지구)	: 2019. 10.

○관광지 조성사업 공사추진	: 2019.  2.~ 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2019년 벼 건조저장시설 지원사업(익산통합)

담당자

농식품유통과 김동욱(☎859-5257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벼 건조, 저장시설 확충을 통한 고품질쌀 생산체계 구축

○ 고품질 쌀 생산기반 구축을 통한 우리 쌀산업의 경쟁력 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019~2020년

○ 위 치 : 익산시 함열읍, 용동면

○ 규 모 : 사일로 500톤 10기, 건조기 30톤 8기, 원료투입구 3식 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,640				5,640
국 비	2.256				2.256
시 도 비	338.4				338.4
시군구비	789.6				789.6
지 방 채
민간자본	2.256				2.256
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019년 사업추진을 위한 사전설계(2018년말 기준)

□ 향후계획

○ 2019~2020년 사업추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 확정(2018.12.18.)

- 당초 : 4,400백만원(국 1,760, 도 264, 시 616, 자 1,760) / 사업량 : 투입30톤 2기, 건조30톤 7기, 저장500톤 8기 / 사업기간 : 2019년 /

- 변경 : 5,640백만원(국 2,256, 도 338.4, 시 789.6, 자 2,256)/ 사업량 : 투입30톤 3기, 건조30톤 8기, 저장500톤 10기 / 사업기간 : 2019-2020년 /

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2019년 벼 건조저장시설 지원사업(익산농협)

담당자

농식품유통과 김동욱(☎859-5257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벼 건조, 저장시설 확충을 통한 고품질쌀 생산체계 구축

○ 고품질 쌀 생산기반 구축을 통한 우리 쌀산업의 경쟁력 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년

○ 위 치 : 익산시 금강동, 신용동

○ 규 모 : 사일로 500톤 8기, 건조기 30톤 6기, 원료투입구 1식 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400				3,400
국 비	1,020				1,020
시 도 비	204				204
시군구비	476				476
지 방 채
민간자본	1,700				1,700
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019년 사업추진을 위한 사전설계(2018년말 기준)

□ 향후계획

○ 2019년 사업추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산시 농산물 산지유통센터 건립

담당자

농식품유통과 유미(☎859-5254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시 생산 농산물의 산지유통시설 처리율 현재 30% 수준에 불과,

시설원예품목 증가 및 북부권 농산물 상품화를 위한 시설 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. ~ 2022.

○ 위 치 :  익산시 일원

○ 규 모 :  산지유통센터 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,200	0	0	0	4,200
국 비	600	0	0	0	600
시 도 비
시군구비	3,600	0	0	0	3,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 익산시 농산물산지유통센터 건립 연구용역 완료          : 2019. 7.

※익산시 농산물 산지유통센터(APC) 재검토(‘19.6.24.)

□ 향후계획

○ 북부권 APC 건립 관련 지역 조합장과의 간담회 개최 에정

□ 사업변경 내역

○ 당초 시 직접추진하여 조공법인에 위탁등을 검토하였으나 시 재정부담으로 계획을 변경하여 조공법인(참여농협)이 직접 사업추진을 하는 방향으로 검토중

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

황등농공단지 공공폐수처리시설 개량사업

담당자

투자유치과 최수민(☎859-5742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황등농공단지 폐수처리장의 노후(27년)된 시설로 전면 시설교체가 필요        가 요구됨(2018년 기술진단 결과 전반적인 개선 필요)

○ 폐수유입량 감소로 당초 시설용량 축소 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 황등농공단지

○ 규 모 : 6000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,600			300	4,300
국 비	2,300			300	2,000
시 도 비
시군구비	2,300				2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 기술진단 완료                            2018. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 업체 선정           2019. 8. 6.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진                2019. 8. ~ 2020. 7.

○ 공사 발주                                2019. 8.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신흥공원 조성사업

담당자

도시전략사업과 정병훈(☎859-7435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2020년 7월 시행예정인 장기미집행 도시계획시설(공원) 일몰제가 시행되면 토지매입 등 사업을 시행하지 않는 공원녹지는 실효되므로 도심권 주요공원 중 하나인 신흥공원에 대한 토지매입 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 1월 ~ 2023년 12월

○ 위 치 : 신흥공원(익산시 신흥동 산22-1번지 일원)

○ 규 모 : 결정면적 = 674,890㎡, 미집행 면적 = 527,371㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	41,000	0	0	0	41,000
국 비
시 도 비
시군구비	41,000	0	0	0	41,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 지방재정 투자심사 (적정)                        : 2018. 10.

□ 향후계획

○ 예산 확보 (시비 138억원)                        : 2019. 1.

○ 토지 매입                                      : 2019. ~ 2020.

○ 공사 시행                                      : 2021. ~ 2023.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산시 실내야구연습장 건립

담당자

체육진흥과 윤보훈(5969)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사계절 이용 가능한 실내연습구장을 건립해 사회인 야구팀 및 동호인, KT 2군팀 훈련에 활용하고 자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 부송동 169번지 일원(종합운동장 내)

○ 규 모 : 연면적 2,000㎡(지상1층, 철골조)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000				3,000
국 비	900				900
시 도 비
시군구비	2,100				2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 지방재정투자심사 이행	: 2018. 11. 28.

○ 공유재산 관리계획 의회 의결	: 2018. 12. 24.

○ 사업수행능력평가(PQ) 공고 의뢰	: 2019. 7. 19.

□ 향후계획

○ 설계 사업수행능력평가	: 2019. 8.

○ 설계, 원가심사, 실시계획인가, 건축허가 및 구조심의	: 2019. 8. ~ 12.

○ 공사 착공 및 준공	: 2020. 2. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

익산시 펜싱아카데미 건립

담당자

체육진흥과 정용복(5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1980년에 창단되어 펜싱선수 9명 중 국가대표 5명을 보유하고 런던올림픽, 각종 국제대회에서 금메달을 획득한 익산시 펜싱선수단을 활용

○ 국민생활체육활성화 및 레저스포츠 활성화, 우수 선수 육성․저변 확대를 위한 체육진흥시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 익산시 부송동 180번지 일원(종합운동장 내)

○ 규 모 : 연면적 2,000㎡(펜싱아카데미, 사무실, 교육실 화장실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000				5,000
국 비	1,500				1,500
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	1,500				1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 지방재정투자심사 이행	: 2018. 11. 28.

○ 공유재산 관리계획 의회 의결	: 2018. 12. 24.

○ 복합 건립 지방재정투자심사 이행	: 2019. 7. 5.

○ 복합 건립 공유재산 관리계획 의결	: 2019. 7. 22.

□ 향후계획

○ 운동장 조성계획 변경 용역	: 2019.

○ 설계공모(설계경기로 설계자 선정)	: 2019. ~ 2020.

○ 설계용역(실시계획인가, 건축허가)	: 2020.

○ 공사 착공 및 준공	: 2021

□ 사업변경 내역

○ 사업부지

‣(당초)팔봉동 436-3번지 ⇒ 부송동 산74-2

○ 사업기간

‣(당초)2019~2020 ⇒ 2019~2021

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

VR 말산업체험관 조성

담당자

축산과 유정안(☎859-7292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공승마장과 특구 관련사업(VR 말산업 체험관) 연계 활용방안 마련으로 시설이용의 극대화를 통한 승마산업 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021년

○ 위 치 : 전라북도 익산시 용안면 난포리 618-1번지 일원(공공승마장 내)

○ 규 모 : 660㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000				2,000
국 비	1,000				1,000
시 도 비	300				300
시군구비	700				700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업부지 공유재산심의 및 예산편성                       : 2019. 5.

○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진 중                     : 2019. 5.~

□ 향후계획

○ 도시관리계획 결정(변경)                                 : 2020. 4.

○ VR 말산업체험관 착공                                   : 2020. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초) 2018~2019 → 변경) 2018~2021

○ 사업규모 : 당초) 930㎡ → 변경) 660㎡