9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

1

친환경 섬유신소재 연구센터 구축사업

담당자

투자유치과 황영숙(☎859-5749)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부 저탄소 녹색성장에 부합된 친환경 섬유신소재 연구센터 구축시설을

통해 미래 신성장 동력의 고부가가치 산업으로 발전시켜 관내 섬유산업의

경쟁력 강화 필요

□ 사업개요

○ 기      간 : 2010. 7. ~ 2015. 7(5년)

○ 위      치 : 익산시 서동로 590(연구원 부근)

○ 규모및내용 : 친환경 섬유신소재 연구센터 건물구입 및 리모델링 공사

- 섬유패션클러스터(3층) 7,865.05㎡, 닥펄프자동화시설(2층)/3,024㎡,

에코파이버 창업보육센터(3층)/632.92㎡

○ 추진주체 : ECO융합섬유연구원(구, 한국니트산업연구원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	10,670	10,670
국 비	5,000	5,000
시 도 비	2,000	2,000
시군구비	2,000	2,000
민간자본	1,670	1,670

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 업무협약 : 2011. 10

○ 연구센터 부지 확보 : 2011. 10

○ 친환경섬유신소재연구센터 구조안전 진단실시 : 2013. 1

○ 리모델링 공사 완료 : 2014. 1.

○ 섬유패션클러스터동, 펄프기계화동 마무리 공사 완료 : 2015. 7.

□ 향후계획

○ 연구센터 시설 리모델링 완료

○ 지역기업 기술 멘토링 및 센터 입주기업 클러스터 구축

□ 사업변경 내역

○ 국비 축소, 민간자본 변경 및 시비 4,000백만원 지원예정 이었으나 부지매입비 절감(매매가 33억→경매낙찰가19.7억) 및 익산시 자금사정에 따라 시비 2,000백만원 삭감 등으로 재원 변경

사업명

2

대로1류5호 안전한 보행환경 조성사업

담당자

도시개발과 최영철(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안전도시 시범 지자체인 우리시 저탄소 녹색도시 건설을 위한 보도 및 자전거도로 설치로 보행환경 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2010 ～ 2019

○ 위치 : 중앙체육공원～원팔봉삼거리

○ 총사업비 : 13,036백만원

○ 사업규모 : L=2.1km, B=20⇒35m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	13,036	9,100	917	987	2,032
국 비	4,300	4,300
시 도 비
시군구비	8,736	4,800	917	987	2,032
기 타

□ 추진단계(시공 중 : 70%)

○ 2009. 12. 사업대상지 선정

○ 2010. 4. 실시계획인가 및 행정절차 진행

○ 2013. 8. 중앙체육공원~원팔봉삼거리 배수공, 토공 등 완료

○ 중앙체육공원~2공단사거리 4차분 준공(L=150m)    : 2015. 5

○ 중앙체육공원~2공단사거리 6차분 준공	: 2016. 7

□ 향후계획

○ 중앙체육공원~2공단사거리 공사추진(7차분)    : 2017. 3.

사업명

3

익산춘포 처리구역 하수관거 정비사업

담당자

하수관리과 진준용(☎859-4422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시 춘포면 춘포리, 석탄동 일원 마을하수를 인근 익산하수처리장에 연계 처리함으로서 하수처리시설 운영효율 증대 및 만경강수계 수질개선

○ 농촌마을 하수도 보급 증대로 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2016년

○ 위 치 : 익산시 춘포면 춘포리, 석탄동 일원

○ 규 모 : 관거정비 L=10.4km, 배수설비 427가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,043백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	8,043	6,030	2,013
국 비	5,630	4,221	1,409
시 도 비	237	177	60
시군구비	1,877	1,417	490
민간자본
기 타	299	215	54

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 시행	: 2011.  6. ~ 2012. 10.

○ 1차분 착수 및 준공(L=0.9km,34개소)	: 2012. 10. ~ 2013. 07.

○ 2차분 착수 및 준공(L=5.5km)	: 2013. 05. ~ 2014. 08.

○ 공사 준공                                : 2016. 5.

- 관거신설(오수관) L=10.4km, 배수설비 427가구

□ 향후계획

○ 오수관 유지관리 계속

사업명

4

익산함열 처리구역 하수관거 정비사업

담당자

하수도과 신성철(☎859-4467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시 용안면, 낭산면, 성당면 일원 마을하수를 인근 익산함열하수처리장에 연계 처리함으로서 하수처리시설 운영효율 증대 및 금강수계 수질개선

○ 농촌마을 하수도 보급 증대로 주거생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2016년

○ 위 치 : 익산시 용안면 난포리, 낭산면 삼담리, 성당면 성당리 일원

○ 규 모 : 관거정비 L=22.8km, 배수설비 598가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,446백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	16,446	12,155	4,291
국 비	11,512	8,483	3,029
시 도 비
시군구비	4,342	3,235	1,112
민간자본
기 타	592	437	150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 시행	: 2011.  6. ~ 2012. 10.

○ 환경청 재원협의(함열,춘포) 완료	: 2012.  4.

○ 공사 1~2차분 완료                         : 2012. 11. ~ 2014. 08

○ 공사 준공                                : 2016. 4.

- 관거신설(오수관) L=22.8km, 배수설비 598가구

□ 향후계획

○ 오수관 유지관리 계속

사업명

5

익산서동마 농촌테마공원 조성사업

담당자

농업정책과 김용환(☎859-5780)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연 친화적인 휴식․체험․교육 공간 마련으로 도․농 교류 촉진 및

지역경제 활성화와 농가소득 증대

○ 기존관광지(서동공원)과 연계 개발로 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2016년

○ 위 치 : 익산시 금마면 신용리 일원

○ 규 모 : A=79,430㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,393백만원(국비 5,000  시비 8,393)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	13,993	11,200	2,193
국 비	5,000	5,000	-
시 비	8,393	6,200	2,193
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

❍ 농촌테마공원조성사업 신규사업 선정(농식품부)	2009. 02.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 승인(전라북도)	2010. 03.

❍ 공유재산관리 변경 계획 승인	2010. 03.

❍ 지방재정 투∙융자심사 완료(전라북도)	2010. 05.

❍ 농촌테마공원조성사업 일괄위탁 계약(한국농어촌공사)	2010. 09.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(1차) 승인	2011. 04.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(2차) 승인	2011. 10.

❍ 농촌테마공원조성사업 기본계획 변경(3차) 승인	2013. 01.

❍ 농촌테마공원조성사업 시행계획 승인	2013. 06.

❍ [금마관광지 지정 및 조성계획]변경 승인(전라북도)	2013. 06.

❍ 농촌테마공원조성사업 설계심의 완료	2013. 09.

❍ 농촌테마공원조성사업 계약심사 완료	2013. 10.

❍ 농촌테마공원조성사업 착공	2013. 11.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인	2014. 12.

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경 승인(2차)	2015. 12.

□ 향후계획

❍ 농촌테마공원 조성사업 시행계획 변경	2016. 6.

❍ 금마관광지 지정 변경 및 조성계획 변경	2016 9.

❍ 농촌테마공원 조성사업 및 금마관광지 조성사업 준공	2016 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 78,160㎡  →  현재 79,430㎡

○ 총사업비 : 당초 9,300백만원  →  현재 13,393백만원(민자 제외)

○ 사업기간 : 당초 2010 ~ 2013년  →  현재 2010 ~ 2016년

사업명

6

신재생자원센터 주변 도시개발사업

담당자

경영개발과 조윤영(☎859-4527)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생자원센터 주변 주거환경개선 및 난개발 방지

○ 산업단지 입주업체 근로자의 정주여건 조성으로 타 지역 인구유출 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2017 (7년)

○ 위 치 : 익산시 부송동 일원(익산 신재생자원센터 일원)

○ 규 모 : 도시개발사업 331,347㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :     32,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	32,800	1,990	0	661	30,149
국 비
시 도 비
시군구비	32,800	1,990	0	661	30,149
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정투융자심사(적정) : 2010. 12.

○ 도시개발사업 개발계획 및 실시설계용역 착수  : 2011. 05.

○ 개발행위허가 제한구역 지정(2016년 4월까지) : 2014. 04.

○ 도시개발구역 지정 신청 :  2014. 12월

□ 향후계획

○ 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 신청                  : 2016. 4.

○ 도시개발구역 지정 고시(道 도시계획위원회 포함)           : 2016.  9.

○ 실시계획인가 신청                                       : 2016. 12.

○ 실시계획인가 고시                                       : 2017.  3.

□ 사업변경 내역

○ 기존 시가지와 연계하여 개발면적 변경

▸(당초) 180천㎡ ⇒ (변경) 331천㎡

사업명

7

함열농공단지 조성

담당자

경영개발과 백승훈(☎859-4523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득 증대

○ 중소기업체의 공업입지 제공으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 8 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 익산시 함열읍 와리 323번지 일원

○ 규 모 : 329,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	35,000	8,920	5,494	15,586	5,000
국 비	3,000		2,280	720
시 도 비	500		500
시군구비	200	200
민간자본	31,300	8,720	2,714	14,866	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 신규농공단지 지정승인(농식품부)    : 2011. 12

○ 기본 및 실시설계 용역 발주         : 2011. 12

○ 문화재 지표조사 완료               : 2012.  5

○ 농공단지 지정고시                : 2014.  7

○ 농공단지 지정(변경)고시           : 2015.  7

○ 사업착공                         : 2015.  11

□ 향후계획

○ 문화재 발굴조사 착수              : 2016.  2

○ 토지보상 완료                     : 2016.  5

○ 사업완료                         : 2017.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 30,000백만원(당초) ⇒ 35,000백만원(변경)

○ 사업기간 : 2011 ~ 2014(당초) ⇒ 2011 ~ 2016(변경)

○ 변경사유 : 함열농공단지 조성을 위한 SPC설립으로 사업시행자 변경에             따른 재원변경 등

사업명

8

한센인 간이양로시설 기능보강사업

담당자

녹색환경과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한센인의 노후생활의 안정적인 도모 및 삶의 질 향상

○ 열악한 주거시설의 환경개선을 통한 건강증진 및 복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2015년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 신축 211세대(1인용-157, 2인용 54), 개보수 66세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,492백만원(국비 6,019, 도 2,608, 시 6,365, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	15,492	6,562	3,064	5,866
국 비	6,020	2,433	1,030	2,556
도 비	2,607	974	431	1,203
시 비	6,365	3,155	1,123	2,087
기타(특교세)	500		480	20

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

○'11년도 사업 준공(2013. 7. 17.) : 신축 43세대, 개보수 18세대(익산농장)

○'12년도 사업 준공(2014. 2. 28.) : 신축 43세대, 개보수 15세대(금오․신촌농장)

○'13년도 사업 착공(2014.12. 26.) : 신축 22세대(익산농장)

○'14년도 사업 착공(2015. 6. 26.) : 신축 24세대(금오농장)

○'15년도 사업 설계착수(2015. 4. 20.) : 신축 41세대(익산농장)

□ 향후계획

○'15년도 사업 준공 :   2016. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 당초 10,500백만원 → 변경 15,492백만원

▸당초 지원단가 1,094천원/㎡→ '13년~'15년 사업에 대해 1,630천원/㎡로 변경

사업명

9

익산천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과 정웅(☎859-5442)

□ 사업목적 및 필요성

○『왕궁 정착농원 환경개선 종합대책(2010. 7월)』에 따른 왕궁 정착농원 생태환경 복원으로 새만금호 수질 확보

○ 새만금 수질개선을 위한 주교제 내 오니토 처리로 환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년~2016년(계속비사업)

○ 위 치 : 익산시 춘포면 인수리 657-1번지 일원(익산천)

익산시 왕궁면 온수리 320번지 일원(주교제,학평제,용호제)

○ 규 모 : 생태하천 복원 및 생태습지와 수변녹지 조성(익산천2.8km, 소류지106,676㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,000백만원(국비 9,100, 시비 3,900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	13,000	834	5,055	7,111
국 비	9,100	584	3,548	4,968
시군구비	3,900	250	1,507	2,143

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 왕궁 환경개선종합대책 발표                    : 2010. 7.10.

○ 사업계획 변경승인신청(새만금환경청)	: 2014. 6. 17.

○ 공유재산 취득승인                             : 2013. 7.

○ 사업계획 변경승인신청(새만금환경청)	: 2014. 6. 17.

○ 주교제 토지 수용재결	: 2015. 4. 22.

○ 생태하천 원가심사(전북도)	: 2015. 5. 11.

※ 2015. 6. 16.(수용개시일)까지 공탁완료

□ 향후계획

○ 주교제 오니토 반출 완료                         : 2016. 5.

○ 익산천 호안정비(총60천㎥, 70%)                  : 2016. 7.

○ 익산천 식생매트 설치(총23천㎡, 25%)             : 2016. 7.

○ 공사 준공(예정)                                  : 2016. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업비변경 : 당초  27,741백만원 → 변경  13,000백만원

▸주교제 공사 부지면적 축소

사업명

10

소라산공원 조성사업

담당자

산림공원과 배진호(☎859-5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심내 쾌적한 휴식공간 및 가족단위 여가활용 공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2018년

○ 위    치 : 익산시 영등동 268-1번지 일원

○ 사업규모 : 81,331㎡(영등지구 55,000㎡, 남중지구 26,331㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	15,000	6,944	1,170	820	3,071
국 비	3,000		3,000
시 도 비
시군구비	12,000	9,944	1,165	820	3,071
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  67%)

○ 실시계획 인가(영등지구)  -----------------------------  2010. 12. 23

○ 편입토지 및 지장물 손실보상(영등지구)  --------  2009. 6월 ~ 현재

○소라산 자연마당 조성사업 추진 ---------------------------- 2014.11. ~ 2015.12.

□ 향후계획

○소라산 공원(영등지구) 화장실 조성 설계용역 ---------- 2016.04. ~ 2016.08.

○소라산 공원(영등지구) 화장실 조성사업 추진 ---------- 2016.08. ~ 2017.06.

○소라근린공원(남중지구) 조성계획변경 및 설계용역 -------- 2016.08. ~ 2017.12.

사업명

11

영유아안심보육타운건립

(육아종합지원센터건립)

담당자

여성보육과 강명경(☎859-5898)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가족공동체적 육아기능 및 포괄적 육아서비스를 제공하는 전문 인프라        구축으로 영유아 및 가정의 복지 증진을 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7. ~ 2015. 07

○ 위 치 :익산시 궁동로 43 영등시민공원내

○ 규 모 : 부지 1,600㎡, 연면적 1,710㎡ (지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원                                           (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,900	4,900
국 비	1,000	1,000
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	2,400	2,400
특별교부세	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보건복지부 공모사업 선정                     : 2012. 04..

○ 공유재산관리계획 의회 승인                   : 2012. 06.

○ 공원조성계획변경결정용역                     : 2012. 06. ～ 2013. 01.

○ 건축설계용역                                 : 2013. 03. ～ 2013. 10.

○ 공사발주 및 착공                             : 2013. 11.

○ 육아종합지원센터 체험교육시설 준공 및 개관   : 2015. 07.

□ 향후계획

○ 육아종합지원센터 운영

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	변경사유
사업명	영유아안심 보육타운건립	육아종합 지원센터건립	국비지원사업명으로 변경
총사업비	50억	49억	국비지원액 감소로 사업비 축소
국비	25억	10억	보건복지부공모사업 국비지원액 감소
시비	15억	29억	국비감소로 시비증가(특별교부세 5억확보)
사업기간	2011년~2013년	2012년~2015년	2012년 하반기 공모사업 선정 및 예산확보 (특교세, 도비)로 사업기간 변경

사업명

12

마한로 미개설구간 도로개설공사

담당자

도시개발과 최영철(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영등택지개발지역 일원을 지나는 산업도로등의 교통량 분산을 통하여 교통체증 해소 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ～ 2017

○ 위치 : 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

○ 총사업비 : 8,000백만원

○ 사업규모 : L=652m, B=25m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	8,000	900			7,100
국 비	400	400
시 도 비
시군구비	7,600	500			7,100
기 타

□ 추진단계(시공 준비중 : 보상 14%)

○ 2010. 4. 특별교부세 확보

○ 2011. 9. 실시설계용역 및 행정절차 진행

○ 2012. 1. 도시계획시설 실시계획인가

○◦ 편입토지 및 지장물 보상(15%)

▸총 39필지 15,942㎡ 중 6필지 2,518㎡ 매입

□ 향후계획

○ ‘16연도 이후 소요액 사업예산 확보 후 토지매입 및 공사추진

사업명

13

이리남부지구 중로2류43호선 도로개설공사

담당자

도시개발과 차경민(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동익산역 진입로 집단민원 해소와 장래 남부지역 개발촉진 도모로 시민편익증진과 주거환경개선에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 기간 : 2011 ～ 2016

○ 위치 :  인화동2가 105-17번지 일원

○ 총사업비 : 3,800백만원

○ 사업규모 : L=284m, B=17m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,800	2,400	0	644	756
국 비
시 도 비
시군구비	3,800	2,400	0	644	756
기 타

□ 추진단계(시공 준비중 : 보상 54 %)

○ 2011. 8. 도시계획시설 실시계획인가

○ 2011. 12. 실시설계용역 및 행정절차 진행

○ 실시계획인가준공            : 2015. 5.

○ 재감정평가의뢰              : 2015. 5.

○ 지장물철거 공사 발주  : 2015. 8. 17.

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물보상 추진     : 2016. 7. ~

○ 지장물철거 공사 준공       : 2016. 8. 16.

사업명

14

팔봉근린공원(부송지역) 조성공사

담당자

산림공원과 배진호(☎859-5892)

□ 사업목적 및 필요성

부송도서관과 연계한 도심내 쾌적한 휴식공간 및 여가활용 공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006년 ~ 2019년

○ 위    치 : 익산시 부송동 284-24번지 일원

○ 사업규모 : 29,503㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	7,000	2,790			4,210
국 비
시 도 비
시군구비	7,000	2,790			4,210
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 실시계획인가  ---------------------------------------------------  2010. 12. 23

○ 편입토지 및 지장물 손실보상  ----------------------------  2008. 1월 ~ 현재

□ 향후계획

○ 잔여토지 손실보상

○ 시설공사 추진

사업명

15

귀금속보석산업 클러스터 구축 2단계

(귀금속보석산업 고도화육성사업)

담당자

한류패션과 김관옥(☎859-4383)

□ 사업목적 및 필요성

○ 귀금속 디자인 기술지원센터 및 아파트형 표준공장을 건립하여 영세한 주얼리        기반을 지원하고, 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2017.

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 동용리 768 보석가공단지 내

○ 규 모 : 부지 12,734㎡, 연면적 8,600㎡

○ 사업내용

‣ 귀금속보석 디자인․기술지원센터 및 임대형공장(26개실) 건립

‣ 디자인․기술지원센터 장비구입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	19,300	1,828	0.2	6,548.4	10,923.4
국 비	13,700	1,826	0.2	4,869	7,004.8
시 도 비
시군구비	5,600	2		1,679.4	3,918.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 중기지방재정계획 반영	: ’11. 11.

○ 지방재정 투융자심사(중앙심사)	: ’12.  3.

○ 익산시의회 공유재산 취득승인	: ’12.  9.

○ 기본 및 실시설계 용역	: ’14. 1. ~ 7.

○ 건축공사 착공 및 감리용역 착수	: ’14. 12.

○ 전기, 통신, 소방공사 착공                         : ’15. 2.

○ 건축, 전기, 통신, 소방공사 및 관련 용역 중지      : ’15. 2.

‣적격심사관련 법원 가처분 인용 판결에 따른 계약이행 중지

(* 2016.6.소송종결, 2016.7.공사착공됨)

□ 향후계획

○ 건축공사 준공                                     :  2017. 12.

사업명

16

문화예술의 거리 조성사업

담당자

문화관광과 임종인(☎ 859-5877)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙동 문화예술의 거리 내 랜드마크로서 거점공간 조성

○ 문화예술 활동 구심점 마련과 역세권 연계를 통한 구도심 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ∼ 2017

○ 위 치 : 중앙동 2가 문화예술의 거리(500m)

○ 규 모 : 거점공간 조성(공연장, 주차장, 야외공연장) 및 예술인 입주활동 지원, 문화콘텐츠 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	4,580	2,580	550	1,450
국 비
시 도 비	2,290	1,290	100	900
시군구비	2,290	1,290	450	550
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 문화예술의거리 정착을 위한 문화예술인 지원 및 프로그램 지속 운영

○ 거점공간-1, 2, 3 토지매입 추진 및 거점-1 설계용역 추진

□ 향후계획

○ 문화예술의거리 정착을 위한 문화예술인 지원 및 프로그램 지속 운영

○ 거점-1 설계용역완료 및 시설건립 추진

○ 거점-2, 3 공간 토지매입 지속 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 5,200백만원     - 변경 : 4,580백만원(△620백만원)

사업명

17

익산 중요무형문화재 통합전수관 건립

담당자

역사문화재과 조용섭(☎859-5792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 중요 무형문화유산의 열악한 전수환경을 개선하고 전통문화유산과의       공간적 집적화 및 효율성 극대화를 통해 문화예술의 상생발전과 함께 보존       전승의 맥을 잇는 기반을 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 익산시 익산대로 355 일원(김동문 배드민턴장 인접)

○ 규 모 : 연면적 3,919.45㎡ (지상2층 지하1층)

- 국가지정 중요무형문화재(이리농악, 이리향제줄풍류) 및 시립국악원(시립풍물단 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,600	2,350	1,370	2,880
국 비	3,300	1,650	500	1,150
시 도 비	1,650	350	435	865
시군구비	1,650	350	435	865
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 공사착공(장기계속사업) : 2014. 10. 08.

○ 통합전수교육관 전통건축 및 부대공사 마무리 진행중

□ 향후계획

○ 건립공사 추진(연차 사업 추진) : 2016. 8월 준공예정

□ 사업변경 내역 : 문화재청 협의과정에서 총사업비 조정변경

구 분	계	변경전	변경후
계	6,000	7,154	6,600
국 비	3,000	3,577	3,300
시 도 비	1,500	1,788	1,650
시군구비	1,500	1,789	1,650

사업명

18

마동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 심현옥(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 부족 및 노후화로 유지관리비 증가

○ 지역주민의 행정서비스 개선 및 문화활동 공간 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2017년     ○ 위 치 : 익산시 중앙동 25길 5-4(마동)

○ 규 모 : 지하1층 / 지상4층(부지 1,876㎡ / 건축 2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,690	1,011	55	1,500	3,124
국 비	768	768
시 도 비
시군구비	4,922	243	55	1,500	3,124
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2012년

○ 건축부지 토지매입 1,736㎡	2013년

○ 설계용역 완료	2014년

□ 향후계획

○ 신축공사 착공 및 준공	2016년 ~ 2018년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 1,876㎡, 연면적 1,820㎡	2013 ~ 2016	4,715백만원
변 경	토지면적 1,876㎡, 연면적 2,000㎡	2013 ~ 2016	5,690백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정		건축비 조정 및 물가상승 반영

사업명

19

모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 전  욱(☎859-5667)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년 ∼ 2019년         ○ 위 치 : 모현동2가 671

○ 규 모 : 지상1층 / 지상4층(부지 3,304.8㎡ / 건축 2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,829백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,829	894	692	306	4,937
국 비
시 도 비
시군구비	6,829	894	692	306	4,937
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인	2012년

○ 건축부지 토지매입 완료	2013년 ~ 2016년

□ 향후계획

○ 설계용역 완료	2017년

○ 신축공사 착공 및 준공	2017년 ~ 2019년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 3,304.8㎡, 연면적 1,820㎡	2013 ~ 2014	5,668백만원
변 경	토지면적 3,304.8㎡, 연면적 2,000㎡	2013 ~ 2019	6,829백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정		건축비 조정 및 물가상승 반영

사업명

20

익산종합 비즈니스센터 건립

담당자

투자유치과 임대성(☎859-5766)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산 국가산업단지는 조성된지 40년이상 경과되어 산업구조 및 경제여건

변화로 향토기업들이 경력을 잃어가고 있는 상황으로 이지역을 구조고도

화를 통한 융복합 지역으로 개발하여 산업, 교육, 문화, 관광이 함께하는

우리시의 대표적인 랜드마크로 개발하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013.  ~ 2017(4년)

○ 위    치 : 익산시 국가산업단지 내 귀금속 2단지

○ 규    모 : 부지 9,500㎡ 건축연면적 9,570㎡(지하2층, 지상6층)

○ 추진주체 : 익산시,한국산업단지공단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 175억원(국비40 도12 시28 산단공95)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	17,500	3,900	4,500	5,900	3,200
국 비	4,000	1,700	100	500	1,700
시 도 비	1,200	300	900	0
시군구비	2,800	1,500	1,300	0
민간자본	9,500	400	2,200	5,400	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

ㅇ 익산비즈니스센터 사업계획서 제출(산업부)	:  2013.  8.

ㅇ MOU협약체결 (산단공, 익산시, 전라북도)          :  2014. 12.

ㅇ 익산비즈니스센터 실시설계용역 계약	:  2015.  5.

ㅇ 익산비즈니스센터 건립공사 발주                     :  2015. 12.

□ 향후계획

◦ 공사 준공(산단공)                                :  2017. 5.

사업명

21

유턴기업(주얼리)집적산업센터건립

담당자

한류패션과 석지현(☎859-5747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 투자여력이 약한 주얼리기업의 협력업체와 원부자재상가에 저렴한 아파트형공장        지원을 통한 패션주얼리 산업생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : ’14. ～ ’16.

○ 위 치 : 익산제3일반산업단지 주얼리단지(익산시 낭산면 구평리 1519)

○ 규 모 : 부지면적 7,340㎡, 연면적 7,074㎡

○ 사업내용 : 공장(37실) 및 상가(8실) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,129290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	12,129	1,495	4,272	6,362
국 비	5,529	223	2,042	3,264
시 도 비	2,845	111	1,185	1,549
시군구비	3,755	1,161	1,045	1,549
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 관계부처 통한 예산확보 확정	:  ’13. 7. ~ ’13. 8.

○ 중기지방재정계획 반영	:  ’13. 11.

○ 사업수행능력평가                           :  ’14.  2.  ~  ’14.  3.

○ 설계업체선정                               :  ’14.  4.

○ 기본 및 실시설계                           :  ’14.  5.  ~  ’14. 10.

○ 공사 및 용역(감리) 착공                     :  ’15.  4.

□ 향후계획

○ 공사준공                                   :  ’16.  6.

사업명

22

천서․왕궁지구 하수관거정비공사

담당자

하수도과 신호섭(☎859-4471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 만경강 수계지역으로 환경기초시설 미비로 하천의 수질오염이 심화되어 새만금 담수호 수질에 영향을 주는 생활하수를 적정 처리하여 수질오염을 방지하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리 17-55번지 일원(익산, 금오, 신촌농장),

익산시 춘포면 천서리, 오산리, 창평리, 쌍정리 일원

○ 규 모 : 오수관로 44.8km, 배수설비 854개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,486백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	25,486	1,714	15,501	8,271
국 비	17,840	1,200	11,773	4,867
시 도 비	765	51	505	209
시군구비	6,881	463	3,223	3,195
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  52%)

○ 익산시 하수도 기본계획 반영                     : 2009. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역                           : 2013. 12.

○ 새만금지방환경청 재원협의                       : 2014.  8.

○ 조달청 공사발주                                 : 2014. 12.

○ 공사 1차분 완료 및 2~4차분 추진 중

- 관거신설(오수관) L=34.2km, 배수설비 380가구

□ 향후계획

○ 공사 계속추진[관거신설(오수관) L=10.6km, 배수설비 474가구]

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 21,064백만원 → 25,486백만원(2015. 3)

사업명

23

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 이종일(☎859-5937)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및구도심 주거환경개선을 통해 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,700㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 887세대(임대 200/ 분양 687)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=779m, B=10~25m - 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2017년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,575백만원(국 4,805 시 9,990, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	14,575	8,670	2,000	2,000	1,905
국 비	4,085	4,085
시 도 비
시군구비	9,900	4,085	2,000	2,000	1,905
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007. 7. 6

◦ LH공사 사업 잠정 유보	: 2009. 4. 9

◦ 추진협의체 구성(주민대표3, LH공사3, 익산시3)        : 2012. 2. 9

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016. 6. ~

□ 향후계획

○ 수용재결 신청 및 보상 협의                        : 2016. 08. ~

◦ 공사 착공 및 준공(LH)                             : 2016년 ~ 2017년

사업명

24

동산동 주민센터 및 주민자치센터 신축

담당자

회계과 송대성(☎859-5678)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사 사무공간 및 주차공간 협소로 신청사 필요성 대부

○ 신청사 건립으로 주민자치센터 활용공간 확대를 통한 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ∼ 2018년      ○ 위 치 : 익산시 동산동 1000-1,2,3,4,7

○ 규 모 : 지상1층 / 지상5층(부지 6,600㎡ / 건축 2,670㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,154		238	1,500	4,416
국 비
시 도 비
시군구비	6,154		238	1,500	4,416
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투·융자심사 승인                            : 2013년

○ 설계용역 입찰참가자격 사전심사(PQ)                   : 2014년

○ 설계용역 완료                                        : 2015년

○ 도시계획시설(변경) 결정                           : 2015년

□ 향후계획

○ 신축공사 착공 및 준공                             : 2016년 ~ 2018년

□ 사업변경 내역

구 분	규 모	사 업 기 간	사 업 비	비고
당 초	토지면적 6,001㎡, 연면적 1,820㎡	2014 ~ 2016	4,943백만원
변 경	토지면적 6,600㎡, 연면적 2,670㎡	2014 ~ 2018	6,154백만원
사 유	주민자치센터 활용공간 확대로 인한 연면적 조정		건축비 조정 및 물가상승 반영

사업명

25

미륵산 산림복원사업

담당자

산림공원과 임성훈(063-859-5881)

□ 사업목적 및 필요성

○ 훼손이 심각한 미륵산을 생태적으로 건전하고 경관성이 우수한 산림으로       복원 하여 시민들에게 건강한 산림생태환경 제공

○ 산림의 체계적인 복원을 통한 지속가능한 산림자원 보전 및 자연친화적       산림환경조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 2 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 익산시 금마․삼기․낭산면 미륵산

○ 내 용 : 훼손지 식생복구(샛길 폐쇄), 녹색숲길 조성, 정상부 복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,650백만원(국비 1,855, 시비 795)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,650	1,000	630	501
국 비	1,855	700	441	351
시 도 비
시군구비	795	300	189	150
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 미륵산 산림복원사업 장기 총괄계속계약(2014~2016)

○ 미륵산 산림복원사업 감리 용역 발주

○ 미륵산산림복원사업 1차분 준공                    : 2015. 12

▸ 훼손이 심각한 4개 노선(기양제,미륵사지,사자암,과학고) 식재 및 복원공사

○ 미륵산산림복원사업 2차분 준공                    : 2015. 12

▸ 훼손지 식재공, 복원공(과학고 등),샛길폐쇄, 타이어매트 시공 등

□ 향후계획

○ 미륵산 산림복원사업 3차분 준공                    : 2016. 12.

▸ 정상부 복구(사양토 성토, 관목식재, 데크설치 등)

사업명

26

함열용왕교차로～삼기일반산단

도로확․포장공사

담당자

건설과 송석민(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼기 일반산업단지 조성에 따른 함열 ~ 삼기간 교통수요 증가에 대비하고 물류수송 비용 절감으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 6 ~ 2019. 12

○ 위    치 : 함열읍 용왕교차로 ~ 삼기 일반산업단지경계(군도 23호선)

○ 사업규모 : 도로 확포장 L=3.4km, B=16.5~20.5m, 설계속도 V=60㎞/h

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	11,000	320		1,100	9,580
국 비
시 도 비
시군구비	11,000	320		1,100	9,580
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  13% )

○ 지방재정 투융자 심사                           : 2013. 6.

○ 실시설계 용역 추진   : 2013. 7 ~ 2015. 1

○ 편입토지 및 지장물 감정평가 : 2016. 4

○ 편입토지 및 지장물 손실보상 : 2016. 5 ~ 현재

□ 향후계획

○ 편입토지 및 지장물 손실보상 : 2016. ~ 2017.

○ 도로확포장공사 착공 및 공사추진 : 2018. 3 ~ 2019. 12

□ 사업변경 내역

○ 당   초 : 사업비(7,820백만원)

○ 변   경 : 사업비(11,000백만원)

사업명

27

TMR 조사료 가공시설 지원사업

담당자

축산과 김정운(☎859-5762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농식품부 공모사업 선정에 따른 TMR 가공시설 지원

○ 국내산 조사료의 이용 증진을 위한 국내산 조사료를 주원료로 사용할 수 있는 TMR 가공시설의 설치를 지원

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 2 ~ 2015.

○ 위    치 : 익산시 황등면 죽촌길 108-61

○ 사업규모 : TMR 가공시설 1조(면적 8,985㎡, 100톤/일)

○ 사업내용 : TMR 가공시설 건축비 및 가공에 필요한 기계․장비 구입지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,875백만원(국비 840, 도비 252, 시비 588, 기타 1,120)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,875		2,800
국 비	840		840
시 도 비	252		252
시군구비	588		588
민간자본
기 타	1,195		1,195

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60% )

○ 농림축산식품부 공모사업 신청 및 선정           : 2013. 2

○ 중기지방재정계획 및 지방재정투융자 심사        : 2013. 11

○ 조사료 가공시설 설계완료(수건축사)             : 2014. 2

○ TMR 가공시설 착공                             : 2015. 3

○ TMR 가공시설 준공                             : 2015. 10

□ 향후계획

○ TMR 가공시설 정상가동 생산으로 축산농가에 공급

사업명

28

화정지구 소규모 공공하수도설치사업

담당자

하수도과 신성철(☎859-4467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 지역은 금강 수계지역으로 환경기초시설 미비로 하천의 수질오염이 심화되어 생활하수를 적정 처리하여 수질오염을 방지하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 망성면 내촌리 화정마을 일원

○ 규 모 : 오수관로 10.4km, 마을하수처리장1개소 120㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,464	714	4,150	600
국 비	3,825	500	3,325
시 도 비
시군구비	1,639	214	825	600
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  58%)

○ 익산시 하수도 기본계획 반영                  : 2009. 12

○ 지방재정 투․융자 심사                       : 2013. 11

○ 새만금지방환경청 재원협의완료                : 2014. 10

○ 전라북도 원가심사완료                        : 2014. 12

○ 공사 1차분 완료 및 2차분 추진 중

- 관거신설(오수관) L=10.0km, 배수설비 115가구

□ 향후계획

○ 공사 계속추진[관거신설(오수관)

[L=0.4km, 배수설비 141가구, 마을하수 처리장 1개소]

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 4,132백만원 → 5,464백만원(2015. 3.)

사업명

29

KTX 서부역사진입로 확장공사

담당자

도시개발과 최영철(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 외부광역교통망과 KTX 익산역간 연계교통망 확충으로 철도이용 편익 도모 및 이용객 수요증가에 따른 능동적 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ～ 2016. 12.

○ 위 치 : 송학동 235-73번지(중앙지하차도) 일원

○ 규 모 : L=500m , B=25m⇒50m(광로2류3호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 46,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	46,500	15,677	21,940	8,883
국 비	21,940		21,940
시 도 비
시군구비	24,560	15,677		8,883
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 지장전주, 가로수, 상·하수도 이설 완료      : 2015. 5. 30.

○ H파일 및 보링그라우팅 완료(1단계)	: 2015. 6. 20.

□ 향후계획

○ 지하차도공사 준공	: 2016. 12.

사업명

30

2018「제99회 전국체전」관련 경기장 개보수 사업

담당자

체육진흥과 임방엽(☎859-5379)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018 「제99회 전국체전」 주개최지인 익산시의 노후화된 경기장(공설

운동장)의 시설을 리모델링하여 성공적인 체전을 준비하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 10월 ∼ 2018년

○ 위 치 : 익산시 무왕로 1397

○ 규 모 : 전광판교체 1식 40억, 육상트랙보수 1식 36억 등 1개장소 17개

분야 200억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,994백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	20,994			900	20,094
국 비	6,298			270	6,028
시 도 비	7,348			315	7,033
시군구비	7,348			315	7,033

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 전국체전 대비 경기장 개보수 설계용역 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

○ 종목별 경기장 조사 : 2016. 1. ~ 2017. 6.

□ 향후계획

○ 경기장 개보수 공사 : 2017. 1. ~ 2018. 6.

○ 개최전 시범운영    : 2018. 7. ~ 2018. 9.

○ 전국체전           : 2018. 10월중(미정)

○ 전국장애인 체전    : 2018. 10월중(전국체전 후)

○ 전국소년체전       : 2019. (미정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업비 변경

- 당초(투자심사 : 188억원) → 확정통보(210억원) ‘16.5.

사업명

31

가람시조 문학관 건립사업

담당자

문화관광과 임종인(☎859-5877)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시의 대표적 문화브랜드인 가람 이병기 선생의 문학관 건립을 통해 시조에 대한 모든 교육·전시 등 다양한 문학활동의 중심으로서의 역할 수행을 통한 익산시를 대표하는 문화브랜드의 역할 기대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. ~ 2017.

○ 위    치 : 익산시 여산면 원수리 575-2 일원(가람생가 일원)

○ 사업규모 : 건물 926㎡

○ 사업내용

▸가람시조문학관건립 : 926㎡ (지상 1층, 지하 1층)

- 가람관, 문인관, 문인센터, 세미나실, 게스트하우스 등

▸가람시조 사색길 조성 (생가~소류지)	: L=300m

▸가람시조문학관 옆 하천 정비	: L=200m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,801백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,801	50	380	1,915	1,456
국 비	1,277			766	511
시 도 비
시군구비	2,524	50	380	1,149	945

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 타당성 검토 및 기본계획수립                 :  ‘13. 8. ~ ’14. 1.

○ 지방재정 투융자 심사(전라북도 심사 / 적정)	:  ‘14. 10. 27.

○ 가람 이병기 선생 후손보관 유물 기증(22종 93점)	: ‘15. 3. ~ 6.

○ 문학관 건립자문위원회 구성 및 운영	: ‘15. 5. ~ ‘17. 12.

※ 건립자문위원회 개최(1차) : 2015. 6. 10.

○ 건립부지 토지매입 완료

□ 향후계획

○ 설계용역 완료 및 건립공사 착공 : 2016. 하반기

○ 가람선생 유물 등 전시자료 지속 확보

사업명

32

’15년 농업에너지이용 효율화사업

담당자

기술보급과 윤석한(☎859-4332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제유가 및 농자재 가격 상승으로 인한 농업인 경영비 부담 경감과 에너지이용

효율화 등을 위해 신재생에너지시설 및 에너지절감시설 설치지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 광암리 257-1 외

○ 규 모 : 19,768 ㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,990		3,990
국 비	2,394		2,394
시 도 비	239		239
시군구비	559		559
기 타	798		798

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 지방재정 투융자 심사(자체 심사 / 적정)	:  ‘14. 10. 31.

○ 지열냉난방 실시설계 및 착공 : 2015. 6월

○ 지열냉난방시설 준공 : 2015. 12. 24

- 한국농어촌공사 전북지역본부 위탁시행

□ 향후계획

○ 지열냉난방시설 운영상황 점검 : 연 2회

사업명

33

KTX 익산역 주변지구 새뜰마을사업

담당자

도시개발과 소범섭(☎859-4563)

□ 사업목적 및 필요성

○ KTX 익산역 주변 취약지역의 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상

○ 일자리, 복지, 교육, 문화 등 맞춤형 지원을 통한 마을공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2018년(4년)

○ 위 치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

○ 규 모 : 약 35,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,624백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,624	0	27	2,958	3,639
국 비	4,368	0	19	2,071	2,278
시 도 비	616	0	2	266	348
시군구비	1,640	0	6	621	1,013
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 착수              :  2015. 11. 16

○우선사업(도로개설) 실시설계용역 착수                :  2015. 11. 24

□ 향후계획

○우선사업(도로개설) 토지매입                         :  2016. 03 ~

○새뜰마을사업 마스터플랜 승인(지역발전위원회)        :  2016. 08

○세부사업별 사업추진                                 :  2016. 09~

□ 사업변경 내역

○ 총사업비

- 당초 : 8,000백만원(국비 5,600, 도비 700, 시비 1,700)

- 현재 : 6,624백만원(국비 4,368, 도비 616, 시비 1,640)

사업명

34

서동생태관광지 조성

담당자

녹색환경과 배석진(☎859-5437)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 1시군 1생태관광지 조성 계획에 따른 금마관광지 내 생태체험

기능 강화

○ 주민 참여로 소득 창출 기회를 부여함으로써 지역 경제력을 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2024

○ 위 치 : 금마저수지 및 금마관광지 일원

○ 규 모 : 서동공원 및 농촌테마공원 생태기능강화, 수변데크 조성,

생태체험관, 휴식 및 피크닉장 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	7,300		100	800	6,400
국 비	3,600	-	-	400	3,200
시 도 비	1,900	-	100	200	1,600
시군구비	1,800	-	-	200	1,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1.4 %)

○ 금마 서동생태관광지 마스터플랜용역 완료 : 2015. 08. 07. ~ 12. 06.

○ 수변데크 실시설계용역 발주              : 2016. 06. 09 ~ 2017. 01. 10.

□ 향후계획

○ 수변데크 공사(총액) 발주                 : 2017. 03. ~ 2020. 12.

사업명

35

신재생자원센터 매립장 2단계 조성

담당자

청소자원과 구성준(☎859-5427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생자원센터 매립시설 1단계분 사용연한 임박( ‘17년)에 따른 2단계분 조성

○ 생활폐기물의 안정적이고 위생적인 최종처분시설 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 익산시 선화로 823

○ 규 모 : 15,841㎡(143,169㎥)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,250	-	250	1,667	3,333
국 비	1,575	-	-	500	1,075
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,675	-	250	1,167	2,258
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역중)

○실시설계용역 착수	: 2015.12.16.

○실시계획인가 신청	: 2016. 8.10.

□ 향후계획

○ 폐기물처리시설 설치 승인 및 설계심의	: 2016. 8월 ~ 9월

○ 원가심사 및 공사 발주	: 2016. 9월

○ 공사 완료	: 2017.12월

사업명

36

왕궁보석테마 대표 관광지 육성

담당자

문화관광과 남승복(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕궁보석테마 관광지를 대표 관광지로 육성 발전시켜 우리시 및 도내 관광자원과 연계하여 관광사업 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8(보석박물관) 일원

○ 규 모 : 160,460㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	9,500	-	1,000	1,000	7,500
국 비	3,300	-			3,300
시 도 비	5,000	-	1,000	1,000	3,000
시군구비	1,200	-			1,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 보석테마관광지(보석광장) 정비공사 추진

○ 보석테마관광지(칠선녀광장) 설계용역 준공

□ 향후계획

○ 보석테마관광지(보석광장) 정비공사 준공 : 2016. 8

○ 보석테마관광지(칠선녀광장) 정비공사 추진 : 2016. 7 ~ 2016. 12

○ 연차별 사업추진 : 2017. 1 ~ 2019. 12

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

37

고품질 쌀 브랜드 육성사업

(익산농협)

담당자

농산유통과 송병준(☎859-5251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고품질쌀 브랜드(가공시설 현대화) 육성을 통한 생산기반을 구축하여

익산 쌀 산업의 경쟁력 향상 도모 및 농가소득 중대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 익산시 금강동 1113-20 외 1

○ 대 상 : 익산농협 RPC (조합장 김병옥)

○ 규 모 : 백미 7.5톤, 현미 9톤, 포장부 15톤 가공시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,049백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,049			5,049
국 비	1,515			1,515
시 도 비	454			454
시군구비	1,060			1,060
기 타	2,020			2,020

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 설계용역 및 공장등록 신청등 인허가 추진 : 2016. 3 ∼ 6월

□ 향후계획

○ 건축 및 시설공사 : 2016. 8 ∼ 11월

○ 시운전 및 준공   : 2016. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업대상부지 변경(부지 확장 및 공장소음 민원 해결)

▸ 당초 : 익산시 금강동 1114-17외 1 ⇒ 변경 : 금강동 1113-20외 1

사업명

38

세계유산 홍보 시설물 설치

담당자

역사문화재과 선일권(☎859-5798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백제역사유적지구 세계유산 등재에 따라 익산 관문에 홍보 시설물을 설치함으로써 유네스코 세계유산의 도시 익산 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2018. 6

○ 위 치 : 익산시 IC ～ 금마사거리(지방도 722호, 삼학콘크리트 인근)

○ 규 모 : 홍보시설물

▸한식목구조(상부구조) 200㎡,  합성형 라멘교(하부구조) 200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,890			150	3,740
국 비
시 도 비
시군구비	3,890			150	3,740
기 타

□ 향후계획

○ 세계유산 홍보물 설치 실시설계  : 2016. 6 ~ 2016. 12

○ 세계유산 홍보물 설치 실시설계  : 2017 ~ 2018

사업명

39

모현동 배산~장신택지간 (기쁨의교회옆)도로개설

담당자

도시개발과 최영철(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가로망 구축으로 주거환경개선 및 주민생활 편익도모

○ 도시계획도로개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 모현동 1가 643-66번지 일원

○ 규 모 : L=130m , B=20m(중로1류6호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,000		42	1,508	1,450
국 비	1,000			600	400
시 도 비	500			500
시군구비	650		42	408	200
기 타	850				850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 실시설계용역 준공       : 2015. 9.

○ 지방재정 투자심사 완료  : 2015. 10.

○ 편입토지 감정평가       : 2016. 4.

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물보상 추진    : 2016. 7. ~

○ 공사 착공 및 준공          : 2016. 12 ~ 2017. 12

사업명

40

전북형농촌관광거점마을육성사업

담당자

농업정책과 김명하(☎859-5249)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌체험마을 연계 및 광역화를 통한 관광자원 네트워크 구축 및 농촌관광    활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년

○ 위 치 : 익산시 웅포면 강변로 284

○ 내 용 : 농촌관광 인프라 구축 및 개선, 농촌관광전문인력양성,

통합마케팅, 프로그램개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계			362	996	1,642
국 비			181	498	821
시 도 비
시군구비			181	498	821
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  2%)

○ 체험지도사양성과정 2회 실시          : ‘15. 9. ~ ’15. 11.

○ 기본계획수립 용역                    : ‘16. 4. ~ ’16. 8.

○ 향토음식개발 및 교육                 : ‘16. 4. ~ ’16. 6.

○ 체험프로그램 개발                    : ‘16. 4. ~ ’16. 6.

□ 향후계획

○ 실시계획 용역                        : ‘16. 9. ~ ’16. 11.

○ 체험관 신축 공사 발주                : ‘16. 12.

○ 체험관 착공                          : ‘17. 3. ~ ’17. 10.