109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 익산시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	부서명	사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년소요 사업비	2018년 이후 사업비	사업완료예정연도	투자 심사 연도	현재까지진척율(%)
1	녹색환경과	새만금바이오 순환림 조성사업(휴·폐업축사매입)	21,250	15,550	2,487	3,213	2018	2009	92
2	녹색환경과	자연환경보전· 이용시설조성 (바이오순환림 조성사업)	16,750	12,750	78	3,922	2018	2009	77
3	도시재생과	대로1류5호 안전한 보행환경 조성사업	11,232	9,169	1,123	940	2018	2010	100 (공사 100)
4	농촌활력과	익산서동마 농촌테마공원 조성사업	13,393	13,393			2018	2010	98
5	녹색환경과	한센인 간이양로시설 기능보강사업	15,492	13,812	1,680		2017	2011	100
6	녹색환경과	익산천 생태하천 복원사업	13,000	11,916	1,084		2017	2011	100
7	도시재생과	마한로 미개설구간 도로개설공사	8,301	900	6	7,395	2022	2011	30
8	도시재생과	이리남부지구 중로2류43호선 도로개설공사	3,800	2,611	140	1,049	2019	2011	50
9	경영개발과	함열농공단지 조성공사	35,000	24,723	8,509	1,768	2018	2011	80
10	도로공원과	소라산공원 조성사업	15,000	11,362			2022	2011	재정사업→ 민간사업전환
11	도로공원과	팔봉근린공원 (부송지역) 조성사업	7,000	500			2018	2011	재정사업→ 민간사업전환
12	한류패션과	귀금속보석클러스터 조성사업	18,612	3,927	9,401	5,284	2018	2012	93
13	문화관광과	문화예술의거리 조성사업	5,031	3,351	691	989	2018	2012	70
14	회계과	마동주민센터 및 주민자치센터 신축	5,690	2,357	2,244	1,089	2018	2012	100
15	회계과	모현동주민센터 및 주민자치센터 신축	5,807		240	5,567	2019	2017 (재심사)	5
16	건설과	군도23호선 도로확포장공사	12,500	1,420	4,800	6,280	2019	2013	25
17	주택과	평화지구 주거환경개선사업	14,570	12,170		2,400	2021	2013	5 (지장물 철거율:90)
18	투자유치과	익산종합비즈니스 센터건립	17,500	9,000	8,500		2017	2013	100
19	하수도과	천서왕궁지구 하수관거정비공사	25,486	24,031	1,455		2017	2013	100
20	회계과	동산동주민센터 및 주민자치센터 신축	6,154	1,209	2,027	2,918	2018	2013	95
21	전국체전담당관	2018년 제99회 전국체전 관련 경기장 개보수사업	37,138	10,154	24,240	2,744	2018	2014	95
22	문화관광과	가람시조 문학관 건립	3,081	2,295	1,090	40	2017	2014	99
23	녹색환경과	금마 서동 생태관광지 조성사업	7,300	49	0.12	7,251	2024	2015	0.6
24	도시재생과	도시 취약지역 생활여건 개조	6,924	1,883	2,513	2,528	2018	2015	70
25	도시재생과	모현동 배산~장신택지간 (기쁨의교회옆) 도로개설	3,850	1,361	1,114	1,375	2018	2015	80
26	역사문화재과	세계유산 홍보 시설물 설치	446		47	399	2019	2015	22
27	역사문화재과	익산 역사문화도시 조성	3,750		725	3,025	2021	2015	22
28	농촌활력과	전북형농촌관광 거점마을 육성사업	3,000	110	504	2,386	2018	2015	59
29	문화관광과	왕궁보석테마 대표 관광지 육성	9,500	2,000	1,650	5,850	2019	2015	50
30	청소자원과	신재생자원센터 매립장 2단계 조성	4,975	72	1,019	3,884	2018	2015	61
31	전국체전담당관	공공체육시설 (우레탄 교체) 개보수 지원사업	1,864			1,864	2018	2016	100
32	전국체전담당관	공공체육시설 장애인 편의시설 설치	2,140		1,750	390	2018	2016	100
33	농식품유통과	고품질쌀브랜드 육성사업 (가공시설현대화)	7,469		7,469		2017	2016	100
34	도시재생과	동산동 월담지구 새뜰마을사업	3,849	77	270	3,502	2019	2016	20
35	국가식품클러스터	소스산업화센터 건립(익산시)	10,223	34	1,366	8,823	2021	2016	7
36	도로공원과	전라선 폐선부지 공원화 사업	3,891	635	1,256	2,000	2019	2016	30
37	회계과	북부지역 농업행정수도 건설	13,100	2,000	5,000	3,745	2018	2016	100
38	역사문화재과	서동역사문화공원 조성사업	19,430		770	18,660	2022	2017	10
39	복지청소년과	보훈회관 건립	3,000			3,000	2020	2017	0 (사전행정 절차이행)
40	농촌지원과	농산물종합 가공센터설치	2,400			2,400	2019	2017	10
41	한류패션과	임대형공장건립 시범사업	3,805			3,805	2018	2017	70
42	체육진흥과	테니스공원 조성사업	8,000			8,000	2020	2017	부지매입중 (88%)
43	체육진흥과	서부권역 다목적체육관 건립	9,650			9,650	2019	2017	설계용역중 (70%)
44	보건지원과	동부권 건강생활지원센터 신축공사	2,764			2,764	2019	2017	30 (실시설계)
45	도로공원과	황등공원 조성사업	6,800			6,800	2022	2017	10

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황은 【별첨 7】로 공시하였습니다.

10-2. 지방채 발행사업

우리 익산시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 익산시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	익산예술의전당	익산문화관리주식회사	41,286	7,820	3,926	72,190	2015.1~ 2034.12 (20년)
	06 하수관거 임대형 민자사업(BTL)	푸른익산환경(주)	59,883	41,045	6,403	88,222	20
	09 하수관거 임대형 민자사업(BTL)	청정익산 (주)	69,536	18,326	7,853	138,712	20
	익산시립모현도서관(BTL)	익산지식공유(주)	12,795	10,176	1,767	26,461	2011.4~ 2031.4 (20년)
BTO	전라북도환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	㈜전북 엔비텍	57,500	90,757	13,857	158,039	20
	가축분뇨 공공처리시설 운영	뉴워터(주)	42,434	31,032	6,035	89,096	15년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황은 【별첨 8】로 공시하였습니다.