개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

모현동 행정복지센터 신축공사

담당자

회계과 전진수(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사의 노후 및 사무공간 협소로 모현 우수저류시설 부지에 신축 이전하여 주민 편의공간 및 근무환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 180번지 일원

○ 규 모 : 연면적 2,763㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500		4,200	1,300
국 비	1,000		1,000
시 도 비
시군구비	4,500		3,200	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 수장공사 및 외벽 마감공사

○ 조경 및 부대공사

□ 향후계획

○ 공사준공 (2020. 10. 14.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

매일시장 주차환경개선사업

담당자

일자리정책과 문초롱(☎859-5219)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매일시장은 2009년에 31면의 규모로 조성되었으나 시장규모에 비해 주차공간이 협소하여

이중주차 및 불법주차로 주차장 이용객 불편이 가중되는 상황으로 주차장 확장이 필요

○ 매일시장 이용객들의 편의증진과 지역경제 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. ~ 2020. 9.

○ 위 치 : 익산시 창인동1가 131-18번지 매일시장 주차장 일원

○ 규 모 : 주차장 확장공사(기존 31면⇒30면, 29면 증설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,100		1,532	568
국 비	1,260		919	341
시 도 비
시군구비	840		613	227
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ 중소벤처기업부 전통시장 활성화 지원사업 공모 신청   : 2019. 2. 21.

○ 공모사업 대상지 현장 실사(전북지방중소벤처기업청, 전북도) : 2019. 4. 3.

○ 중소벤처기업부 전통시장 활성화 지원사업 공모 선정   : 2019. 5. 13.

○ 토지 감정평가 및 협의 매수                          : 2019. 10. ~ 12.

○ 지정폐기물 조사용역                                 : 2020. 2. ~ 3.

○ 토목공사 착공                                       : 2020. 5. 29.

○ 지정폐기물 철거공사 준공                            : 2020. 7. 9.

○ 지정폐기물 처리용역 준공                            : 2020. 7. 14.

□ 향후계획

○ 토목공사 및 전기공사 준공

○ 위탁관리 협약 체결(익산시 ⇔ 상인회)

□ 사업변경 내역

○ 주차면수 변경

- 당초 50면 증설 계획이었으나 확장형 주차면으로 설계하여 현재 29면 증설

사업명

수소충전소 보급사업

담당자

일자리정책과 문초롱(☎859-5219)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 수소산업 인프라 기반 구축 및 수소차 보급확대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.1.~2021.6

○ 위 치 : 석암동 389-75

○ 규 모 : 수소충전소 설치 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000			3,000
국 비	1,500			1,500
시 도 비	750			750
시군구비	750			750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○수소충전소 부지 및 운영사업자 선정 : 2019.11.

○수소충전소 설치 사업시행자 선정(도) : 2019.12.

○수소충전소 설치 위·수탁 협약 체결(전북개발공사) : 2020.03.

○수소충전소 부지사용 및 운영계약체결 : 2020.04.

○수소충전소 공기관 대행사업비 교부 : 2020.04.

▸기본 및 실시설계 용역 착수 : 2020.06.

▸수소충전시스템 설비업체 착수 : 2020.07.

□ 향후계획

○ 공사착공 : 2020.11.

○ 공사준공 및 시운전 : 2021.06.

사업명

황등농공단지 공공폐수처리시설 개량사업

담당자

투자유치과 최수민(☎859-5742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설용량 대비 폐수유입량이 현저히 적어 실제유입량에 맞는 시설용량으로 변경 및 28년이상 노후된 시설 전면 교체 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 황등면 율촌리 876

○ 규 모 : 6,000㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,600		236		4,364
국 비	2,418		236	-	2,182
시 도 비
시군구비	2,182			-	2,182
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 : 1% 실시설계용역 착수)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 9.

○ 기본계획 승인신청 및 사업계획 협의 (한국환경공단)

□ 향후계획

○ 기본계획 승인 및 실시설계 작성 : 2020. 8. ~ 9.

○ 용역 준공 및 시설공사 시행 : 2020. 11. ~ 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

홀로그램 엑스포

담당자

투자유치과 오태림(☎859-5749)

□ 사업목적 및 필요성

○ 홀로그램콘텐츠 전시・박람 등을 통해 대한민국 홀로그램 산업에서 전라북도의 경쟁력 확보 및 선도지 공고화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019.7.~2019.12.

○ 위    치 : 원광대학교 동문 주차장

○ 내    용 : 전시・체험부스 운영, 전문가 포럼, 트레이드 페어 개최

○ 수행기관 : 전라북도문화콘텐츠산업진흥원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	600	-	600	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	300	-	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 홀로그램 엑스포 개최 완료

□ 향후계획

○ 해당없음(단년도사업)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2019.10. 예산 내역 일부 변경(총 예산액 동일)

사업명

미륵사지 관광지 조성사업

담당자

문화관광산업과  정웅(☎859-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○2015년 7월 유네스코 세계유산으로 등재(미륵사지, 왕궁리유적) 대한민국

유일의 역사적 특수성을 가진 지역인 미륵사지 관광지 활성화가 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007 ~ 2021(14년)

○ 위 치 : 전라북도 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

○ 규 모 : 108,743㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  32,554백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	32,554	23,300	2,600	4,654	2,000
국 비	5,127	1,500	1,300	2,327
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	25,427	21,800	1,300	2,327
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	-	-	2,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공사추진 (부지조성(108,743㎡)및 전통문화 체험관 1동 건립 중)

○ 문화재 발굴조사 완료 (2,3,4지구)	: 2019. 12.

○ 관광지 조성사업 1차분 공사완료	: 2020. 03.

□ 향후계획

○관광지 조성사업 2차분 공사완료	: 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음.

사업명

문화예술의 거리 조성

담당자

문화관광산업과 유영일(☎859-5826)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙동 원도심 문화예술의 거리 내 거점공간 조성 및 문화관광 콘텐츠 운영을 통한 특화 거리 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2018.

○ 위 치 : 전북 익산시 중앙동2가 45번지 앞 문화예술의거리 일원(L=310m)

○ 규 모

구분	위치	시설규모	사업계획	비고
거점-1	중앙동2가 45	2층 396.56㎡	문화예술 거점공간 (익산아트센터 운영)	공사완료 (2017. 1. ~ 9.)
거점-2	중앙동2가 40-2	2층 310.34㎡	익산 근대박물관 (‘구 삼산의원’이전)	공사완료 (2017. 5.~2019. 3.)
거점-3	중앙동2가 36-2	2층 300㎡	청년문화소통공간 (청숲 운영)	공사완료 (2018. 10.~2019. 4.)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,359백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,359	5,394	965	-	-
국 비	39	39
시 도 비	1,945	1,805	140
시군구비	4,375	3,550	825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○공유재산 관리계획 심의의력        : 2017. 05. 19.

○거점-1(익산아트센터) 준공          : 2017. 10.

○거점-2(익산근대역사박물관) 준공    : 2019. 3.

○거점-3(청년문화소통공간 청숲) 준공 : 2019. 4.

□ 향후계획

○ 거점 공간 지속 운영 및 문화예술행사 운영 : 연중

사업명

왕궁보석테마 관광지 육성사업

담당자

문화관광산업과 정웅

(☎859-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 대표관광지 활성화계획의 일환으로 왕궁보석테마 관광지의

인지도를 향상하기 위한 기반조성 및 관광홍보, 마케팅부분 강화 등

관광환경 개선을 통한 경쟁력 있고 특화된 대표 관광지 육성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2024년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8 일원

○ 규 모 : 160,460㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,150	5,950	1,200	2,000	8,000
국 비	1,000	1,000
시 도 비	9,550	3,750	800	1,000	4,000
시군구비	6,600	1,200	400	1,000	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 보석어드벤처사업 실시설계 추진                   : 2019. 07. ~ 현재

○ 제2차 대표관광지 육성사업 기본계획 변경          : 2020. 06.

□ 향후계획

○ 보석어드벤처사업 공사추진                        : 2020. 08. ~ 2021. 08.

○ 하늘자전거길 실시설계 추진                       : 2020. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 보석어드벤처(20년사업) 사업위치 변경

사업명

익산 역사문화도시 조성

담당자

역사문화재과

박수진(☎859-5798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사와 문화가 공존하여 지속적인 성장을 이끌어내는 역사문화도시 지정을 위한

예비사업으로 문화특화지역(문화도시) 조성사업 추진

○ 역사를 바탕으로 시민과 함께하는 역사문화도시 조성 및 역사 정체성 확립

□ 사업개요

○ 사업대상 : 익산시 전역

○ 사업기간 : 2017 ~ 2021 (5년)

○ 총사업비 : 3,750백만원[국비(균특) 1,500  도비 675  시비 1,575

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,750	1,430	815	820	685
국 비	1,500	572	326	328	274
시 도 비	675	257	147	148	123
시군구비	1,575	601	342	344	288
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

◦지역문화 네트워크 구축을 위한 시민단체 간담회

◦역사예술 감성교육(동아리, 예술소풍, 실기대회 등)

◦라이브 고도 미디어 월 설치(익산역) 및 운영

◦왕도정원 가꾸기(남부시장 광장. 금마 이주단지, 모현동 옥창마을, 용안면 입산마을, 송학동

◦역사놀이터 한마당 운영(남부시장, 춘포역)

◦이야기로 듣는 이리와 익산 구술사업 자료집 제작

◦신문으로 보는 이리와 익산 자료집 제작(1920~1999년)

◦이리-익산 근대자료 전시콘텐츠 기획(익산근대역사관)

◦익산학 시민교재 발간(익산 도시와 사람들)

◦청년역사꾼 고도 LAB(창업지원 4팀)

□ 향후계획

◦ 문화특화지역(문화도시) 조성사업(4차~5차년도)       : 2020. ~ 2021.

◦ 문화도시 조성계획 승인                           : 2020. 11.

◦ 문화도시 예비사업                                : 2020. 11. ~ 2021. 11.

◦ 문화도시 지정                                    : 2021. 12.

◦ 문화도시 조성사업 추진(5년간)                     : 2022. ~ 2026.

사업명

서동역사문화공원조성사업

담당자

역사문화재과 박주영(☎859-5779)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고도 지정의 근간이 되는 백제 무왕(서동)의 탄생설화에 따른 마룡지와       서동생가터의 주변에 대한 정비를 통해 백제왕도 익산의 정체성을 회복       하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ~ 2023년 12월

○ 위 치 : 익산시 금마면 서고도리 374 일원

○ 규 모 : 서동생가 재현, 전통연꽃재배지 조성, 수변데크 및 전망데크 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,430	858	598	1,407	16,567
국 비	13,600				13,600
시 도 비	2,915				2,915
시군구비	2,915	858	598	1,407	52
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 진입부 쉼터정비 및 정비공사                 : 2017. 7. ~ 12.

○ 도시관리계획 결정 및 공원조성계획수립       : 2018. 4. ~ 2021. 6.

○ 보상통보 및 보상협의 추진                   : 2019. 7. ~

□ 향후계획

○ 실시설계용역 시행                            : 2021. 1. ~ 6.

○ 생가재현 및 용샘복원, 전통연꽃재배지조성 등  : 2021. 7. ~ 2023. 12.

사업명

마동 테니스공원 조성사업

담당자

체육진흥과 백승훈 859-5375

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 통한 지역 주민 건강증진 도모 및 테니스대회 개최로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017.~2021.

○ 위  치 : 익산시 마동 64-8번지 일원

○ 규  모 : 대지면적 36,065㎡, 테니스구장 14면[실외 10면, 실내 4면(막구조)],                 관리실, 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,772백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,772	3,000	431	2,823	6,518
국 비	2,820	0	68	846	1,906
시 도 비
시군구비	9,952	3,000	363	1,977	4,612
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  27%)

○ 투자심사, 공유재산계획 의결, 실시계획인가   : ‘17.

○ 부지매입완료                            : ‘18. ~‘20.3.

○ 설계용역 착수                           : ‘19.8.16.

○ 매장문화재 시굴조사 준공                : ‘19.10.14.

○ 공유재산관리계획 의결                   : ‘19.11.6.

○ 도 지방재정투자심사 재심사(조건부 의결)  : ‘19.11.7.

○ 문화재 발굴조사 완료                    : ‘20.5.6.

□ 향후계획

○ 심의 및 인허가 등 행정절차 이행         : ’20.8.~9.

○ 감리용역 및 공사발주                    : ‘20.10.

○ 공사착공                                : ’20.11.

사업명

서부권역 다목적 체육관 건립

담당자

체육진흥과 정용복(☎859-5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발에 따라 유입된 서부권역 시민들의 건강증진 및 생활체육 활성화를 통한 지역 주민들의 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 익산시 모현동2가 267-1번지 일원(배산근린공원 내)

○  규 모 : 대지면적 512,640㎡, 연면적 4,719㎡(지하1층, 지상3층)

▸ 지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸ 지상1층 : 수영장 6레인(어린이용 2레인 별도), 다목적 체육관 등

▸ 지상2층 : 사무실, 교육실, 체력단련실 등

▸ 지상3층 : 노인운동시설(상담실, 물리·재활치료실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,650	518	1,552	3,250	4,330
국 비	2,895		536	950	1,409
시 도 비	3,000		451	1,100	1,449
시군구비	3,755	518	565	1,200	1,472
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 40%)

○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 의결	: ‘17. 09.

○ 중기지방재정계획 수립	: ‘17. 10.

○ 설계공모 및 작품선정	: ‘18. 01. ~ 04.

○ 설계용역 및 공원조성계획 변경	: ‘18. 05. ~ 10.

○ 계약심의위원회 심의	: ‘19. 02.

○ 공사 착공	: ‘19. 05.

□ 향후계획

○ 공사 준공	: ‘21. 01.

사업명

익산야구장 보수·보강공사

담당자

체육진흥과 김주용 859-5969

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산야구장 보수 보강에 따른 선수들 및 동호인들의 부상위험 해소

○ 전국소년체전 및 한마음 대축전 유치로 익산야구장 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.12.~2019.12.

○ 위 치 : 익산시 부송동 180번지

○ 규 모 : 익산야구장 지반정비 및 기존 인조잔디 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,822백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,822		1,822
국 비
시 도 비
시군구비	1,822		1,822
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   100%)

○ 실시설계용역 완료               : 2019.2.25.

○ 익산야구장 보수보강 공사 착공   : 2019.3.13.

○ 익산야구장 보수보강 공사 준공   : 2019.4.30.

○ 익산 보조야구장 투구연습장 설치 : 2019.6.~7.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

익산시 실내야구연습장 건립

담당자

체육진흥과 김주용 859-5969

□ 사업목적 및 필요성

○ 우천 및 동절기에 익산 생활야구인 및 프로야구 선수들이 기후에 관계없이       연습할 수 있도록 연습장을 확보하고, 유소년 야구부 등의 전지훈련 및       전국대회 유치로 지역경제 활성화를 시키기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2021.2.

○ 위 치 : 익산시 부송동 180번지 일원(종합운동장 내)

○ 규 모 : 연면적 2,137㎡, 실내야구연습장, 트레이너실, 체력단련장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000		1	930	2,069
국 비	900			300	600
시 도 비
시군구비	2,100		1	630	1,469
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   30%)

○ 설계용역 착수                      : ‘19.9.16.

‣ kt측 및 야구협회 관계자 의견청취(5회)

○ 경관심의 완료                      : ’20.3.27.

○ 운동장 조성계획 변경               : ‘20.8.14.

□ 향후계획

○ 심의 및 인허가 등 행정절차 이행    : ’20.8.~9.

‣ 설계심의, 실시계획인가, 건축허가, 도 원가심사

○ 설계용역 준공 및 공사발주          : ‘20.9.

○ 공사착공 및 준공                   : ’20.10.~‘21.2.

사업명

반다비(장애인)체육센터·펜싱아카데미 복합건립

담당자

체육진흥과 정용복(☎859-5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인의 생활체육 환경 및 프로그램 지원으로 체육활동 참여, 홍보, 상담 등 어울림 체육활동 지원

○ 장애인 체육 및 펜싱 등의 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 익산시 부송동 산74-2번지 일원(익산종합운동장 내)

○ 규 모 : 대지면적 260,000㎡, 연면적 5,250㎡(지하1층, 지상3층)

▸ 지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸ 지상1층 : 수중운동실, 체육관, 소체육관, 카페라운지 등

▸ 지상2층 : 헬스장, 사무실, 체력측정실, 다목적실 등

▸ 지상3층 : 펜싱아카데미(펜싱피스트 12대, 사무실, 샤워장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,500		2	3,700	8,798
국 비	5,500		1	1,600	3,899
시 도 비	3,100			900	2,200
시군구비	3,900		1	1,200	2,699
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본설계 완료 후 실시설계 용역 중)

○ 복합건립 지방재정투자심사 이행	: ‘19. 07.

○ 복합건립 공유재산관리계획심의 및 의회 의결	: ‘19. 07.

○ 공공건축사업계획 사전검토	: ‘19. 09.

○ 설계공모 발주 및 당선작 선정	: ‘19. 11. ~‘20. 03.

○ 설계용역(150일) 및 운동장조성계획변경	: ‘20. 04. ~ 09.

○ 문체부와 평면계획 등 협의	: ‘20. 06.

□ 향후계획

○ 실시계획인가, 공사업체 및 감리원 선정	: ‘20. 09. ~ 10.

○ 공사 착공 및 준공	: ‘20. 11. ~‘21. 12.

사업명

익산시 보훈회관 건립

담당자

복지정책과 황강원(☎859-5348)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관이 건립된지 40여년 되어 노후하고 협소한 관계로

관내 9개 보훈단체를 전부 수용할 수 없음.

○ 보훈회관 신축을 통해 보훈단체 회원간 화합과 친목을 다지고 복지증진을

도모하여 국가유공자를 예우하고 자긍심을 고취하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020. 12

○ 위 치 : 익산시 익산대로64길 38

○ 규 모 : 부지 654.9㎡, 연면적 945㎡(285평)/ 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,630		219	3,411
국 비	500		59	441
시 도 비	500		0	500
시군구비	2,630		160	2,470
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정투자심사, 중기지방재정심사, 공유재산관리계획 심의 : 2017 ~ 2018

○ 설계용역 : 2019. 4. ~ 12.

□ 향후계획

○ 착공/ 준공 : 2020. 2 ~ 2020. 12

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

전북형 농촌관광 거점마을 육성사업

담당자

농촌활력과 김동주(☎859-7223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌체험마을 연계 및 광역화를 통한 관광자원 네트워크 구축 및 농촌관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 익산시 웅포면 강변로 284 일원

○ 규 모 : 체험관시설 조성, 다목적구장 조성, 체험프로그램 개발, 음식개발 및 운영실습 교육, 체험지도사 양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,100	2,983.2	116.8
국 비	1,550	1,491.6	58.4
시 도 비
시군구비	1,550	1,491.6	58.4
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 체험지도사 양성과정 실시	: 2015.  9월 ~ 2015. 11월

○ 기본계획수립 용역	: 2016.  4월 ~ 2016. 10월

○ 실시설계 용역	: 2016. 10월 ~ 2017.  7월

○ 체험관시설 조성 공사 완료	: 2018.  9월

○ 다목적구장 조성 공사 완료	: 2019.  6월

○ 사업 정산 및 행정절차 완료	: 2019. 12월

□ 향후계획

○ 거점마을 운영활성화 지원사업 추진	: 2020.  1월 ~ 12월

사업명

자연환경보전·이용시설조성

(바이오순환림 조성사업)

담당자

환경정책과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕궁정착농원 매입 휴․폐업축사의 철거 및 바이오순환림 조성으로 훼손된 생태계 복원 및 새만금상류 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 바이오순환림 조성 336,238㎡(기 매입축사 115,230㎡ 포함)

연도	계	2010	2011	2012	2017	2018
면적(㎡)	336,238	102,341	77,530	79,271	38,414	38,682

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,750백만원(국비 13,500, 시비 3,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,750	14,511	2,239
국 비	13,500	12,500	1,000
시 도 비
시군구비	3,250	2011	1,239
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88.5%)

○ 바이오순환림 조성사업 추진(조성면적 : 259,142)  : 2010.  1. ~ 2014. 5.

○ 2017년도 바이오순환림 조성사업 준공(38,414㎡)   : 2019.  4.

□ 향후계획

○ 2018년도 바이오순환림 조성사업 준공(38,682㎡)   : 2020.  4.

○ 바이오순환림 유지관리                          : 수시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 조성면적 변경 : 당초 332,903㎡ → 336,238㎡(휴․폐업축사 3,335㎡추가 매입)

사업명

금마서동생태관광지 조성사업

담당자

환경정책과 양희찬(☎859-5448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 생태관광지 육성사업 조성계획에 따라 도시형 생태관광지를 조성

하여 관광객 유치 및 지역 주민 수익창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2024년(10년간)

○ 위 치 : 익산시 금마면 동고도리 497-5(금마저수지 일원)

○ 규 모 : 금마저수지 수변 생태습지 복원, 생태습지 조성, 생태 관찰로 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,300	49	374	1,159	5,718
국 비	3,600	25	374	465	2,736
시 도 비	1,900	12	0	347	1,541
시군구비	1,800	12	0	347	1,441
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.7%)

○ 금마 서동생태관광지(수변데크) 조성

○ 생태 수변림 조성(2020)

□ 향후계획

○ 익산시 생태 중장기 수립용역(2020)

○ 식물 학습원 조성(2021)

○ 생태복원 사업 추진(2021~2024)

사업명

익산 e편한세상 방음벽 설치공사

담당자

환경관리과

서문선아(☎859-5491)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 철도 소음에 따른 주민 불편 및 민원 해소를 위한 방음벽 설치공사 수행

□ 사업개요

◦ 기 간 : 2019. 05. ~ 2020. 04.

◦ 위 치 : 익산시 모현동1가 955일원

◦ 규 모 : 높이 10m, 길이 400m 흡읍형 방음벽

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 총사업비 : 2,702백만원 (철도시설공단과 50:50으로 분담)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,702	100	2,602
국 비
시 도 비
시군구비	1,351	50	1,301
지 방 채
민간자본
기 타	1,351	50	1,301

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 익산역 인근 e편한세상 아파트 방음벽 설치 완료 (2020. 4.)

○ 방음벽 도로과로 이관 (2020. 4.)

□ 향후계획

○ 도로과에서 시설 유지·보수

□ 사업변경 내역(해당시)

총사업비		사업기간		사업규모(m)
당 초	변 경	당 초	변 경	당초	변경
3,300	2,702	2018.08. ~2019.12,	2019.05. ~ 2020.04	500	400

사업명

신재생자원센터 매립장 2단계 조성

담당자

청소자원과 김상훈(☎859-5427)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1단계 매립시설 사용년한 도래로 인한 2단계 매립시설 조성을 통한

건강한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 익산시 선화로 823(신재생자원센터 내)

○ 규 모 : 매립장조성 A=15,228㎡, 에어돔설치(112×135m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,714 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,714	3,865	849
국 비	1,414	1,102	312
시 도 비
시군구비	3,300	2,763	537
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 매립장 터파기 등 토공완료

○ 침출수 차수시설, 지하수 및 우수 배제시설 설치 완료

○ 매립장 지붕 설치 완료 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모: 당초 15,841㎡,      변경 15,228㎡

○ 총사업비: 당초 4,975백만원,   변경 4,714백만원

○ 사업기간: 당초 2016 ~ 2018,  변경 2016 ~ 2019

사업명

마한로 미개설구간 도로개설

담당자

도시개발과 정재형(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01. ～ 2022. 12.

○ 위 치 : 익산시 어양동 409-5번지(어양 변전소) 일원

○ 규 모 : L=520m, B=25m(대로3류14호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,520	4,218	3,013	1,289	-
국 비	900	400	500
시 도 비
시군구비	7,620	3,818	2,513	1,289	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사준공         : 2020. 6.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

이리남부지구 중로2류43호선 도로개설

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 06. ～ 2020. 12.

○ 위 치 : 익산시 인화동2가 105-17번지 일원

○ 규 모 : L=305m, B=17m(중로2류43호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,920	3,040	800	80	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,920	3,040	800	80	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 편입토지등 보상(100%)                    : 2011. 9. ~ 2019. 5.

○ 공사착공                                 : 2020. 2.

□ 향후계획

○ 공사준공                                 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	시 도 비	시군구비	지 방 채	기 타	증액사유
당 초	3,839	0	0	3,839	0	0	실시설계 결과에 따른 증액
변 경	3,920	0	0	3,920	0	0
증․감	증)81	0	0	증)81	0	0

사업명

송학동 티스테이션~평동로간(대로3류21호)도로개설

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 송학동 127-4번지 ~ 송학동 224-138번지

○ 규 모 : L=300m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,300		600	800	3,900
국 비
시 도 비
시군구비	5,300		600	800	3,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상 35%)

○ 실시설계용역 착수                        : 2019. 2.

○ 편입토지등 보상(35%)                     : 2019. 10. ~

□ 향후계획

○ 편입토지등 보상                          : 2020. 8. ~

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	시 도 비	시군구비	지 방 채	기 타	증액사유
당 초	3,000	0	0	3,000	0	0	실시설계 및 감정평가 결과에 따른 증액
변 경	5,300	0	0	5,300	0	0
증․감	증)2,300	0	0	증)2,300	0	0

사업명

익산대로10길(대로3류26호) 도로개설

담당자

도시개발과 정재형(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화지구 주거환경개선사업 시행과 중앙동 일원에 추진 되는 도시재생사업에 따른

교통량 증가 등 구도심지역의 교통난 해소 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 인화동1가 1-18번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=215m, B=6m→25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800		3,351	1,503	4,946
국 비
시 도 비
시군구비	9,800		3,351	1,503	4,946
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상 55%)

○ 실시설계용역                     : 2020. 3.

○ 편입토지 및 지장물 보상(55%)     : 2020. 6.

□ 향후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상          : 2020. 7. ~ 12.

○ 공사 착공 및 준공                : 2021. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	시 도 비	시군구비	지 방 채	기 타	증액사유
당 초	7,700	0	0	7,700	0	0	실시설계 및 감정평가 결과에 따른 증액
변 경	9,800	0	0	9,800	0	0
증․감	증)2,100	0	0	증)2,100	0	0

사업명

함열 다사랑~함열 농공단지간 도로개설

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함열읍 소재지와 함열 농공단지간 도시계획도로 개설로 북부지역 활성화 등 지역균형 개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 함열읍 와리 251-4번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=860m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,500		100		8,400
국 비
시 도 비
시군구비	8,500		100		8,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 관리계획결정용역(중지중)          : 2019. 8.

□ 향후계획

○ 사업 재검토

- 사업 반대 집단민원에 따른 재검토

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

황등 삼거리~성일고간 도로확포장

담당자

도시개발과 정재형(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황등중학교, 성일고 등 교육기관이 위치하는 황등 삼거리~성일고간 통학로 확보 및 차량불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 07. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 황등면 황등리 882-5번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=308m, B=8m→12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000		100	300	3,600
국 비
시 도 비
시군구비	4,000		100	300	3,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역 10%)

○ 관리계획결정용역          : 2020. 6.

□ 향후계획

○ 편입토지 및 지장물 보상          : 2020. 7. ~ 12.

○ 공사 착공 및 준공                : 2021. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도시취약지역 생활여건 개조

-KTX익산역주변지구 새뜰마을사업-

담당자

도시재생과 김수정(☎859-7282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경       개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년 ~ 2020년(6개년)

○ 위  치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

○ 규  모 : 35,089㎡

○ 사업량 : 완충녹지 조성, 소방도로 개설, 도시가스 공급, 경로당 신축,

주택정비지원, 마을공동체 지원사업, 주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,924백만원(국비 4,368, 도비 578, 시비 1,978)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년
계	6,924	5,189	460	1,275
국 비	4,368	3,380	355	633
도 비	578	451	1	126
시 비	1,978	1,358	104	516

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ 좁은 골목 확장공사

○ 완충녹지 조성공사

○ 가로환경정비사업

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 추진

□ 향후계획

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 마무리(2020.11 내 용역완료)

○ 주민운동시설(야외운동기구) 등 설치

사업명

동산동 월담지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 신두익(☎859-7288)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경       개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016~2021

○ 위  치 : 익산시 동산동 353-번지 일원

○ 규  모 : 43,300㎡

○ 사업량 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업,

주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694, 도비 346, 시비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,850	877	774	1,705	494
국 비	2,694	639	678	1,200	177
시 도 비	346	75	21	150	100
시군구비	810	163	75	355	217

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 사면보강사업 착수	: 2019.  3.

○ 새뜰마을 마스터플랜 변경 승인	: 2019.  7.

○ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립용역 준공	: 2019.  8.

○ 산사태위험지역 개선공사 준공	: 2019. 12.

○ 빈집정비 및 집수리지원사업 완료	: 2019. 12.

□ 향후계획

○ 주민공동이용시설 부지매입	: 2020.  3.

○ 사면보강사업 준공	: 2020.  5.

○ 주민공동이용시설 실시설계	: 2020.  5.~

○ 마을안길정비사업 부지매입	: 2020.  7.~

○ 마을안길정비사업 추진	: 2020.  9.~

○ 주민공동이용시설 준공	: 2020. 12.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 준공	: 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업면적 감소 50,456㎡→43,300㎡, 사업비감소 없음

사업명

모현동 옥창지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 김수정(☎859-7282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경        개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

○ 위  치 : 모현동1가 67-73번지 일원

○ 규  모 : 29,925㎡

○ 사업량 : 소방도로 개설, 주택정비 지원, 도시가스 공급, 주민공동이용시설                신축, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940, 도비 378, 시비 882)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,200		0.5	1,007	3,192.5
국 비	2,940			705	2,235
도 비	378			91	287
시 비	882		0.5	211	670.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 모현동 옥창지구 공모선정(2019.3.29.)

○ 모현동 옥창지구 마스터플랜 수립용역 추진(2019.11.12.~2020.10.6.)

□ 향후계획

○ 모현동 옥창지구 마스터플랜 수립용역 완료

○ 사면보강 및 소방도로 개설공사 착수

※ 마스터플랜 수립 완료에 따른 단위사업별 공사(용역) 추진

사업명

신흥근린공원 조성을 위한 공원부지 매입

담당자

도시전략사업과 김상수(☎859-7434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목  적: 시민의 삶의 질 향상과 환경적 지속가능성을 높일 수 있는 녹색

도시공원 조성 및 도심 속 쉼터 마련

○ 필요성: 무분별한 난개발 방지 및 자연환경 보전으로 시민여가활용에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2025.12.31.

○ 위 치 : 익산시 어양동 50-10번지 일원

○ 규 모 : 257,918㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 53,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	53,600		14,617	5,283	33,700
국 비
시 도 비	53,600		14,617	5,283	33,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27.3% - 금액기준)

○ 토지매입(보상) 중으로 매입완료 후 공원조성

○ 토지매입 상황 : 미조성 면적 257,918㎡ 중 102,045㎡ 보상(39%)

□ 향후계획

○ 사업기간 내 연차별 및 단계적 예산확보로 안정적 부지매입 추진

사업명

군도23호선 도로확포장공사

담당자

건설과 배석진(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼기 일반산단과 국도23호 및 천안~논산고속도로(연무IC)와 연계한

간선도로망 구축을 통해 원활한 교통 소통 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2021. 4

○ 위 치 : 함열용왕사거리 ~ 삼기 일반산단

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.4Km, B=16.5~20.5m(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,500	8,520	2,980	-	1,000
국 비
시 도 비
시군구비	12,500	8,520	2,980	-	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 실시설계 용역                              : 2013. 7. ~ 2015. 1.

○ 감정평가 및 보상 실시                      : 2016. 1. ~ 현재

○ 공사 추진(1차 완료)                         : 2018. 5. ~ 2020. 6.

□ 향후계획

○ 공사 추진(2차)                              : 2020. 7. ~ 2021. 4.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군도2호선(오산면소재지 진입

도로) 도로확포장

담당자

건설과 배석진(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오산면사무소 진입도로와 국도23호, 국도27호 및 남부지역과 연계한

간선도로망 구축을 통해 원활한 교통 소통 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2023. 12

○ 위 치 : 익산시 오산면 오산리, 송학리 일원(오산파출소~송학동 경계)

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0Km, B=24.0(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	100	500	500	3,900
국 비
시 도 비
시군구비	5,000	100	500	500	3,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   12%)

○ 실시설계용역 및 소규모환경영향평가용역 추진: 2018. 8. ~ 2020. 9.

▸ 행정절차 추진(농지전용, 보상절차 등)

□ 향후계획

○ 보상계획 열람공고 및 손실보상              : 2020.  9. ~ 2021. 9.

○ 공사 추진                                  : 2021. 10. ~ 2023. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경: 당초 2018. 8. ~ 2021. 12.

변경 2018. 8. ~ 2023. 12.

사업명

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 김혁주(☎859-5927)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및 구도심 주거환경개선을 통한 시민 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,599㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 1,027세대(임대 208/ 분양 819)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=1,084m, B=10~25m – LH공사 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2023년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,570백만원(국 4,805 시 9,985, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	14,570	12,170		2,400
국 비	4,085	4,085
시 도 비
시군구비	9,985	7,585		2,400
지 방 채
민간자본
기 타	500	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84 %)

◦ 전라북도 투융자 심사(적정)	: 2005.  5.  3

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007.  7.  6

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⟺ LH공사)      : 2008. 11. 11

◦ 사업시행인가 고시                                       : 2014.  4. 18

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016.  6. ~

◦ 지장물 철거(철거율 100%)                           : 2017.  5. ~

◦ 토양오염 실정보고(시공사 → LH)                    : 2019. 11. 11.

◦ 토양오염 발생 신고(LH → 환경관리과)               : 2020. 01. 28.

◦ 토양정밀조사 명령(환경관리과 → LH)                : 2020. 01. 30.

◦ 토양정밀조사 완료(LH, 우석대 산학협력단)            : 2020. 04.

◦ 오염토양 정화명령(환경관리과 → LH)                : 2020. 05. 12.

□ 향후계획

◦ 오염토 처리 착수                                   : 2020.  9.

◦ 공사 준공                                          : 2023.  5.

□ 사업변경 내역

◦ 사업기간 : 당초 2005 ~ 2021년 ⇒ 변경 2005 ~ 2023년

◦ 공동주택건설 : 당초 887세대 ⇒ 1,027세대

사업명

동부권 건강생활지원센터 신축공사

담당자

보건지원과 황승환(☎859-4807)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보건지소에서 건강생활지원센터로 기능전환됨에 따라 지역주민에게 맞는       건강생활실천사업을 추진하여 건강수명 연장 및 삶의 질 향상에 기여

○ 지역자원을 활용한 주민 참여형 건강생활지원센터를 신축함으로서 수요자       중심의 보건복지 통합서비스 문제를 해결해 나가는 계기를 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 6. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 익산시 금마면 서고도리 226-1외 10필지

○ 규 모 : 지상 2층, 연면적 804.15㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,764백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,764	893	1,871
국 비	1,028	751	277
시 도 비	257		257
시군구비	1,479	142	1,337
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○기능전환 방침결정 : 2017. 6. 23

○공유재산심의회 심의 : 2017. 11. 13

○기본 및 실시설계 : 2017. 11. ~ 2018. 8.

○공사 착공 : 2018. 11. 1

○공사 준공 : 2019. 8. 30.

○동부건강생활지원센터 개소 : 2019. 11. 1.

사업명

농산물종합가공센터설치

담당자

농촌지원과 최유진 (☎859 - 4952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물 종합가공센터 설치 운영으로 농업인의 가공창업 활성화 소득증대

○ 농업인들의 가공창업에 대한 사업 초기 투자 부담과 운영에 대한 시행착오를 줄임

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12.  ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 익산시 함열읍 익산대로 136620 (농업기술센터 내)

○ 규 모 : 995.16㎡

▸ 1층(584.18㎡) : 농산물 종합가공센터 / 사무실

▸ 2층(410.98㎡) : 농산물 가공실습교육장 / 농기계창고

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,580	390	2,190
국 비	500	194	306
시군구비	2,080	196	1,884

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 농산물 가공장비 구매 입찰 및 계약 체결               : 2019. 2 ～ 5월

○ 농산물 종합가공센터 신축공사(전기, 소방, 통신) 준공      : 2019. 7월

○ 농산물 종합가공센터 신축공사(전기, 소방) 감리용역 완료   : 2019. 8월

○ 농산물 종합가공센터 준공 : 2019. 9월

□ 향후계획

○ 지역 농산물 가공생산 지원 및 농산물가공 창업보육교육 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

구분	당초	현재
총사업비	2,400백만원(균특500, 시비1,900백만원)	2,580백만원(균특500, 시비2,080백만원)
사업기간	2017. 12 ~ 2019. 1월	2017. 12 ~ 2019. 12월

사업명

익산 천만송이 국화축제

담당자

기술보급과노은희(☎859-4977)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도농이 상생하는 창의적인 행사로 지역민의 정서함양 및 자긍심 제고

○ 관광객 유치 최대화로 지역 농특산물 홍보 및 판매로 지역경제 활성화

○ 우리지역 고유의 특화축제로 승화시켜 전국 최고의 축제 발전기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.10.25. ~ 11.3.(10일간)

○ 위 치 : 중앙체육공원 일원

○ 규 모 : 국화 전시작품 생산 및 전시연출 — 13만점

지역농업인, 기업 등 소득창출 산업화 부스운영 — 90개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000		1,000
국 비
시 도 비	1,000		1,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년 전시용 국화작품 제작 및 생산     : 2018. 11월 ～ 2019. 10월

○ 2019년 익산 천만송이 국화축제 개최      : 2019. 10월 ～ 11월

○ 사업평가 및 2020년 전시국화 생산준비    :  2019. 11월 ～ 12월

□ 향후계획

○ 2020년 전시용 국화작품 제작 및 생산     : 2019. 11월 ～ 2020. 10월

○ 2020년 익산 천만송이 국화축제 개최      : 2020. 10월 ～ 11월

사업명

귀금속보석클러스터 조성

담당자

보석박물관 변민우(☎859-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 디자인센터와 지식산업센터 구축으로 기획·디자인·생산·판매·전시기능과 함께 관광 기능까지 연결된 클러스터 구축으로 보석산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ~ 2018.

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 금광길 72-35

○ 규 모 : 대지면적 12,734㎡ / 건축규모 : 2동 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,570	17,320	1,250
국 비	12,972	11,724	1,248
시 도 비
시군구비	5,598	5,596	2
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투·융자사업(중앙) 심사	: 2012년

○ 설계용역 완료	: 2014.  7.

○ 건축공사 착공                             : 2016.  7.

○ 건축공사 준공                             : 2017. 12.

○ 부대공사(CCTV설치 및 연결다리 차양 설치) : 2018.  1. ~ 4.

○ 전북디자인센터 입주 및 개소식              : 2018.  4.

○ 사무 및 교육용 기자재 구입                  : 2018.  5.

○ 귀금속 공용장비 구축 및 부대시설 설치      : 2018.  6. ~ 2019.  8.

○ 귀금속 공용장비 시범운영                   : 2019. 10.

○ 주얼리 제작 3차원 그래픽 소프트웨어 설계 세미나  : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 전북디자인센터 귀금속장비운영 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간이 `12~`18년이었으나 `18년도 귀금속 공용장비 구축에 따른 장비 납품기한(`19년)에 따라 예산 이월하여 `19년으로 기간 연장

사업명

소스산업화센터 건립

담당자

국가식품클러스터담당관 윤상민(☎859-3966)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발효 원료 기반 소스산업 지원을 통한 미래 동반 신성장 산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426

○ 규 모 : 부지 6,537.6㎡, 건축 1,036.74㎡, 연면적 1,480.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,819백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,819	8,723	500	596	1,000
국 비	8,198	7,150	250	298	500
시 도 비	389	75	75	89	150
시군구비	2,232	1,498	175	209	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○소스산업화센터 국제 심포지엄 개최              : 2019. 6. 26.

○소스산업화센터 준공                            : 2019. 8. 26.

○소스산업화센터 국제기준인증(HACCP)취득 용역   : 2019. 9. ~ 2019. 12.

○소스산업화센터 시제품 제작 지원                : 2019. 11. ~

□ 향후계획

○ HACCP 품목 추가 인증(음료류)                 : 2020. 7.

○ 장비활용지원(시제품 제작 지원), 기술영업확대    : 2020. 7. ~ 2020. 12.

○ 국제 심포지엄 개최                             : 2020. 9.

사업명

고품질쌀 유통활성화 사업

담당자

농산유통과 문혜진(☎859-5257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쌀시장 전면 개발에 따른 급변하는 쌀 시장에 능동적으로 대처하기 위해 고품질쌀 유통시스템 구축을 위한 노후시설 개선 및 저장시설 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 익산시 익산농협RPC(금강동), 익산통합RPC(함열읍)

○ 규 모

- 익산농협 : 사일로500톤 8기, 건조기30톤 6기, 원료투입구 1식 등

- 익산통합 : 사일로500톤 7기, 건조기30톤 8기, 원료투입구 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,746백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,746		8,401	1,345
국 비	3,276		2,780	496
시 도 비	542.4		468	74.4
시군구비	1,265.6		1,092	173.6
지 방 채
민간자본	4,662		4,061	601
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ 공종별 준공 : 2019. 10. ~ 2020. 1.

○ 보조금 집행 : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 해당없음(사업완료)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2019년 총사업비 변경 : 당초 7,800백만원→변경 후 8,401백만원

(보조금 동일, 자부담 601백만원 증액)

사업명

서부권 로컬푸드직매장 신축

담당자

농산유통과김현경(☎859-3787)

□ 사업목적 및 필요성

○ 로컬푸드 직거래판매장 확대로 관내 소농·부녀농·가족농·귀농인의 소득

향상을 통한 농촌복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9.~2021. 9.

○ 위 치 : 익산시 모현동2가 671

○ 규 모 : 연면적 약998㎡ / 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000			1,500	1,500
국 비	600			600
시 도 비	270			270
시군구비	2,130			630	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공모사업 선정(국비6억확보)                             : 2019. 2.28.

○ 행정절차이행(지방재정투자심사, 공유재산관리, 도시계획 등)   : 2019. 4.~8.

○ 추경예산 확보(2회추경)                                 : 2019. 9. 4.

○ 설계용역 계약 및 착수                                  : 2020. 2.~

□ 향후계획

○ 설계용역 납품                                          : 2020. 7.

○ 신축공사업체 계약 및 시공                              : 2020. 9.~

○ 직매장 준공완료 및 개장                                : 2021. 9.

사업명

전라선 폐선부지 공원화사업

담당자

늘푸른공원과

주종건(☎859-5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원조성으로 시민들에게 휴식공간 제공 및 녹지공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2021

○ 위 치 : 전라선 폐선부지(인화동 ~ 춘포면)

○ 규 모 : A=137,816㎡, L=4.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,070	3,070	1,000		1,000
국 비	2,128	1,128	500		500
시 도 비	90	90
시군구비	2,052	1,552	500
지 방 채
민간자본
기 타	800	300			500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   80%)

○ 남부권 나눔숲 조성사업 준공                    : 2018. 06.

○ 다기능 힐링공원 조성사업, 명품 가로숲길 조성사업,

공공시설 여성화장실 확충사업 공사 준공         : 2019. 11.

○ 대규모 도시숲 조성사업(1차) 공사 준공           : 2019. 11

○ 대규모 도시숲 조성사업(2차) 공사 착공           : 2019. 09.

□ 향후계획

○ 대규모 도시숲 조성사업(2차) 공사 준공           : 2020. 11.

○ 무장애나눔길 조성사업 공모 선정                : 2020. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
기 간	2016 ~ 2020	2016 ~ 2021
총사업비	4,070백만원	5,070백만원

사업명

동산지구 보행환경 개선사업

담당자

도로과 남승복(☎859-5533)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새뜰마을~유천생태습지(동산동주민센터)로 이어지는 도로변에 인도가 없어       지역주민 및 관광객의 통행이 불편하고 사고위험이 높아

○ 보행통로를 설치하여 통행불편 해소 및 사고 예방으로 시민의 생명과 재산을

보호하고 쾌적한 도로환경 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2 ~ 2020. 12

○ 위 치 : 익산시 동산동 306-2번지 일원

○ 규 모 : 보행데크 L=770m, B=2.4m, 인도설치 L=350m, B=2m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	56	1,828	116
국 비	1,000		884	116
시 도 비	500	56	444
시군구비	500		500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 보행데크(L=770m, B=2.4m)설치 완료 ------------------------- 2019.  8

○ 전기공사(보안등) 완료 --------------------------------------------- 2019.  8

○ 인도공사(L=350m, B=2m) 완료 --------------------------------- 2019. 10

○ 수목식재(메타쉐퀘이아 및 관목) 완료 ------------------------ 2020.  4

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

솜리문화예술회관 리모델링 공사

담당자

예술의전당 국윤강(☎859-3755)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역문화 활성화 및 예술인 창작공간 제공

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사를 통해 시설물 안정성 확보 및 이용객 편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 선화1로 106(솜리문화예술회관)

○ 규 모 : 지하 1층/지상 3층, 연면적 7,005.91m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000		3,600	1,400
국 비	1,300		1,300
시 도 비	700			700
시군구비	3,000		2,300	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 실시설계용역 완료                              : 2019. 8.

○ 설계심의 완료                                  : 2019. 8.

○ 원가심사 완료(전라북도)                         : 2019. 9.

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사 시행(1차분)      : 2019. 11. ~ 2020. 8.

▸ 건축(전시실포함), 무대조명, 전기설비 분야 개선

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사 시행(2차분)      : 2020.  1. ~ 2020. 9.

▸ 무대음향, 무대장치, 기계설비 분야 개선

□ 향후계획

○ 리모델링 마무리 공사 진행                      : 2020. 7. ~ 2020. 12

▸ 무대조명, 무대음향 장비 보강, 내⸱외부 인테리어 개선 등

○ 리모델링 공사 준공 및 재개관                   : 2020. 10