109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 익산시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연번	사업명	총사업비	기투자	2020년 집행 사업비	2021년	2022년 이후	사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지진척율(%)
1	모현동행정복지센터신축	5,500	0	4,200	1,300	0	2020	2012	100
2	매일시장 주차환경 개선사업	2,100	1,531	569	0	0	2020	2019	100
3	수소충전소 보급사업	3,000	0	3,000	50	0	2021	2019	100
4	미륵사지 관광지 조성사업	32,554	25,900	4,654	2,000	0	2021	2018	80
5	왕궁보석테마 대표 관광지 육성	17,150	7,150	2,000	2,000	6,000	2024	2019	42
6	황등농공단지 공공폐수 처리시설 개량사업	4,600	223	170	2,297	1,910	2022	2019	1
7	익산 역사문화 도시 조성	3,750	2,245	820	685	0	2021	2016	90
8	서동역사문화공원 조성사업	19,430	1,457	1,283	1,034	15,656	2,023	2017	14
9	마동 테니스공원 조성사업	12,772	3,431	2,823	6,518	0	2021	2019	70
10	서부권역 다목적체육관건립	9,650	1,947	3,995	3,708	0	2021	2017	100
11	익산시 실내야구연습장 건립	3,890	1	925	2,964	0	2021	2018	100
12	익산시 반다비 체육센터 & 펜싱아카데미 건립	16,200	2	2,374	1,658	12,166	2022	2019	40
13	보훈회관 건립	2,453	217	2,236	0	0	2020	2017	100
14	자연환경보전 이용시설조성 (바이오순환림 조성사업)	16,750	16,009	741	0	0	2020	2009	100
15	금마 서동 생태관광지 조성사업	6,720	1,634	332	141	4,613	2,024	2015	34
16	이리남부지구 중로2류43호선 도로개설공사	3,920	3,840	80	0	0	2021	2011	100
17	송학동 티스테이션~ 평동로간도로개설	6,000	600	800	0	4,600	2022	2018	35
									55
								2019
							2021
						4,946
					1,503
				3,351
			0
		9,800
	익산대로10길 도로개설
18
19	함열다사랑 ~ 농공단지간 도로개설공사	2019	0	100	0	8,400	2022	2019	5
20	황등삼거리 ~ 성일고 도로확포장공사	2022	0	100	300	3,600	2021	2019	10
21	도시 취약지역 생활여건 개조	6,723	5,645	1,078	0	0	2020	2015	100
22	동산동 월담지구 새뜰마을사업	3,850	1,651	1,281	918	0	2021	2016	70
23	모현동 옥창지구 새뜰마을사업	4,200	0	295	2,493	1,412	2022	2019	10
24	신흥공원 조성사업	53,600	14,800	5,000	5,000	28,800	2025	2018	47
25	군도23호선 도로확포장	12,500	11,500	0	1,000	0	2021	2013	98
26	오산면 소재지 진입도로(군도2호)도로확 포장	5,000	600	500	0	3,900	2023	2019	12
27	평화지구 주거환경 개선사업	14,570	12,170	0	2,400	0	2024	2013	84
28	소스산업화센터 건립	13,052	9,222	596	1,342	1,892	2021	2016	85
29	솜리문화예술회관 리모델링 공사	5,000	0	3,600	1,400	0	2020	2018	100
30	세계유산 탐방거점센터 건립	21,450	0	1,514	3,886	16,050	2023	2020	15
31	치매전담형 공립노인요양 시설설치	3,015	0	0	2,015	1,000	2022	2020	0
32	국민생활관 노후시설 대규모 수선 및 리모델링	2,500	0	0	2,500	0	2021	2020	10
33	동물용의약품 효능·안전성 평가센터 건립	250	0	10	120	120	2022	2020	4
34	종합운동장 내 녹지 및 주차장 조성사업	2,884	0	484	0	2,400	2024	2020	15
35	중앙체육공원 주차장 조성사업	2,370	625	39	825	881	2022	2020	88
36	익산 평화지구 새뜰마을사업	4,134	0	0.8	1,226	2,907.2	2023	2020	3
37	익산시 발달장애인 평생학습관 건립	95	0	0	0	95	2024	2020	0
38	지능형교통체계(ITS) 구축사업	5,000	0	0	2,500	2,500	2022	2020	10
39	동익산역 진입로(대로3류26호) 도로개설공사	8,700	100	0	0	8,600	2023	2020	5
40	목천동 원주아파트~ 우석장례식장간 도로확장	9,139	4,139	100	2,002	2,898	2022	2020	50

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지첨부)

10-2. 지방채 발행사업

우리 익산시에서 지방채를 발행하여 ‘20년에 추진한 사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 익산시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	익산예술의 전당(BTL)	익산문화관리주식회사	81,296	19,641	3,861	3,912	53,882	15.01~ 34.12
	06 하수관거 임대형 민자사업(BTL)	푸른익산환경(주)	135,592	60,252	6,479	6,479	62,382	11.05~ 31.05
	09 하수관거 임대형 민자사업(BTL)	청정익산 (주)	154,611	41,691	7,355	7,355	98,210	14.08~ 34.08
	익산시립모현도서관(BTL)	익산지식공유(주)	12,795	15,415	1,756	1,795	19,175	11.04~ 31.04.
BTO	전라북도환경기초시설 건설 및 운영 민간투자사업	㈜전북 엔비텍	263,210	133,096	15,544	15,544	99,026	08.06~ 28.06
	가축분뇨 공공처리시설운영	뉴워터 (주)	54,243	105,345	6,682	6,245	57,739	12.01.~ 27.12.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황(별지첨부)