개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

모현동 행정복지센터 신축공사

담당자

회계과 전진수(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사의 노후 및 사무공간 협소로 모현 우수저류시설 부지에 신축 이전하여 주민 편의공간 및 근무환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 180번지 일원

○ 규 모 : 연면적 2,763㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	-	4,200	1,300	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500		3,200	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 수장공사 및 외벽 마감공사

○ 조경 및 부대공사

○ 공사준공 (2020. 10. 14.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

매일시장 주차환경개선사업

담당자

일자리정책과 문초롱(☎859-5219)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 주차환경을 개선하여 전통시장 이용객의 편의증진과 지역경제 활성화를

도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 9월 ~ 2020년 12월

○ 위 치 : 익산시 창인동1가 131-18번지 매일시장 주차장 일원

○ 규 모 : 주차장 확장(기존 31면 ⇒ 61면, 30면 증설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,099	1,531	568	-	-
국 비	1,259	777	482	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	840	754	86	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 주차장 확장공사 완공

□ 향후계획

○ 전통시장 이용객 및 상인에게 주차편의 제공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경(주차면수)

‣당초 계획 : 50면 증설 계획 ⇒ 변경 : 30면 증설

사업명

수소충전소 보급사업

담당자

일자리정책과 유다영(☎859-5217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 수소산업 인프라 기반 구축 및 수소차 보급 확대에 기여

○ 미세먼지 저감 및 수소차 이용 시민에 안정적이고 효율적인 수소연료 공급에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 1. ~ 2021. 6.

○ 수행기관 : 전북개발공사

○ 위    치 : 익산시 석암동 389-75

○ 규    모 : 250kg/일 (50대 충전/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비  30억원(국 15억, 도 7.5억, 시 7.5억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	3,000	-	-
국 비	1,500	-	1,500	-	-
시 도 비	750	-	750	-	-
시군구비	750	-	750	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021년 6월 준공 후 운영 개시

□ 향후계획

○ 정부의 수소정책을 활성화하고 미세먼지를 저감하고자 함

□ 사업변경 내역 (설계변경)

○ 부지 매입에 따른 기존 설계된 옹벽(약22m)삭제 및 통합운영사무실(9평) 신축

○ 수소충전소 효율 개선을 위한 옥외기계실(냉각기) 위치 변경

사업명

미륵사지 관광지 조성사업

담당자

문화관광산업과 정동수(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 7월 유네스코 세계유산으로 등재(미륵사지, 왕궁리유적) 대한민국유일의 역사적 특수성을 가진 지역인 미륵사지 관광지 활성화가 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. ~ 2021.(14년)

○ 위 치 : 전라북도 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

○ 규 모 : 108,743㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,554백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	32,554	25,900	4,654	2,000	-
국 비	5,127	2,800	2,327	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	25,427	23,100	2,327	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	-	2,000	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 공사추진 (부지조성(108,743㎡))

○ 관광지 조성사업 2차분 공사착공	: 2020. 01.

○ 관광지 조성사업 1차분 공사완료	: 2020. 03.

□ 향후계획

○ 관광지 조성사업 전체분 공사완료	: 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

왕궁보석테마 관광지 육성사업

담당자

문화관광산업과 정동수(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 대표관광지 활성화계획의 일환으로 왕궁보석테마 관광지의

인지도를 향상하기 위한 기반조성 및 관광홍보, 마케팅부분 강화 등

관광환경 개선을 통한 경쟁력 있고 특화된 대표 관광지 육성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2024.(10년)

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8 일원

○ 규 모 : 160,460㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	17,150	7,150	2,000	2,000	6,000
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 도 비	9,550	4,550	1,000	1,000	3,000
시군구비	6,600	1,600	1,000	1,000	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 보석어드벤처사업 공사추진                   : 2020. 08. ~ 현재

○ 하늘자전거길 실시설계 추진                  : 2020. 10.

□ 향후계획

○ 하늘자전거 조성사업 착공                    : 2021. 11.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

황등농공단지 공공폐수처리시설 개량사업

담당자

신성장동력과 유정옥(☎859-5766)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설용량 대비 폐수유입량이 현저히 적어 실제유입량에 맞는 시설용량으로       변경 및 28년이상 노후된 시설 전면 교체 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 황등면 율촌리 876

○ 규 모 : 6,000㎥/일 → 600㎥/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,600	223	170	2,297	1,910
국 비	2,300	223	77	90	1,910
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,300	0	93	2,207	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황 (추진단계 : 실시설계용역 착수)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 9.

○ 기본계획(변경) 수립 승인(전북지방환경청) : 2021. 1.

○ 설계심의 : 2021. 06.

□ 향후계획

○ 실시설계 승인신청(전북지방환경청)  : 2021. 07.

○ 용역 준공 : 2021. 10.

○ 공사 추진 : 2021. 11. ~ 2022. 10.

사업명

익산 역사문화도시 조성

담당자

역사문화재과

박수진(☎859-5798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사와 문화가 공존하여 지속적인 성장을 이끌어내는 역사문화도시 지정을 위한

예비사업으로 문화특화지역(문화도시) 조성사업 추진

○ 역사를 바탕으로 시민과 함께하는 역사문화도시 조성 및 역사 정체성 확립

□ 사업개요

○ 사업대상 : 익산시 전역

○ 사업기간 : 2017. ~ 2021. (5년)

○ 총사업비 : 3,750백만원[국비(균특) 1,500  도비 675  시비 1,575

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,750	2,245	820	685	0
국 비	1,500	898	328	274	0
시 도 비	675	404	148	123	0
시군구비	1,575	943	344	288	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)

◦역사예술 감성교육(동아리, 예술소풍, 실기대회 등)

◦라이브 고도 미디어 월 설치(익산역) 및 운영

◦왕도정원 가꾸기(남부시장 광장. 금마 이주단지, 모현동 옥창마을, 용안면 입산마을, 송학동

◦역사놀이터 한마당 운영(남부시장, 춘포역)

◦이리-익산 근대자료 아카이브 및 자료 제작 등

◦청년역사꾼 고도 LAB(창업지원 4팀)

◦예비문화도시 선정

□ 향후계획

◦ 문화특화지역(문화도시) 조성사업(5차년도)           : 2021.

◦ 문화도시 예비사업                                : 2020. 12. ~ 2021. 12.

◦ 문화도시 지정                                    : 2021. 12.

◦ 문화도시 조성사업 추진(5년간)                     : 2022. ~ 2026.

사업명

서동역사문화공원조성사업

담당자

역사문화재과 김주용(☎859-5779)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고도 지정의 근간이 되는 백제 무왕(서동)의 탄생설화에 따른 마룡지와       서동생가터의 주변에 대한 정비를 통해 백제왕도 익산의 정체성을 회복       하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 1월 ~ 2023년 12월

○ 위 치 : 익산시 금마면 서고도리 374 일원

○ 규 모 : 서동생가 재현, 전통연꽃재배지 조성, 수변데크 및 전망데크 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,430	1,457	1,283	1,034	15,656
국 비	13,600	-	-	560	13,040
시 도 비	2,915	-	-	72	1,678
시군구비	4,080	1,457	1,283	402	938
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 진입부 쉼터정비 및 정비공사                 : 2017. 7. ~ 12.

○ 도시관리계획 결정 및 공원조성계획수립       : 2018. 4. ~ 2021. 6.

○ 전략환경영향평가 용역 착수                  : 2020. 9. ~

○ 도시관리계획 결정 입안신청                  : 2021. 1.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 시행                            : 2022. 2.

○ 생가재현 및 용샘복원, 전통연꽃재배지조성 등   : 2022. ~ 2023. 12.

사업명

마동 테니스공원 조성사업

담당자

체육진흥과 정웅(☎859-5375)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 통한 지역 주민 건강증진 도모 및 테니스대회 개최로

지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017. ~ 2021.

○ 위  치 : 익산시 마동 64-8번지 일원

○ 규  모 : 대지면적 36,065㎡, 테니스구장 14면[실외 10면, 실내 4면(막구조)],                 관리실, 화장실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,772백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,772	3,431	2,823	6,518	-
국 비	2,820	68	846	1,906	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,952	3,363	1,977	4,612	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

○ 투자심사, 공유재산계획 의결, 실시계획인가   : `17.

○ 부지매입완료                            : `18. ~ `20. 3.

○ 설계용역 착수                           : `19.  8. 16.

○ 매장문화재 시굴조사 준공                : `19. 10. 14.

○ 공유재산관리계획 의결                   : `19. 11. 6.

○ 도 지방재정투자심사 재심사(조건부 의결)  : `19. 11. 7.

○ 문화재 발굴조사 완료                    : `20.  5. 6.

○ 심의 및 인허가 등 행정절차 이행         : `20. 8. ~ 9.

○ 감리용역 및 공사발주                    : `20. 10.

○ 공사착공                                : `20. 11.

□ 향후계획

○ 공사준공                                : `21. 12.

사업명

서부권역 다목적 체육관 건립

담당자

체육진흥과 정용복(☎859-5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발에 따라 유입된 서부권역 시민들의 건강증진 및 생활체육 활성화를 통한 지역 주민들의 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.

○ 위 치 : 익산시 모현동2가 267-1번지 일원(배산근린공원 내)

○ 규 모 : 대지면적 512,640㎡, 연면적 4,719㎡(지하1층, 지상3층)

▸지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸지상1층 : 수영장 6레인(어린이용 2레인 별도), 다목적 체육관 등

▸지상2층 : 사무실, 교육실, 체력단련실 등

▸지상3층 : 노인운동시설(상담실, 물리·재활치료실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,650	1,947	3,995	3,708	-
국 비	2,895	584	1,199	1,112	-
시 도 비	3,000	605	1,242	1,153	-
시군구비	3,755	758	1,554	1,443	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 100 %)

○ 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 의결	: `17. 9.

○ 중기지방재정계획 수립	: `17. 10.

○ 설계공모 및 작품선정	: `18. 1. ~ 4.

○ 설계용역 및 공원조성계획 변경	: `18. 5. ~ 10.

○ 계약심의위원회 심의	: `19. 2.

○ 공사 착공	: `19. 5.

○ 공사 준공	: `21. 1.

사업명

익산시 실내야구연습장 건립

담당자

체육진흥과 배민혁(☎859-5969)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우천 및 동절기에 익산 생활야구인 및 프로야구 선수들이 기후에 관계없이       연습할 수 있도록 연습장을 확보하고, 유소년 야구부 등의 전지훈련 및       전국대회 유치로 지역경제 활성화를 시키기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021. 4.

○ 위 치 : 익산시 부송동 180번지 일원(종합운동장 내)

○ 규 모 : 연면적 2,137㎡, 실내야구연습장, 트레이너실, 체력단련장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,890	1	925	2,964	-
국 비	1,600	-	381	1,219	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,290	1	544	1,745	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 설계용역 착수                      : `19. 9. 16.

‣kt측 및 야구협회 관계자 의견청취(5회)

○ 경관심의 완료                      : `20. 3. 27.

○ 운동장 조성계획 변경               : `20. 8. 14.

○ 심의 및 인허가 등 행정절차 이행    : `20. 8. ~ 9.

‣설계심의, 실시계획인가, 건축허가, 도 원가심사

○ 설계용역 준공 및 공사발주          : `20. 9.

○ 공사착공 및 준공                   : `20. 10. ~ `21. 4.

사업명

반다비(장애인)체육센터·펜싱아카데미 복합건립

담당자

체육진흥과 정용복(☎859-5872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인의 생활체육 환경 및 프로그램 지원으로 체육활동 참여, 홍보, 상담 등 어울림 체육활동 지원

○ 장애인 체육 및 펜싱 등의 전지훈련장으로 활용하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 익산시 부송동 산74-2번지 일원(익산종합운동장 내)

○ 규 모 : 대지면적 260,000㎡, 연면적 5,589㎡(지하1층, 지상3층)

▸지하1층 : 기계실, 전기실 등

▸지상1층 : 수중운동실, 체육관, 소체육관, 카페라운지 등

▸지상2층 : 헬스장, 사무실, 체력측정실, 다목적실 등

▸지상3층 : 펜싱아카데미(펜싱피스트 12대, 사무실, 샤워장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,200	2	2,374	1,658	12,166
국 비	5,870	1	860	601	4,408
시 도 비	2,740	-	402	280	2,058
시군구비	7,590	1	1,112	777	5,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본설계 완료 후 실시설계 용역 중)

○ 복합건립 지방재정투자심사 이행	: `19. 7.

○ 복합건립 공유재산관리계획심의 및 의회 의결	: `19. 7.

○ 공공건축사업계획 사전검토	: `19. 9.

○ 설계공모 발주 및 당선작 선정	: `19. 11. ~ `20. 3.

○ 설계용역(150일) 및 운동장조성계획변경	: `20. 4. ~ 9.

○ 문체부와 평면계획 등 협의	: `20. 6.

○ 실시계획인가, 공사업체 및 감리원 선정	: `20. 9. ~ 11.

□ 향후계획

○ 공사 착공 및 준공	: `20. 12. ~ `22. 9.

사업명

익산시 보훈회관 건립

담당자

복지정책과 황강원(☎859-5348)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관이 건립된지 40여년 되어 노후하고 협소한 관계로

관내 9개 보훈단체를 전부 수용할 수 없음.

○ 보훈회관 신축을 통해 보훈단체 회원간 화합과 친목을 다지고 복지증진을

도모하여 국가유공자를 예우하고 자긍심을 고취하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 익산시 익산대로64길 38

○ 규 모 : 부지 654.9㎡, 연면적 945㎡(285평)/ 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,453백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,453	-	217	2,236	-
국 비	338	-	59	279	-
시 도 비	338	-	0	338	-
시군구비	1,777	-	158	1,619	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료)

○ 지방재정투자심사, 중기지방재정심사, 공유재산관리계획 심의 : 2017 ~ 2018

○ 설계용역 : 2019. 4. ~ 12.

○ 건립공사 : 2020. 2. ~ 12.

□ 향후계획(사업완료)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

자연환경 보전이용시설 조성

(바이오순환림 조성사업)

담당자

환경정책과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕궁정착농원 매입 휴․폐업축사 철거 및 바이오순환림을 조성으로 훼손된 생태계 복원과 새만금 상류 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리, 구덕리 일원

○ 규 모 : 바이오순환림 조성 336,238㎡(기 매입축사 115,230㎡) 포함

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,750백만원(국비 13,500, 시비 3,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,750	16,009	741	-	-
국 비	13,500	13,146	354	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,250	2,863	387	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 바이오순환림 조성사업 추진(259,142㎡)            : 2010. 1. ~ 2014. 5.

○ 2017년도 바이오순환림 조성사업 준공(38,414㎡)    : 2019. 4.

○ 2018년도 바이오순환림 조성사업 준공(38,682㎡)    : 2020. 5.

□ 향후계획

○ 바이오순환림 유지관리(풀베기 등)                 : 연중

□ 사업변경 내역

○ 조성면적 변경 : 당초 332,903㎡ → 336,238㎡(휴․폐업축사 3,335㎡추가 매입)

사업명

금마서동생태관광지 조성사업

담당자

환경정책과 박종의(☎859-5492)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 생태관광지 육성사업 조성계획에 따라 도시형 생태관광지를 조성

하여 관광객 유치 및 지역 주민 수익창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2024년(10년간)

○ 위 치 : 익산시 금마면 동고도리 497-5(금마저수지 일원)

○ 규 모 : 금마저수지 수변 생태습지 복원, 생태습지 조성, 생태 관찰로 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,720	1,634	332	141	4,613
국 비	1,300	838	144	51	267
시 도 비	3,770	347	94	55	3,274
시군구비	1,650	449	94	35	1,072
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 34%)

○ 금마 서동생태관광지(수변데크) 조성완료

○ 생태 수변림 조성완료 (2020)

○ 식물학습원 실시설계중

□ 향후계획

○ 식물 학습원 조성(2022)

○ 에코캠핑장, 생태놀이터 조성(2022~2024)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 당초 7,300백만원에서 6,720백만원으로 감소

- 전북도에서 시군별 평가를 통해 사업비 배분 : `19, `20년 평가저조로 예산감소(580백만원)

사업명

이리남부지구 중로2류43호선 도로개설

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 06. ～ 2021. 06.

○ 위 치 : 익산시 인화동2가 105-17번지 일원

○ 규 모 : L=305m, B=17m(중로2류43호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,920	3,840	80	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,920	3,840	80	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사착공 및 준공                             : 2020. 2. ~ 2021. 6.

사업명

송학동 티스테이션~평동로간

(대로3류21호)도로개설

담당자

도시개발과 정영웅(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 송학동 127-4번지 ~ 송학동 224-138번지

○ 규 모 : L=300m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	600	800	-	4,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	600	800	-	4,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 편입토지등 보상(37%)                      : 2020. 2. ~

□ 향후계획

○ 편입토지등 보상                           : 2021. 8. ~

‣6필지 4,847㎡

○ 공사착공 및 준공                          : 2022. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	시 도 비	시군구비	지 방 채	기 타	증액사유
당 초	3,000	0	0	3,000	0	0	실시설계 및 감정평가 결과에 따른 증액
변 경	6,000	0	0	6,000	0	0
증․감	증)3,000	0	0	증)3,000	0	0

사업명

익산대로10길(대로3류26호) 도로개설

담당자

도시개발과 정영웅(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화지구 주거환경개선사업 시행과 중앙동 일원에 추진 되는 도시재생사업에 따른

교통량 증가 등 구도심지역의 교통난 해소 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 인화동1가 1-18번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=215m, B=6m→25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,310	3,351	1,503	-	6,456
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,310	3,351	1,503	-	6,456
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 편입토지등 보상(74%)                      : 2019. 7. ~

□ 향후계획

○ 편입토지등 보상                           : 2021. 8. ~

‣11필지 1,009㎡

○ 공사착공 및 준공                          : 2022. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	국 비	시 도 비	시군구비	지 방 채	기 타	증액사유
당 초	7,700	0	0	7,700	0	0	실시설계 및 감정평가 결과에 따른 증액
변 경	11,310	0	0	11,310	0	0
증․감	증)3.610	0	0	증)3,610	0	0

사업명

함열 다사랑~함열 농공단지간 도로개설

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 함열읍 소재지와 함열 농공단지간 도시계획도로 개설로 북부지역 활성화 등 지역균형 개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 함열읍 와리 251-4번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=860m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,500	100	-	-	8,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,500	100	-	-	8,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 관리계획결정용역(중지중)          : 2019. 8.

□ 향후계획

○ 관리계획결정용역 준공            : 2021. 12.

사업명

황등 삼거리~성일고간 도로확포장

담당자

도시개발과 정영웅(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황등중학교, 성일고 등 교육기관이 위치하는 황등 삼거리~성일고간 통학로 확보 및 차량불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 07. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 황등면 황등리 882-5번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=308m, B=8m→12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	100	200	-	3,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	100	200	-	3,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 관리계획결정용역                 : 2019. 7. ~ 2020. 7.

○ 실시설계용역                     : 2020. 7.

□ 향후계획

○ 편입토지 등 보상 추진            : 2021. 8. ~

○ 공사착공 및 준공                 : 2023. 1. ~ 12.

사업명

도시취약지역 생활여건 개조

-KTX익산역주변지구 새뜰마을사업-

담당자

도시재생과 김상현(☎859-7424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경       개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2015년 ~ 2020년(6개년)

○ 위  치 : 익산시 창인동2가 1-160번지 일원

○ 규  모 : 35,089㎡

○ 사업량 : 완충녹지 조성, 소방도로 개설, 도시가스 공급, 경로당 신축,

주택정비지원, 마을공동체 지원사업, 주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,723백만원(국비 4,368, 도비 578, 시비 1,777)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년
계	6,723	5,645	1,078	-
국 비	4,368	3,735	633	-
도 비	578	452	126	-
시 비	1,777	1,458	319	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 완충녹지 조성사업 완료

○ 가로환경 개선사업 완료

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 완료

※ 2020년 7월 사업 최종 완료

사업명

동산동 월담지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 최을성(☎859-7425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경       개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016~2021

○ 위  치 : 익산시 동산동 353-번지 일원

○ 규  모 : 43,300㎡

○ 사업량 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업,

주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694, 도비 346, 시비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,850	1,651	1,281	918	-
국 비	2,694	1,317	882	495	-
시 도 비	346	96	121	129	-
시군구비	810	238	278	294	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 주민공동이용시설 부지매입	: 2020.  3.

○ 사면보강사업 준공	: 2020.  5.

○ 주민공동이용시설 실시설계 착수	: 2020.  5.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 착수	: 2020.  7.

○ 마을안길정비사업 편입토지 보상계획 공고	: 2020.  7.

○ 주민공동이용시설 실시설계 완료	: 2020. 10.

○ 도시가스 공급 협약 체결 및 위탁	: 2020. 12.

○ 주민공동이용시설 착공	: 2020. 12.

□ 향후계획

○ 마을안길정비사업 부지매입	: 2021.  3.

○ 마을안길정비사업 추진	: 2021.  5.~

○ 주민공동이용시설 준공	: 2021. 10.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 준공	: 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업면적 감소 50,456㎡→43,300㎡, 사업비감소 없음

사업명

모현동 옥창지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 김상현(☎859-7424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경        개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

○ 위  치 : 모현동1가 67-73번지 일원

○ 규  모 : 24,640㎡

○ 사업량 : 소방도로 개설, 주택정비 지원, 도시가스 공급, 주민공동이용시설                신축, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940, 도비 378, 시비 882)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,200	0.5	295	2,493	1,411.5
국 비	2,352	-	295	1,745	312
도 비	511	-	-	224	287
시 비	1,195	0.5	-	524	670.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사면보강 정비 및 소방도로 개설 실시설계 완료	: 2020.  1.

○ 마스터플랜 최종 승인(국토교통부)	: 2020. 12.

○ 사면보강 정비 및 소방도로 개설 착공	: 2020. 12.

□ 향후계획

○ 사면보강 정비사업 및 소방도로 개설공사 추진	: 2021.  3.~

○ 도시가스 공급사업 위‧수탁 협약(전북에너지서비스)	: 2021.  3.

○ 단위사업별 사업 추진(쉼터,골목길환경정비,주택정비 등)	: 2021.  3.~

사업명

신흥근린공원 조성을 위한 공원부지 매입

담당자

도시전략사업과 한상현(☎859-7423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목  적: 시민의 삶의 질 향상과 환경적 지속가능성을 높일 수 있는 녹색

도시공원 조성 및 도심 속 쉼터 마련

○ 필요성: 무분별한 난개발 방지 및 자연환경 보전으로 시민여가활용에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.~2025.12.31.

○ 위 치 : 익산시 어양동 50-10번지 일원

○ 규 모 : 257,918㎡(전체면적 674,890㎡ 중 미집행 면적)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 53,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	53,600	14,800	5,000	5,000	28,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	53,600	14,800	5,000	5,000	28,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :공원부지 매입 중, 47.6%)

○ 토지매입(보상) 중으로 매입완료 후 공원조성

○ 토지매입 상황 : 미조성 면적 257,918㎡ 중 122,846㎡ 보상(46.8%)

□ 향후계획

○ 사업기간 내 연차별 및 단계적 예산확보로 안정적 부지매입 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모: 당초 전체면적 674,890㎡ → 변경 전체면적 722,164㎡

○ 총사업비: 당초 53,600백만원 → 미정(새로 편입된 부지 감정평가 미실시)

사업명

군도23호선 도로확포장공사

담당자

건설과 남승복(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼기 일반산단과 국도23호 및 천안~논산고속도로(연무IC)와 연계한

간선도로망 구축을 통해 원활한 교통 소통 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2021. 8

○ 위 치 : 함열용왕사거리 ~ 삼기 일반산단

○ 규 모 : 도로확포장 L=3.4Km, B=16.5~20.5m(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,500	11,500	-	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,500	11,500	-	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 실시설계 용역 완료                                   : 2015. 1.

○ 도로구역 결정                                        : 2016. 1.

○ 편입토지 등의 보상계획(열람) 공고                     : 2016. 3.

○ 장기계속공사 총액발주                                : 2018. 5.

○ 공사완료                                             : 2021. 8.

□ 향후계획(해당없음)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군도2호선(오산면소재지 진입

도로) 도로확포장

담당자

건설과 남승복(☎859-5536)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오산면사무소 진입도로와 국도23호, 국도27호 및 남부지역과 연계한

간선도로망 구축을 통해 원활한 교통 소통 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2023. 12

○ 위 치 : 익산시 오산면 오산리, 송학리 일원(오산파출소~송학동 경계)

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0Km, B=24.0(2→4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	600	500	-	3,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	600	500	-	3,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(보상협의 중)

○ 편입토지 등의 보상계획(열람) 공고                     : 2020. 11.

○ 도로구역 결정                                        : 2021.  5.

○ 편입토지 보상협의                             : 2020. 11. ~ 현재

□ 향후계획

○ 편입토지 보상                              : 2021. 8. ~ 2022. 12.

○ 공사 추진                                  : 2022. 1. ~ 2023. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 김혁주(☎859-5927)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및 구도심 주거환경개선을 통한 시민 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,599㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 1,027세대(임대 208/ 분양 819)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=1,084m, B=10~25m – LH공사 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2024년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,570백만원(국 4,805 시 9,985, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,570	12,170	2,400	-	-
국 비	4,085	4,085	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,985	7,585	2,400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84 %)

◦ 전라북도 투융자 심사(적정)	: 2005.  5.  3

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007.  7.  6

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⟺ LH공사)      : 2008. 11. 11

◦ 사업시행인가 고시                                       : 2014.  4. 18

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016.  6. ~

◦ 지장물 철거(철거율 100%)                           : 2017.  5. ~

◦ 공사 착공	: 2019. 08. 08.

◦ 토양정밀조사(우석대 산학협력단)	: 2019. 12.~2020. 04.

▸조사결과 : 오염량 108,141㎥(약 20만톤), 처리비 350억원 정도

◦ 사업성 제고방안 마련 및 경영투자심사(LH)	: 2020. 10. 13.

▸설계변경(안) 시행(준주거로 용도지역 변경, 세대수 355세대 증가)

◦ 정비계획 변경 및 건축 설계 변경	: 2021. 01. ~

◦ 흙막이 설치 및 오염토 반출	: 2021. 05. ~

□ 향후계획

◦ 기초공사 착수	: 2022. 상반기

◦ 공사 준공                                           : 2024. 하반기

□ 사업변경 내역

◦ 사업기간 : 당초 2005 ~ 2023년 ⇒ 변경 2005 ~ 2024년

사업명

소스산업화센터 건립

담당자

국가식품클러스터담당관 윤상민(☎859-3966)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발효 원료 기반 소스산업 지원을 통한 미래 동반 신성장 산업 육성을 위한 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2022년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 광암리 1426

○ 규 모 : 부지 6,537.6㎡, 건축 1,036.74㎡, 연면적 1,480.76㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,052백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,052	9,222	596	1,342	1,892
국 비	9,315	7,400	298	671	946
시 도 비	724	150	89	201	284
시군구비	3,013	1,672	209	470	662
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○소스산업화센터 시제품 제작 지원                : 2021. 1. ~

○소스 혁신기술협의체 운영                       : 2021. 4./6.

○소스·전통장류 혁신성장지원 기업 협약           : 2021. 4.

○소스·전통발효식품 인력양성 프로그램 운영       : 2021. 6. ~

□ 향후계획

○ HACCP 품목 추가 인증(음료류-액상차)           : 2021. 8.

○ 소스·전통장류 혁신성장지원 최종평가            : 2021. 9.

사업명

솜리문화예술회관 리모델링 공사

담당자

예술의전당 김아영(☎859-3758)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역문화 활성화 및 예술인 창작공간 제공

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사를 통해 시설물 안전성 확보 및 이용객 편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 익산시 선화1로 106(솜리문화예술회관)

○ 규 모 : 지하 1층/지상 3층, 연면적 7,005.91m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	3,600	1,400	-	-
국 비	1,300	1,300	-	-	-
시 도 비	700	-	700	-	-
시군구비	3,000	2,300	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 완료                              : 2019. 8.

○ 설계심의 완료                                  : 2019. 8.

○ 원가심사 완료(전라북도)                         : 2019. 9.

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사 시행(1차분)      : 2019. 11. ~ 2020. 8.

▸ 건축(전시실포함), 무대조명, 전기설비 분야 개선

○ 솜리문화예술회관 리모델링 공사 시행(2차분)      : 2020.  1. ~ 2020. 9.

▸ 무대음향, 무대장치, 기계설비 분야 개선

○ 리모델링 마무리 공사 진행                      : 2020. 7. ~ 2020. 12

▸ 무대조명, 무대음향 장비 보강, 내⸱외부 인테리어 개선 등

○ 리모델링 공사 준공 및 재개관                   : 2020. 10

사업명

세계유산 탐방거점센터 건립

담당자

역사문화재과

김영롱(☎859-5777)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고도익산의 분산된 세계유산과 익산 백제왕도 핵심유적에 대한 통합정보 제공       및 안내, 교육 등을 위한 거점공간을 마련하여 관광기반 구축

○ 익산 세계유산 탐방거점센터 주변 문화유적들과 연계한 효율적 탐방거점의       역할수행을 위한 가변성, 융통성있는 공간구성과 경제성 및 고도경관과의 조화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 익산시 동고도리 일원

○ 규 모 : 고도통합지원센터, ICT기술을 활용한 가상체험관 운영,                 유적간 연계 환승시설, 생활 SOC 주차장, 기타 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	21,450	-	1,514	3,886	16,050
국 비	15,015	-	1,061	2,720	11,234
시 도 비	1,930	-	136	350	1,444
시군구비	4,505	-	317	816	3,372
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 종합정비계획 수립 용역 착수 및 완료 :　2021.02.08.

○ 전라북도 원가심사 완료 :　2021.02.08.

○ 감정평가 토지 보상 시행 : 2020.07.~

○ 건축설계공모 완료 : 2021.03. ~ 05.

□ 향후계획

○ 건축설계공모 실시설계 추진 : 2021.05. ~ 2021.10.

○ 공사착공(단계별 연차사업 추진) : 2021.10. ~ 2022.12.

사업명

공립 치매전담형

노인요양시설 설치 사업

담당자

경로장애인과

정형준(☎859-5391)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부 역점 국책사업으로 공립요양시설인 치매전담형 요양시설을 설립(매입)하여 치매환자에 대한 전문적인 집중치료를 제공. 치매질환의 악화방지 및 공공의료 복지 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 익산시 함열읍 와리 545-327, 545-328번지

○ 규 모 : 연면적 1,331.33m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,015백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,015	-	-	2,015	1,000
국 비	2,256	-	-	1,256	1,000
시 도 비	157	-	-	157	-
시군구비	602	-	-	602	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

○ 소유자와 토지 및 지장물건 협의매수 진행 협의중

□ 향후계획

○ 토지 및 지장물건 협의매수 완료 : 2021. 10.

○ 실내 리모델링 설계 용역 실시 : 2021. 11.

○ 리모델링 공사 완료 : 2022. 5.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

국민생활관 노후시설 대규모 수선 및 리모델링

담당자

국민생활관 박정남(☎859-4286)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보일러·기계·전기·통신·소방설비 등 노후시설물 보수 교체로 이용자 편익 증대 및 안전성 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 익산시 선화로 255 올림픽기념국민생활관

○ 규 모 : 6,725㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	-	-	2,500	-
국 비	1,250	-	-	1,250	-
시군구비	1,250	-	-	1,250	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 설게용역 준공

○ 공사 착공

□ 향후계획

○ 공사 준공(2021. 11. 30.)

사업명

동물용의약품 효능·안전성평가센터 건립

담당자

축산과 김세종(☎859-5788)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동물용의약품 중심 “동물케어 클러스터 구축”과 관련, 우리 시에 “동물용

의약품 효능·안전성 평가센터”를 건립하여 국내 동물용의약품 산업 활성화와

고부가가치 신제품 개발 유도, 수출활성화 등 미래신성장 산업 육성 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 인수공통전염병연구소 내(익산시 하나로 820-120)

○ 규 모 : 연면적 9,300㎡, 지하 1층, 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원(국비 12,500, 도비 6,250, 시비 6,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,000	-	1,000	12,000	12,000
국 비	12,500	-	500	6,000	6,000
시 도 비	6,250	-	250	3,000	3,000
시군구비	6,250	-	250	3,000	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2020년 농식품부 신규사업 공모 신청 및 선정         : 2020. 4.

○ 시설 실시·설계 용역 제안 공모                      : 2020. 12.

○ 시설 실시·설계 기본 설계보고회                      : 2021. 5.

□ 향후계획

○ GLP 및 GCP 동물실험 시설, 교육 및 운영시설 건립

○ 동물시험시설 등 시범 운용

○ 평가시설 국가 등록

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

종합운동장 내 녹지 및 주차장 조성사업

담당자

체육진흥과 이윤진(☎859-4612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합운동장 부지 내 사유지에 대한 토지매입으로 신규 사업 추진시 소유권

분쟁 해소 및 원활한 종합운동장 시설조성 및 운영을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 익산시 무왕로 1397(종합운동장 일원)

○ 규 모 : 13,370㎡(익산시 팔봉동 436-13 외 25필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,884백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,884	0	484	0	2,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,884	0	484	0	2,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

○ 사유지 토지매입 계획                  : `19. 9. 30.

○ 공유재산 심의 행정절차 이행           : `19. 10. 2.

○ 실시설계 용역                         : `20. 1. 29. ~ 7. 17.

○ 분할측량 완료                         : `20. 4. 2.

○ 실시계획 인가 신청                    : `20. 4. 23.

○ 보상계획 공고                         : `20. 6. 11.

○ 도시계획사업 실시계획 인가            : `20. 6. 19.

○ 감정평가                              : `20. 7. 27. ~ 8. 27.

○ 손실보상협의(1~3차)                    : `20. 1. 29. ~ `21. 1. 12.

(매입 – 6필지(전부), 5필지(1/6), 지장물1, 이전-분묘1기)

□ 향후계획

○ 손실보상협의(최종) 추진 및 협의매수    : `21. 6. ~ 7.

○ 수용재결신청(협의불성립 및 미매입토지) : `21. 7. ~

○ 토지매입완료 후 주차장공사             : `21. 7. ~

사업명

중앙체육공원 주차장 조성사업

담당자

체육진흥과 박성권(☎859-4684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차장 용도로 지정된 부지로서 주차장 추가 조성 필요

○ 기 미집행 도시계획시설용지로 소유자의 재산권 침해 문제 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. 2. ～ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 익산시 어양동 65-12번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성(기존60면 → 180면), A=4,033㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,370	625	39	825	881
국 비	300	0	0	85	215
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,070	625	39	740	666
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88 %)

○ 중앙체육공원 주차장조성계획 수립               : `17. 5.

○ 계획부지 일부매입

- 2018년 : 어양동 65-12(579㎡)                   : `18. 2.

- 2019년 : 어양동 50-4(593㎡) 지분 70.84%        : `19. 5. ~ 11.

○ 중앙체육공원 주차장조성 실시설계용역           : `19. 9.

○ 실시설계용역 준공                              : `20. 8. 18.

○ 지방토지수용위원회 수용재결(3필지 1,499㎡)      : `21. 1. 29.

○ 법원공탁                                       : `21. 3. 22.

○ 등기완료                                       : `21. 4. 1.

○ 중앙토지수용위원회 이의재결                    : `21. 5. 27.

□ 향후계획

○ 주차장조성공사 부족예산 추가확보(6억원)         : `21. 12.

○ 조성공사 착공 및 준공                           : `22. 1. ~ 12.

사업명

평화동 평화지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 최을성(☎859-7425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경        개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2023년(4개년)

○ 위  치 : 평화동 33-19번지 일원

○ 규  모 : 77,100㎡

○ 사업량 : 완충녹지 조성, 위험담장 및 계단정비, 주택정비 지원, 도시가스                공급, 커뮤니티 거점 정비, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,134백만원(국비 2,894, 도비 372, 시비 868)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,134	-	0.8	1,226	2,907.2
국 비	2,894	-	0.8	858	2,035.2
도 비	372	-	-	110	262
시 비	868	-	-	258	610

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 마스터플랜 수립용역 착수	: 2020. 11.

○ 완충녹지 조성사업 실시설계 착수(우선사업)	: 2020. 12.

□ 향후계획

○ 우선사업 추진(완충녹지 조성, 위험담장정비 등)	: 2021.  3.~

○ 마스터플랜 수립용역 완료(최종승인 완료)	: 2021. 10.

※ 마스터플랜 수립 완료에 따른 단위사업별 공사(용역) 추진

사업명

익산시 발달장애인 평생교육센터 건립

담당자

경로장애인과 윤다영(☎859-5329)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발달장애인 평생교육기관 지정 및 운영비 지원 등은 대규모 예산 소요되는 사업        으로서 국가의 보조금 지원이 절실한 바 정부 주도적 정책 전환 필요

◦ 익산시 발달장애인 비율 전국 대비 1.8배 상회하여 평생교육센터 필요성 대두

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 익산시 월성동 324-1번지 일원(예정)

○ 규 모 : 부지 14,641㎡,, 연면적 2,700㎡내외 / 지상 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,500	-	-	-	9,500
국 비	5,600	-	-	-	5,600
시 도 비	800	-	-	-	800
시군구비	3,100	-	-	-	3,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 도 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 의결, 중기지방재정 수립 : 2020. 10.

○ 2021년 본예산 편성 (부지매입비 : 시비 316백만원)                 : 2020. 12.

○ 복지부 발달장애인 지원사업 용역비 (국비 1억) 편성                 : 2020. 12.

○ 익산시 발달장애인 권리보장 및 지원 조례 제정                  : 2021 . 4.

○ 복지부 발달장애인 평생교육 지원 인프라 확충방안 연구용역 계약      : 2021.  7.

□ 향후계획

○ 복지부 연구용역을 통해 건립 타당성 및 예산 지원 근거 마련하여 국비

확보 후 건립 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (변경전) 연면적 2,500㎡내외/지상 3층, (변경후) 연면적 2,700㎡내외/지상 4층

○ 사업기간 : (변경전)  2021년~2023년, (변경후)  2022년~2024년

사업명

지능형교통체계(ITS) 구축사업

담당자

교통행정과 이대성(☎859-5567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통이용자들에게 정보제공을 위한 첨단교통관리시스템을 도입하여 시민이       안전하고 편리한 교통관리 체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 익산시관내 주요도로 37.1km

○ 규 모 : 교통정보센터 전산시스템 및 현장시스템 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	-	2,500	2,500
국 비	3,000	-	-	1,500	1,500
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	-	-	1,000	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 진행

□ 향후계획

○ 실시설계 내역 국토교통부 검토                           : 2021. 8.

○ 정보통신 보안성 검토                                    : 2021. 8.

○ 사업착공 및 준공                            : 2021. 10. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동익산역 진입도로개설

담당자

도시개발과 정영웅(☎859-5581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 동산동 543-1번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로개설 L=1,120m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,700	100	0	-	8,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,700	100	-	-	8,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역                     : 2018. 3. ~ 2020. 9.

□ 향후계획

○ 편입토지 등 보상 추진            : 2022. 1. ~

○ 공사착공 및 준공                 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

목천동 원주아파트~우석장례식장간 도로확장

담당자

도시개발과 은종훈(☎859-5518)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 촉진 및 교통난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 평화육교~목천삼거리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1,400m, B=20m⇒35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,139백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,139	4,139	100	2,002	2,898
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,139	4,139	100	2,002	2,898
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2단계 1구간 공사(공정률 95%)          : 2021. 2. ~

□ 향후계획

○ 2단계 1구간 공사 준공                 : 2021. 9. ~

○ 2단계 2구간 편입토지 등 보상 추진     : 2022. 1. ~

○ 2단계 2구간 공사착공 및 준공          : 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)