10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별지첨부)

사업명

미륵사지관광지 조성사업

담당자

문화관광산업과 정동수(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산의 백제문화자원을 활용한 관광지 개발사업 추진 및 관광기반시설 확충으로 백제역사문화 중심지로서의 확고한 이미지 확보와 동시에 관광활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006 ~ 2022

○ 위 치 : 익산시 금마면 용순리, 기양리 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,998백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	34,998	32,998	2,000	-	-
국 비	5,127	5,127	-	-	-
도 비	-	-	--	-	-
시군구비	27,871	27,871	2,000	-	-
기 타	2,000	-	-	-	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 미륵사지 관광지 전체분 준공	: ’22. 03.

□ 향후계획

○ 지적확정측량 추진	: ’22. 09.

사업명

왕궁보석테마 대표관광지 육성사업

담당자

문화관광산업과 정동수(☎859-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전라북도 대표관광지 활성화계획의 일환으로 왕궁보석테마 관광지의 인지도를 향상하기 위한 기반조성 및 관광홍보, 마케팅부분 강화 등 관광환경 개선을 통한 경쟁력 있고 특화된 대표 관광지 육성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2024

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 호반로 8 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,550	9,150	2,000	1,400	4,000
국 비	1,000	1,000	-	-	-
도 비	9,250	5,550	1,000	700	2,000
시군구비	6,300	2,600	1,000	700	2,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ’15년∼’20년 사업 완료	: ’15. 01.∼’21. 12.

▸ 관광기반사업 : 보석광장 정비, 칠선녀광장 정비, 보석숲 및 공룡테마공원 정비, 생태습지공원(주차장, 연결교량) 정비, 보석어드벤처사업 등

▸ 관광진흥사업 : 맞춤형이벤트, 팸투어, 상설공연 및 축제 지원, 홍보마케팅 등

□ 향후계획

○ ’21년 사업(하늘자전거길) 완료	: ’23. 04.

○ ’22년 사업(하늘둥둥탐험로(숲체험원)) 완료	: ’22. 12.

○ ’23년, ’24년 사업은 기본계획 변경에 따라 사업 추진

사업명

이색교도소 조성사업

담당자

문화관광산업과 신성철(☎859-5276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교도소세트장 내에 다양한 컨텐츠를 설치하고 사계절 관광목적지로서 지역관광 활성화는 물론 거점관광지 방문객 유인에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023

○ 위 치 : 익산시 성당면 함낭로 207(익산교도소세트장) 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	-	-	2,000	5,800
도 비	3,000	-	-	1,000	2,900
시군구비	3,000	-	-	1,000	2,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 제7차 전북권 관광개발계획에 신규사업 반영	: ’21. 07.

○ 2021년 제4차 지방재정투자심사(전북도)	: ’21. 08.

○ 이색교도소 공유재산 심의	: ’21. 12.

○ 이색교도소 조성사업 기본구상 용역 착수	: ’22. 04.

○ 이색교도소 조성사업 타당성 조사 용역 완료	: ’22. 06.

□ 향후계획

○ 이색교도소 조성사업 기본구상 용역 완료	: ’22. 10.

○ 이색교도소 조성사업 공사(건축, 토목, 전기 등) 발주	: ’23. 02.

○ 이색교도소 조성사업 공사 완료 및 개장	: ’23. 12.

사업명

송학동 폐철도 미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

늘푸른공원과 최미영(☎859-5886)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐철도 유휴부지를 활용한 숲을 조성하여 숲 공간이 부족한 주민들의 녹색공간 활용으로 지역주민의 삶의 질 향상에 기여하고 도시열섬 및 폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12. (2022년 설계, 2023년 사업)

○ 위 치 : 익산시 송학동 880-4번지 일원(송학동 폐철도 유휴부지)

○ 규 모 : 3ha(L=1.5km × B=20m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	-	200	2,800
국 비	1,500	-	-	100	1,400
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	-	100	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2022년 미세먼지 차단숲 조성사업 선정            : 2021. 9.

○ 2021년도 지방재정 투자심사                      : 2021. 11.

□ 향후계획

○ 미세먼지 차단숲 조성사업 실시설계 추진          : 2022. 1. ~ 12.

○ 미세먼지 차단숲 조성사업 착공 및 준공           : 2023. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

새만금상류 바이오순환림 조성사업

담당자

환경정책과 진성재(☎859-4531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축사육으로 단절 · 훼손된 생태계를 복원하여 생물다양성 증진 및 새만금 수질 개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년~2024년

○ 위 치 : 익산시 왕궁면 온수리 205-64번지 일원(학호마을)

○ 규 모 : 바이오순환림 조성 78,726㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	-	500	-	4,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	250	-	2,250
시군구비	2,500	-	250	-	2,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 사업대상지(학호마을 축사) 새만금유역 3단계 수질개선대책 반영  : 2021.  6.

○ 공유재산 취득심의 및 재정심사 등 행정절차 완료        : 2021. 11.

□ 향후계획

○ 사업대상지 토지(학호마을 축사)매입                      : 2022.  6. ~

○ 새만금상류 바이오순환림 실시실계용역 실시             : 2022.  8. ~

○ 바이오순환림 조성사업 착공                            : 2022. 10. ~

○ 바이오순환림 조성사업 준공(연차별 추진)                : 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

금마 서동생태관광지 조성사업

담당자

환경정책과 김강태(☎859-5492)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금마저수지의 우수습지 자원을 활용한 수변 생태 휴식 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 익산시 금마면 동고도리 497-5번지 일원

○ 규 모 : 서동공원 수변로 및 에코힐링파크(생태학습원, 생태놀이터, 에코캠핑장 등) 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,760	1,966	49	840	3,905
국 비	725	725	-	-	-
시 도 비	4,358	763	37	630	2,928
시군구비	1,677	478	12	210	977
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 생태탐방로 조성                                          : ‘15 ~ ’19

○ 수변림, 조류관찰대 조성                                  : ‘19 ~ ’20

□ 향후계획

○ 생태학습원 조성사업 추진                                : ‘19 ~ ’23

○ 생태놀이터 및 에코캠핑장 조성사업 추진                  : ’22 ~ ‘23

○ 가족체험공간 및 생태숲조성사업 추진                     : ’23 ~ ‘24

사업명

익산 제3일반산단 행복주택 건립사업

담당자

일자리정책과 유경택(☎859-5292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 입주기업 근로자 및 청년들을 위한 임대주택을 제공하여 산업

단지의 활성화를 도모하고, 주거환경 개선으로 근로자들의 정착을 유도함

으로써 인구유입 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ~ 2024년 6월

○ 위 치 : 익산시 낭산면 용기리 1953-2 외 1

○ 규 모 : 대지면적 9,248㎡, 연면적 11,600.54㎡ (200세대/2개동/8층)

- 전용면적 25㎡ 78세대, 36㎡ 82세대, 44㎡ 40세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,142백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	32,142	-	-	9,658	22,484
국 비	9,642	-	-	2,893	6,749
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	-	1,365	3,135
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	18,000	-	-	5,400	12,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 행복주택 기본협약 체결(익산시&LH)               : 2020. 5.

○ 국토교통부 행복주택 후보지 선정                  : 2020. 12.

○ 행복주택 사업시행 협약 체결                      : 2021. 9.

○ 지방재정투자심사 승인(행안부)                     : 2021. 10.

○ 행복주택 주택건설 사업승인(국토부)                : 2021. 12.

○ 행복주택 주택건설 실시설계 및 토지매입            : 2022. 4~5.

□ 향후계획

○ 행복주택 건설공사 착공                            : 2022. 12.

○ 행복주택 건축 준공                                : 2024. 6.

사업명

수소충전소 보급사업

담당자

일자리정책과 이지용(☎859-5217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 수소산업 인프라 기반 구축 및 수소차 보급 확대에 기여

○ 미세먼지 저감 및 수소차 이용 시민에 안정적이고 효율적인 수소연료 공급에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

○ 수행기관 : 한국가스기술공사

○ 위    치 : 익산시 목천동 67-35

○ 규    모 : 640kg/일 (버스100대 충전/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국 4,200, 도 900, 시 900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	-	-	600	5,400
국 비	4,200	-	-	420	3,780
시 도 비	900	-	-	90	810
시군구비	900	-	-	90	810
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 수소버스충전소 설치사업 업무협약	: 2022. 06.

○ 수소버스충전소 설치사업 위수탁 협약	: 2022. 06.

○ 수소버스충전소 설치사업 실시설계	: 2022. 7. ~ 12.

□ 향후계획

○ 수소버스충전소 설치사업 착공 및 준공	: 2023. 1. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신청사 건립 추진

담당자

도시전력사업과 조휘재

□ 사업목적 및 필요성

○ 1970년 준공된 現청사는 노후청사로 안전성이 담보되지 못하고 업무면적 협소 및 부서 분산배치로 업무효율성 저하 및 원스톱 행정서비스가 이루어지지 못하고 있어 시설물의 구조적 안전성 확보와 양질의 행정서비스 제공을 위한 청사 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.12. ~ 2024.12.

○ 위 치 : 익산시 인북로 32길 1일원

○ 규 모 : 지하2층/지상10층, 연면적 : 40,233.92㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 94,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	94,800	1,776	7,405	59,319	26,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	49,100	1,776	7,405	19,319	20,600
지 방 채	45,700	-	-	40,000	5,700
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 신청사 건축 설계 완료

○ 신청사 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 신청사 건립공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

그린바이오 벤처 캠퍼스 조성 부지매입

담당자

미래농업과 김용진(☎859-5241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 IT·BT 등 관련 기술의 비약적인 발전으로 생명자원을 활용한 그린        바이오산업이 차세대 신성장산업으로 대두

○ 창업 확대와 보육 기능 환경을 제공할 수 있는 혁신성장 거점 제공으로        그린바이오 벤처기업의 경쟁력 확보 및 성장 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1.~3.

○ 위 치 : 익산시 함열읍 와리 1549-1번지 일원(함열농공단지 내)

○ 규 모 : 건물 1개동, 주차장, 휴게시설 등 총 28,000㎡ 규모

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :3,276백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,276	-	-	3,276	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,276	-	-	3,276	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 그린바이오 벤처캠퍼스 부지 매입(2022.03.31.)

□ 향후계획

○ 그린바이오 벤처캠퍼스 건축 공사 추진(2023~2024)

사업명

모현동 행정복지센터 신축공사

담당자

회계과 전진수(☎859-5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 청사의 노후 및 사무공간 협소로 모현 우수저류시설 부지에 신축 이전하여 주민 편의공간 및 근무환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 10.

○ 위 치 : 익산시 모현동 1가 180번지 일원

○ 규 모 : 연면적 2,763㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500	4,200	1,300	-	-
국 비	1,000	1,000	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	3,200	1,300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사준공 (2020. 10. 14.)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

동물용의약품 효능ㆍ안전성 평가센터 건립

담당자

축산과 최지혜(☎859-5269)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제기준에 부합된 평가시험기관을 통해 신약개발 등 동물케어 클러스터 기반 마련

○ 동물용의약품 국내 허가 및 해외 수출 시 유효성ㆍ안전성 평가 전문 시설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 익산시 월성동 인수공통전염병연구소 부지 내

○ 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 7,230㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원(국비 12,500, 도비 6,250, 시비 6,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		2020년	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,000	1,000	163	11,820	12,017
국 비	12,500	500	0	6,216.5	5,783.5
시 도 비	6,250	250	163	2,495.25	3,341.75
시군구비	6,250	250	0	3,108.25	2,891.75

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

○ 사업 대상지역 익산시 최종 선정                   : ‘20. 4.

○ 시험동물시설 설계용역 완료                       : ’21. 11.

○ 조달청 계약 발주, 입찰, 낙찰 및 계약완료          : ‘21. 12. ~ ’22. 6.

○ 평가센터 착공                                    : ‘22. 6.

□ 향후계획

○ 동물용의약품 효능ㆍ안전성 평가센터 구축사업 진행

▶ 2023년 12월 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2020. ~ 2022. → (현재) 2020. ~ 2023.

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 (작성서식)

- 사업별로 별지 작성

사업명

익산시장배 전국승마대회

담당자

축산과 강민희(☎859-4505)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시 공공승마장 준공시기에 맞춰 전국승마대회를 유치하여 승마장과 광활한 승마길에 대한 대대적인 홍보로 서해안 거점 승마시설로 자리매김하고 대회기간 동안 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 대회기간 : 2022. 11. 5. ~ 2022. 11. 7.

○ 위    치 : 익산시 공공승마장(용안면 강변로 1105)

○ 참여규모 : 선수 및 관계자 708명 / 마필 472두

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	173	-	173	-	-
국 비	50	-	50	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	90	-	90	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	33	-	33	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투자심사 심의                    : `21. 5 ~ 6.

○ 전라북도승마협회 교부결정               : `21. 11.

○ 제1회 익산시장배 전국승마대회 개최      : `21. 11. 5 ~ 7.

□ 향후계획(사업완료)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

기능성원료은행 구축사업

담당자

국가식품클러스터담당관 이귀영(☎859-3955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국산 농산물 유래 기능성 식품소재 생산·보관·공급 등 시설 인프라 구축을 통한 기능성 원료 국산화 및 농업과 식품산업 연계

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024

○ 위 치 : 전북 익산시 왕궁면 광암리 1409(S1 부지)

○ 규 모 : 건축 626.61㎡ , 연면적 1,872.49㎡, 지하1층 ~ 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,420	420	1,644.2	7,794.8	5,561
국 비	10,500	-	1,098.9	5,613.1	3,788
시 도 비	1,350	-	163.6	654.8	531.6
시군구비	3,570	420	381.7	1,526.9	1,241.4
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  16%)

○건축 관련 : 설계완료(10%)

- 건축 입찰 조달청 의뢰

○장비 관련 : 장비구축(22%)

- 1차 장비(원료표준화) 도입 완료 : 8종 19대 1,284,000천원

- 2차 장비(생산장비)심의위원회 완료 : 2종 2대 1,554,882천원

□ 향후계획

○ 건축 추진(착공 2022.8월 예정 ~ 준공 2024.2월 예정)

○ 장비 구축 계속(2021 ~ 2023)

□ 사업변경 내역

○ 공사기간 변경에 따른 사업기간 변경

- 공사기간 : (당초) 14개월(‘22.5 ~ ’23.7) → (변경) 18개월(‘22.8 ~ ’24.2)

사업명

배산공원 정비사업

담당자

늘푸른공원과 진효섭(☎5892)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 시 중추적 역할을 하는 공원 정비로 시민 친화적 여가 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.1 ~ 2022.12.

○ 위 치 : 익산시 모현동2가 산9-1번지 일원

○ 규 모 : 512,640㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	0	290	1710	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	0	290	1710	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 맞이공간 정비사업 : 2021.1. ~ 2021.5.

○ 산 책 로 정비사업 : 2021.9. ~ 2022.4.

○ 둘레길 및 야간경관 정비사업 : 2022.1. ~ 2022.12.

□ 향후계획

○ 공 원 등 정비사업 : 2022.7.~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

저소득층 일자리 창출을 위한 공동작업장 건립

담당자

복지정책과 고광현(☎859-5399)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역자활센터 공동작업장 운영으로 저소득층 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. ~ 2023. 1.

○ 위 치 : 익산시 목천동 248 외 1필지

○ 규 모 : 부지 6,272㎡, 연면적 683.35㎡(206평) / 지상1층

○ 내 용 : 식품공장(두부제조 및 유기농산물 전처리 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	-	813	1,687	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,500	-	813	1,687	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 자활공동작업장 사업부지 매입(812백만원)            : 2021. 8.

○ 기본 및 실시설계 용역(담건축, 77백만원)               : 2021. 12. ~ 22. 6.

○ 설계심의 완료 및 공사계약 심사(감사위원회)         : 2022. 5.

○ 공사 및 감리업체 선정((주)에이치비건설 외 5개소)    : 2022. 7.

□ 향후계획

○ 자활공동작업장 착공 및 준공                  : 2022. 8. ~ 2023. 1.

사업명

국민생활관 노후시설 대규모 수선 및 리모델링

담당자

국민생활관 김덕종(☎859-4283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1990년 준공 이후 30년간 노후화된 시설을 개보수하여 다중이용시설 안전 확보 및 주민 편익 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 익산시 선화로 255

○ 규 모 : 6,725㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,483	-	2,438	45	-
국 비	1,241.5	-	1,219	22.5	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,241.5	-	1,219	22.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료

□ 향후계획

○ 시설 및 장비 유지관리 철저

사업명

동산동 월담지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 최을성(☎859-7425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경       개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016~2021

○ 위  치 : 익산시 동산동 353-번지 일원

○ 규  모 : 43,300㎡

○ 사업량 : 주택정비 지원, 안전확보, 생활·위생인프라, 마을공동체 지원사업,

주민역량강화 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원(국비 2,694, 도비 346, 시비 810)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,468	2,932	536	-	-
국 비	2,405	2,199	206	-	-
시 도 비	309	217	92	-	-
시군구비	754	516	238	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 주민공동이용시설 부지매입	: 2020.  3.

○ 사면보강사업 준공	: 2020.  5.

○ 주민공동이용시설 실시설계 착수	: 2020.  5.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 착수	: 2020.  7.

○ 마을안길정비사업 편입토지 보상계획 공고	: 2020.  7.

○ 주민공동이용시설 실시설계 완료	: 2020. 10.

○ 도시가스 공급 협약 체결 및 위탁	: 2020. 12.

○ 주민공동이용시설 착공	: 2020. 12.

○ 마을안길정비사업 착공	: 2021.  5.

○ 마을안길정비사업 준공	: 2021. 12.

○ 주민공동이용시설 준공	: 2021. 12.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어 용역 준공	: 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업면적 감소 50,456㎡→43,300㎡, 사업비감소 없음

사업명

모현동 옥창지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 김상현(☎859-7424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경        개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2019년 ~ 2022년(4개년)

○ 위  치 : 모현동1가 67-73번지 일원

○ 규  모 : 24,640㎡

○ 사업량 : 소방도로 개설, 주택정비 지원, 도시가스 공급, 주민공동이용시설                신축, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940, 도비 378, 시비 882)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,200	295	2,217	1,688
국 비	2,940	295	1,620	1,025
도 비	378		204	174
시 비	882		393	489

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 마스터플랜 최종 승인(국토교통부)	: 2020. 12.

○ 사면보강 정비 및 소방도로 개설 착공	: 2020. 12.

○ 도시가스 공급사업 위‧수탁 협약체결(전북에너지서비스)	: 2021.  3.

○ 주민역량강화 및 휴먼케어용역 착수	: 2021.  7.

○ 골목길 환경정비 공사 착공	: 2021.  7.

○ 빈집정비사업 준공	: 2021.  8.

○ 소방도로개설 준공	: 2021.  9.

○ 쉼터 조성, 사면보강 정비 준공	: 2021. 11.

○ 주택정비사업, 재해 및 범죄예방시설 설치 준공	: 2021. 11.

○ 주민공동이용시설 신축 착공	: 2021. 12.

□ 향후계획

○ 주요 단위사업추진(주민공동이용시설, 쌈지공원 등)	: 2022.  1.~

사업명

평화동 평화지구 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 최을성(☎859-7425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활환경이 취약한 지역에 대해 기초생활인프라 정비 및 노후된 주택환경        개선과 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 일자리 복지 등 마을 공동체       활성화를 도모하여 지속 가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 목표로 추진

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 ~ 2023년(4개년)

○ 위  치 : 평화동 33-19번지 일원

○ 규  모 : 77,100㎡

○ 사업량 : 완충녹지 조성, 위험담장 및 계단정비, 주택정비 지원, 도시가스                공급, 커뮤니티 거점 정비, 휴먼케어 및 주민역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,134백만원(국비 2,894, 도비 372, 시비 868)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,134	1	1,212	1,609	1,312
국 비	2,894	1	963	1,012	918
도 비	372		74	179	119
시 비	868		175	418	275

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 마스터플랜 수립용역 착수	: 2020. 11.

○ 완충녹지 조성사업 실시설계 착수(우선사업)	: 2020. 12.

○ 완충녹지, 커뮤니티 거점정비 실시설계 완료(우선사업)	: 2021.  3.

○ 위험담장정비 준공(우선사업)	: 2021.  6.

○ 4통 평화경로당 리모델링 준공(우선사업)	: 2021.  6.

○ 완충녹지 조성사업 준공(우선사업)	: 2021.  9.

○ 3통 경로당 용도변경 및 리모델링 준공(우선사업)	: 2021. 10.

○ 주민활력센터 신축 실시설계 착수(우선사업)	: 2021. 11.

○ 마스터플랜 수립용역 준공(국토우 승인 완료)	: 2021. 12.

□ 향후계획

○ 주요 단위사업 추진(주민활력센터, 도시가스, 주택정비 등)	: 2022.  1.~

※ 마스터플랜 수립 완료에 따른 단위사업별 공사(용역) 추진

사업명

남중동(2청사) 주차타워 조성사업

담당자

교통행정과 최수민(☎859-7265)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산시청 신청사 건립에 따른 주차수요 발생 및 고질적인 남중동 불법 주정차 해소를 위해 주차타워 조성 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 익산시 남중동 86-80번지(A=2,668㎡)

○ 규 모 : 주차타워 4층 건설(연면적 7,668㎡ 내외, 주차면수 230면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,400	-	-	400	8,000
국 비	4,200	-	-	200	4,000
시 도 비
시군구비	4,200	-	-	200	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 2021~2023 중기지방재정계획 반영	: 2020. 10.

○ 공유재산 관리계획 추진	: 2021. 03.

▸건축물(신규) 연면적 7,668㎡

○ 지방재정투자심사(도) 조건부 가결	: 2021. 05.

▸중기지방재정계획반영요구(※ 21. 9. 지방재정계획 반영 완료)

○ 2022년 주차환경개선사업 균특 국비 2억 확보완료	: 2021. 08.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 추진	: 2022. 01. ~ 12.

○ 주차타워 조성공사 추진	: 2023. 01. ~ 12.

사업명

역골지구 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 최수민(☎859-7265)

□ 사업목적 및 필요성

○ 익산역 방문객 주차수요 해소를 위해 역골지구 주차장 조성 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 익산시 송학동 85-5번지 일원(7,528㎡)

○ 규 모 : 공영주차장 172면 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	2,737	381	882	-
국 비	600	600	-	-	-
시 도 비
시군구비	3,400	2,137	381	882	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 역골지구 정비계획변경 및 지구단위계획 수립	: 19. 12. ~ 20. 12.

▸도시계획시설 변경(완충녹지→주차장) 및 정비계획 변경 고시

○ 사업지구 부지정리 추진	: 20.  9. ~ 20. 12.

▸국공유지 및 매입된 부지정리를 통한 임시주차장 120면 조성

○ 사업시행계획인가 및 실시설계용역 추진	: 20. 11. ~ 21.  6.

▸관계부서(기관) 및 중앙토지수용위원회 사전협의 완료

○ 사업시행계획인가 고시	: 21.  9.

○ 사업시행계획인가 고시 및 공사 착수	: 21. 10. 15.

□ 향후계획

○ 역골지구 주차공원 조성사업 공사 준공	: 22.  4.

사업명

무인교통단속장비 등 설치사업

담당자

교통행정과 최영준(☎859-5567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이보호구역 교통안전 및 취약계층·취약지역에 대한 교통사고 위험요인 개선을 통한 교통사고 예방 및 감소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 익산시 어린이보호구역 내

○ 규 모 : 무인교통단속장비, 교통신호기, 기타 교통안전시설 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,310	-	3,628	682
국 비	2,030	-	1,689	341
시 도 비	250	-	250
시군구비	2,030	-	1,689	341
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021년 예산 확보(제1회 추경)	: 2021. 06.

○ 사업 설계 및 발주	: 2021. 07. ~ 2022. 04.

▸어린이보호구역 내 무인교통단속장비, 교통안전시설 설치

○ 공사 착공 및 준공	: 2021. 09. ~ 2022. 06.

▸무인교통단속장비 106대 설치, 신호기, 안전펜스 등 교통안전시설 설치

□ 향후계획

○ 사업 준공 및 보조금 정산	: 2022. 06. ~ 12.

사업명

지능형교통체계(ITS) 구축사업

담당자

교통행정과 최영준(☎859-5567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심부 주요도로의 교통체증 심화 및 교통사고 증가에 따라 교통관리시스템 개선 필요

○ 교통이용자들에게 정보제공을 위한 첨단교통관리시스템을 도입하여 시민이 안전하고 편리한 교통관리체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 4.

○ 위 치 : 익산시 관내 주요도로

○ 규 모(연장 19.1km)

구분	도로명	시 종 점	연장
1	익산대로	원대사거리〜평화사거리	3.6km
2	무왕로	송학지하차도〜가좌교차로	15.5km

○ 사업내용

․현장설비 : 스마트교차로 10개소, 스마트횡단보도 2개소, 신호제어시스템 34개소, 감응신호시스템 5개소, 긴급차량우선신호시스템 27개소, VMS 4개소, 주차정보제공시스템 6개소, 통신망 6.19km 등

․센터설비 : 서버, 스토리지, 방화벽 등 H/W, DBMS, 영상분석 라이선스 등 상용 S/W 및 응용 S/W상용 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		358	3,844	798
국 비	3,000		179	1,922	399
시 도 비
시군구비	2,000		179	1,922	399

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 실시설계용역 준공	: 2021. 11.

○ 감리용역 계약	: 2022. 1. ~ 2023. 4.

○ 2021년 익산시 ITS 구축사업 계약	: 2022. 2. ~ 2023. 2.

○ 2021년 익산시 ITS 구축사업 사전사후 효과평가 용역 계약	: 2022. 2. ~ 2023. 2.

□ 향후계획

○ 2021년 익산시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 준공	: 2023.  2.

사업명

평화지구 주거환경개선사업

담당자

주택과 김혁주(☎859-5927)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 도시기반시설 확충 및 구도심 주거환경개선을 통한 시민 삶의 질 향상

◦ 구도심지역 공동주택 보급으로 서민 주거안정에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 평화동 90-20번지 일원(사업면적 63,599㎡)

◦ 사업내용

▸ 공동주택 건설 : 1,027세대(임대 208/ 분양 819)

▸ 기반시설설치 : 도로개설 L=1,084m, B=10~25m – LH공사 대행사업

◦ 사업기간 : 2005년 ∼ 2024년

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

◦ 기반설치비 : 14,570백만원(국 4,805 시 9,985, 특 500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,570	12,170	2,400	-	-
국 비	4,085	4,085	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,985	7,585	2,400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	500	500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84 %)

◦ 전라북도 투융자 심사(적정)	: 2005.  5.  3

◦ 주거환경개선사업 정비구역 결정고시	: 2007.  7.  6

◦ 사업시행자 지정 및 협약 체결(익산시 ⟺ LH공사)      : 2008. 11. 11

◦ 사업시행인가 고시                                       : 2014.  4. 18

◦ LH 사업타당성 조사 용역 준공(적정)                  : 2014. 11. 28

◦ 토지 지장물 협의보상                               : 2016.  6. ~

◦ 지장물 철거(철거율 100%)                           : 2017.  5. ~

◦ 공사 착공	: 2019. 08. 08.

◦ 토양정밀조사(우석대 산학협력단)	: 2019. 12.~2020. 04.

▸조사결과 : 오염량 108,141㎥(약 20만톤), 처리비 350억원 정도

◦ 사업성 제고방안 마련 및 경영투자심사(LH)	: 2020. 10. 13.

▸설계변경(안) 시행(준주거로 용도지역 변경, 세대수 355세대 증가)

◦ 정비계획 변경 및 건축 설계 변경	: 2021. 01. ~

◦ 흙막이 설치 및 오염토 반출	: 2021. 05. ~

□ 향후계획

◦ 기초공사 착수	: 2022. 상반기

◦ 공사 준공                                           : 2024. 하반기

□ 사업변경 내역

◦ 사업기간 : 당초 2005 ~ 2023년 ⇒ 변경 2005 ~ 2024년